Республика Ингушетия, город Магас, проспект имени Идриса ФИО1, 18 телефон: 

<

***>, http://ingushetia.arbitr.ru/info@ingushetia.mail 

ИМЕНЕМ РОССИЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

 

г. Магас Дело № А18-2426/2025 

Резолютивная часть решения оглашена 14 октября 2025 года. Полный текст решения изготовлен 22 октября 2025 года.  

Арбитражный суд Республики Ингушетия в составе судьи Газдиева И.И., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чемурзиевой Ф.И., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное объединение «ГЕОПРОЕКТ» (ИНН: 

<

***>) (далее ООО "НПО «Геопроект») к Министерству строительства Республики Ингушетия (ИНН: 

<

***>) о взыскании задолженности по государственному контракту № 79/23 от 06.12.2023г.,  

в отсутствие надлежащим образом извещенных участников, 

УСТАНОВИЛ 

В Арбитражный суд Республики Ингушетия обратилось общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное объединение «ГЕОПРОЕКТ» с исковым заявлением к Министерству строительства Республики Ингушетия о взыскании задолженности по государственному контракту.  

 О месте и времени проведения судебного заседания истец и ответчик извещены надлежащим образом в порядке, предусмотренном главой 12 АПК Российской Федерации, что подтверждается уведомлениями о вручении почтового отправления содержащего судебный акт о принятии искового заявления к производству.  

Судебное заседание проведено в порядке ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей сторон.  

Отзыв на исковое заявление Ответчиком суду не представлен. 

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению частично на основании следующего.  

Распоряжением Правительства РИ от 28.10.2024г. № 617-р о приватизации имущественного комплекса ГУП «Научно-производственное объединение «ГЕОПРОЕКТ» (ИНН 

<

***>) реорганизовано путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Научно производственный объединение «ГЕОПРОЕКТ» (ИНН 

<

***>). Таким образом, с 13 марта 2025г. ООО «НПО «ГЕОПРОЕКТ» является полным правопреемником ГУП «НПО «ГЕОПРОЕКТ».  

Между правопредшественником истца - Государственным унитарным предприятием «Научно-Производственное объединение «ГЕОПРОЕКТ» (ИНН 

<

***>) и Ответчиком - Министерством строительства Республики Ингушетия (ИНН 

<

***>) был заключен государственный контракт № 79/23 от 06.12.2023г. на корректировку проектной документации на строительство объекта «Строительство инфекционного отделения (на 60 коек) на территории ГБУЗ «РДКБ». Корректировка» на сумму 5 680 216 руб. 00 коп. (пять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч двести десять рублей 00 копеек) (далее - Госконтракт).  

 Согласно условиям данного Госконтракта Подрядчик в установленные сроки обязуется выполнить корректировку проектной документации по объекту капитального строительства, указанного в пункте - 1.2, передать Заказчику результаты указанных Работ, а Заказчик обязуется принять результаты Работ и уплатить определенную цену.  

Согласно п. 2.2 Госконтракта сроки выполнения работ определены графиком выполнения работ (Приложение № 3), а сроки и размеры оплаты - графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 4). График выполнения работ и График оплаты выполненных работ являются неотъемлемой частью Госконтракта.  

Дополнительным соглашением № 286 от 05 августа 2024г. о внесении изменений в государственный контракт № 79/23 от 06.12.2023г. о продлении сроков выполнения работ по Контракту, срок окончания выполнения работ составил - 15 сентября 2024г., срок приемки результатов работ в течении 10 календарных дней следующих за днем поступления документа о приемке.  

Согласно Акту о приемке выполненных работ по государственному контракту № 79/23 от 06.12.2023г № 01 от 13.09.2024г., прием выполненных работ по 1 этапу: «Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации» состоялся 13 сентября 2024г. на сумму 2 831 966,00 (два миллиона восемьсот тридцать одна тысяча девятьсот шестьдесят шесть) рублей 00 коп.  

Заказчик по акту принял от Подрядчика выполненные работы, обозначив их соответствие условиям Госконтракта. Каких либо замечаний по качеству результатов работ или иных недостатков Заказчиком не предъявлено. Однако, выполненные работы не оплачены.  

Подрядчиком направлены результаты работ с приложением Акта о приемке выполненных работ по 2 этапу: «Разработка рабочей документации» на сумму 2 848 250,00 (два миллиона восемьсот сорок восемь тысяч двести пятьдесят рублей 00 коп.). Данный акт Заказчиком не подписан. При этом каких-либо замечаний по качеству выполненных работ Заказчиком также не предъявлено.  

Отношения, связанные с оказанием услуг для обеспечения государственных нужд регулируются Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе).  

Согласно пункту 8 статьи 3 Закона о контрактной системе, государственный контракт - гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.  

В силу части 1 статьи 2 Закона о контрактной системе законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и  

регулирующие указанные отношения, должны соответствовать настоящему Федеральному закону.  

Как усматривается из вводной части Государственного контракта № 79/23 от 06.12.2023г. данный договор заключен с единственным поставщиком на основании Постановления Правительства Республики Ингушетия от 01.04.2022г. № 48 «Об установлении иных случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика» (далее - Постановление).  

Согласно пункту 1 указанного Постановления до 31 декабря 2023 года включительно в дополнение к случаям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного соответственно правовым актом Правительства Республики Ингушетия, правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования Республики Ингушетия, изданным в соответствии с настоящим Постановлением.  

Данное Постановление было принято на основании части 2 статьи 15 Федерального закона от 8 марта 2022 года N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которой до 31 декабря 2023 года включительно решением высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации в дополнение к случаям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», могут быть установлены иные случаи осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях обеспечения нужд соответствующего субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на его территории, а также определен порядок осуществления закупок в таких случаях (в редакции, действовавшей на момент принятия Постановления).  

Исходя из указанного, сомнений в законности заключенного между сторонами Госконтракта у суда не имеется.  

По своей юридической природе, заключенный между сторонами контракт представляет собой договор подряда, регламентированный статьей 702  

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), согласно которой по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.  

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

Согласно статье 310 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, другими законами или иными правовыми актами.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса РФ заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.  

В силу пункта 1 статьи 720 Гражданского кодекса РФ заказчик обязан в сроки и порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.  

Об исполнении подрядчиком требований заказчика и выполнении работы в соответствии с достигнутыми соглашениями в полном объеме и в срок, подтверждается подписанным Заказчиком Актом о приемке выполненных работ по государственному контракту № 79/23 от 06.12.2023г № 01 от 13.09.2024г. о приемке выполненных работ по 1 этапу: «Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации» на сумму 2 831 966,00 (два миллиона восемьсот тридцать одна тысяча девятьсот шестьдесят шесть) рублей 00 коп.  

08 августа 2025 г. в адрес Министерства строительства Республики Ингушетия ООО «НПО «ГЕОПРОЕКТ» была направлена Претензия с приложенным Актом № 02 от 15.09.2024г. о приеме выполненных работ по 2 этапу: «Разработка рабочей документации» на сумму 2 848 250,00 (два миллиона восемьсот сорок восемь тысяч двести пятьдесят рублей 00 коп.) для подписания и требованием оплатить общую образовавшуюся по Госконтракту задолженность.  

Согласно Графику оплаты выполненных Работ (Приложение № 3 к Контракту) срок оплаты составляет не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.  

В ответном письме Минстрой Ингушетии факт выполнения Подрядчиком условий контракта, а также наличие своей задолженности не оспаривает, при этом, отсутствие со своей стороны возможности выполнения условий соглашения, следовательно, и изложенных в претензии требований, мотивировал отсутствием финансовых средств (письмо Минстроя РИ от 10.07.2024г. № 2080/РИ).  

Таким образом, в нарушение условий Госконтракта Министерством строительства Республики Ингушетия не исполнены взятые на себя обязательства по оплате выполненных работ по государственному контракту № 79/23 от 06.12.2023г. на корректировку проектной документации на строительство объекта «Строительство инфекционного отделения (на 60 коек) на территории ГБУЗ «РДКБ». Корректировка» на сумму 5 680 216 руб. 00 коп. (пять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч двести десять рублей 00 копеек.  

На основании статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.  

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.  

Изучив материалы дела, руководствуясь требованиями действующего законодательства, учитывая, что изложенные в исковом заявлении доводы, как и представленные в их подтверждение доказательства ответчиком не оспорены, оценивая их на предмет соответствия подлежащим применению нормам закона, суд находит, что требования в части касающейся взыскания суммы задолженности по Госконтракту подлежат удовлетворению.  

Относительно исковых требований о взыскании расходов по уплате государственной пошлины следует отказать, поскольку, исходя из смысла части 1 статьи 110 АПК РФ, судебные расходы взыскиваются тогда, когда такие расходы имеют место.  

В рассматриваемом случае при подаче искового заявления истцом было заявлено ходатайство о предоставлении отсрочки от уплаты государственной пошлины. Удовлетворяя данное ходатайство, определением от 18 августа 2025 года исковое заявление принято к производству. Это свидетельствует о том, что расходы по уплате государственной пошлины истцом фактически не понесены.  

Принимая во внимание, что ответчик в силу части 1.1 статьи 333.37 Налогового кодекса РФ освобожден от уплаты государственной пошлины, оснований для применения положений статьи 110 АПК РФ в данном случае не имеется. На этом основании в удовлетворении требования о взыскании расходов по уплате государственной пошлины следует отказать.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 217-222 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,  

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное объединение «ГЕОПРОЕКТ» (ИНН: 

<

***>) удовлетворить частично.  

Взыскать с Министерства строительства Республики Ингушетия в пользу ООО «НПО «ГЕОПРОЕКТ» (ИНН 

<

***>), являющемуся правопреемником ГУП «НПО «ГЕОПРОЕКТ» (ИНН 

<

***>) сумму долга по государственному контракту № 79/23 от 06.12.2023г. на корректировку проектной документации на строительство объекта «Строительство инфекционного отделения (на 60 коек) на территории ГБУЗ «РДКБ». Корректировка» в сумме 5 680 216 руб. 00 коп. (пять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч двести десять рублей 00 копеек), НДС не облагается.  

В удовлетворении требования о взыскании расходов по уплате государственной пошлины в размере 195 406.00 руб. отказать.  

Решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного  

производства в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанции через Арбитражный суд Республики Ингушетия.  

 Судья И.И. Газдиев