АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А84-8784/2024

10 марта 2025 г.

г. Севастополь

 

Резолютивная часть решения объявлена 24.02.2025.

Полный текст решения изготовлен 10.03.2025.

Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Мирошник Анны Сергеевны, при ведении протокола секретарем судебного заседания Хадкиной В.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Управления государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Севастополь) к обществу с ограниченной ответственностью «Ажур» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Севастополь)

с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Прокуратуры города Севастополя и Межрегиональной общественной организации «Молодежное эколого-патриотическое объединение «Патриот родного края»,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, доверенность19.12.2024,

от ответчика – ФИО2, доверенность от 22.02.2024,

от третьего лица

МОО «Молодежное эколого-патриотическое объединение «Патриот родного края» - ФИО3, доверенность от 09.01.2024.

Управление государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя (далее – истец, Севгосстройнадзор) обратилось в Арбитражный суд города Севастополя с заявлением к  обществу с ограниченной ответственностью «Ажур» (далее - ООО «Ажур», ответчик, общество) в котором просит суд обязать застройщика ООО «Ажур» принять необходимые меры, по сохранению результатов работ по консервации объекта капительного строительства «Комплексное здание общественно – торгового центра по ул. Косарева, 23, в г. Севастополе», предусмотренные проектной документацией шифр: 001/21-ТДК и Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2011 № 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства» в двухмесячный срок.

От истца поступили уточнения требований, в которых Севгосстройнадзор просит

обязать застройщика общество с ограниченной ответственностью  «Ажур» принять необходимые меры, по сохранению результатов работ по консервации объекта капитального строительства «Комплексное здание общественно-торгового центра по ул. Косарева, 23, в г. Севастополе», предусмотренные проектной документацией шифр: 001/21-ТДК и Постановлением Правительства РФ от 30.09.2011№ 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства», в двухмесячный срок, а именно:

выполнить ограждение всей территории строительной площадки из сплошных металлических листов высотой 2м в целях предотвращения несанкционированного доступа;

все отверстия и горизонтальные проемы закрыть закрепленными щитами;

по стеновому ограждению необходимо выполнить монтаж заполнения оконных и дверных проемов на незавершенных фрагментах. Допускается заполнить проемы пленкой;

осуществлять плановые осмотры и проверки по графикам, утвержденным ответственным лицом, выведенное из эксплуатации и законсервированное оборудование;

постоянно отключенное оборудование осматривать и проверять не реже одного раза в год;

обеспечить охрану территории стройплощадки, для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц;

выполнить защиту металлических элементов от коррозии;

элементы металлоконструкций, находящихся на открытом воздухе окрасить лакокрасочными материалами.

Представитель истца в судебном заседании поддержала требование об обязании ООО «Ажур» выполнить меры по сохранению результатов работ по консервации объекта с учетом уточнений.

Представитель ответчика возражал относительно удовлетворения требований по основаниям, изложенным в отзыве.

МОО «Молодежное эколого-патриотическое объединение «Патриот родного края» настаивало на удовлетворении требований, а также заявило ходатайство о проведении судебной строительно-технической экспертизы.

Лица, участвующие в деле высказались против назначения судебной строительно-технической экспертизы.

При рассмотрении дела в открытом судебном заседании арбитражный суд установил.

Обществом с ограниченной ответственностью «Ажур» 23.08.2018 в адрес Севгосстройнадзора как застройщиком было направлено извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Строительство комплексного здания общественно - торгового центра по ул. Косарева, 6» (далее - Объект), по результатам рассмотрения которого, истцом сформировано надзорное дело № 0707-2018-051 и в 2018 объект был поставлен на региональный государственный строительный надзор.

04.03.2020 общество направило в Севгосстройнадзор уведомление о переводе на консервацию Объекта (на основании приказа о переводе на консервацию объекта капитального строительства № 11 от 21.02.2020), согласно которому работы по консервации объекта должны быть выполнены до 21.07.2020.

31.08.2020 Севгосстройнадзором организована и проведена программная выездная проверка застройщика ООО «Ажур», которой установлено, что работы по консервации Объекта не обеспечены и не завершены (акт проверки № 92-02-0707-030401-190-135 от 31.08.2020).

По результатам данной проверки ООО «Ажур» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений № 92-02-0707-030401-190-135 от 31.08.2020, срок исполнения которого установлен до 02.10.2020.

В силу действия пункта «е» части 1 Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в 2020 году внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания организовывались при поступлении в орган государственного контроля (надзора) ходатайства от юридического лица или индивидуального предпринимателя о проведении проверки в целях признания предписания исполненным.

Застройщиком ООО «Ажур» в адрес Севгосстройнадзора не были предоставлены сведения об исполнении предписания от 31.08.2020, однако внеплановая проверка исполнения указанного предписания в 2020 году истцом не проводилась.

В 2021 году, с целью признания предписания исполненным (не исполненным), на основании приказа Севгосстройнадзора № 92-02-0707-010201-22 от 11.03.2021, в отношении застройщика была организована внеплановая документарная проверка, в ходе которой юридическим лицом ООО «Ажур» предоставлен подраздел проектной документации «Техническая документация по консервации объекта капитального строительства», шифр: 001/21-ТДК, разработанной ООО «АПБ «Основа» в 2021 году, акт выполненных работ по консервации объекта незавершенного строительством от 20.04.2021, а также акт о консервации незавершенного строительством объекта от 21.04.2021.

Таким образом, 21.04.2021 ООО «Ажур» документально подтвердил завершение работ по консервации Объекта в соответствии с указанной выше проектной документацией.

В связи с чем Севгосстройнадзором, предписание от 31.08.2020, выданное ООО «Ажур», признано выполненным в полном объёме.

В соответствии с пунктом 4.8 Положения о региональном государственном строительном надзоре, утвержденного Постановление Правительства Севастополе от 13.12.2021 № 630-ПП (далее - Положение Севгосстройнадзора) региональный государственный строительный надзор в отношении объекта надзора в настоящее время приостановлен в связи с консервацией объекта капитального строительства, до даты получения уведомления о возобновлении строительства, реконструкции объекта.

Кроме того, постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее - Постановление № 336) с 10.03.2022 введен мораторий на проведение в 2022-2024 году плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием с контролируемым лицом, а их проведение возможно только при условии согласования с органами прокуратуры при подтверждения наличия непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан.

Таким образом, с 2021 года у должностных лиц истца не имеется возможности провести плановую или внеплановую выездную проверку для контроля за состоянием Объекта, а также мер по сохранению консервации Объекта, предпринимаемых обществом.

Вместе с тем, с февраля 2022 года по август 2024 года в отношении Объекта в Севгосстройнадзор из Прокуратуры города Севастополя неоднократно направляются требования о предоставлении информации в отношении вышеуказанного объекта по причине жалоб и обращений физических лиц, в том числе многочисленных обращений из общественной организации «Патриоты родного края».

В данных обращениях указывалось на нарушения ООО «Ажур» в части организации мероприятий по сохранению результатов консервации Объекта, а также на необходимости обеспечить безопасность данного объекта для окружающих с целью исключения возникновения угрозы для жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества.

Меры, принимаемые, Севгосстройнадзором, в отношении вышеуказанного объекта, в частности: выдача предписаний, предостережений, а также осуществление выездных обследований в указанный период не возымели действие на руководство ООО «Ажур» по надлежащему сохранению консервации объекта, а именно: необходимость произвести мероприятия по сохранению работ по консервации.

В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, Севгосстройнадзором в адрес ООО «Ажур» 22.02.2022 было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований проектной документации: «Техническая документация по консервации объекта капитального строительства», шифр: 001/21-ТДК, разработанной ООО «АПБ «Основа» в 2021 году, в части ненадлежащего выполнение работ по обслуживанию законсервированного объекта, а также не принятия необходимых мер, препятствующих несанкционированному доступу внутрь объекта и на территорию строительной площадки.

В соответствии с пунктами 3.10 и 3.14 Положения о региональном государственном строительном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Севастополя № 630-ПП от 13.12.2021 (далее - Положение) контролируемое лицо после получения Предостережения в течение 15 календарных дней вправе подать в Севгосстройнадзор возражение в отношении полученного предостережения, а при отсутствии возражений направляет в указанный в предостережении срок уведомление о его исполнении (до 22.04.2022). Однако возражение и уведомление в адрес Севгосстройнадзора не поступали.

11.03.2022 при проведении проверки, проводимой работниками прокуратуры Гагаринского района города Севастополя, по вопросу соблюдения градостроительного законодательства при строительстве объекта капитального строительства по ул. Косарева, 23, на основании требования Прокуратуры города Севастополя от 02.03.2022 № 7-45-2022/1510 должностное лицо Севгосстройнадзора привлекалось в качестве специалиста в области строительства. По результатам указанной проверки в адрес прокуратуры Гагаринского района города Севастополя истцом направлена справка об участии специалиста от 11.03.2022, с указанием выявленных нарушений при консервации Объекта.

14.06.2022 Севгосстройнадзором проведена внеплановая выездная проверка объекта капитального строительства, расположенного по адресу: ул. Косарева, 23 по результатам которой ООО «Ажур» было выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства № 92-02-0707-040601-39-3 от 14.06.2022 сроком устранения до 14.07.2022.

По истечению установленного срока исполнения предписания Севгосстройнадзором организована проверка исполнения вышеуказанного предписания.

Вместе с тем, Прокуратурой города Севастополя истцу направлено решение прокурора об отказе в согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия, в связи с тем, что материалы не содержат достаточной информации о фактах неисполнения ООО «Ажур» предписания, вследствие чего создаётся непосредственная угроза причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, и данное обстоятельство не позволило провести выездную проверку и проверить выполнение предписания от 14.06.2022 со стороны ООО «Ажур».

13.02.2024 истцом в адрес общества было направлено в отношении Объекта еще одно предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований № 92-02-0707-100601-10 и предложено в срок до 15.04.2024 принять необходимые меры, по сохранению результатов работ по консервации Объекта, предусмотренные проектной документацией «Техническая документация по консервации объекта капитального строительства», шифр: 001/21-ТДК, разработанной ООО «АПБ «Основа» в 2021 году и Постановлением Правительства РФ от 30.09.2011 № 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства».

16.05.2024 Севгосстройнадзором получено представление Прокуратуры города Севастополя № 7-45-2024 об устранении нарушений законодательства в области государственного строительного надзора, в котором указывалось не непринятие сотрудниками Севгосстройнадзора мер в отношении ООО «Ажур» в отношении объекта капитального строительства: «Комплексное здание общественно-торгового центра по ул. Косарева. 23, в г. Севастополе», в части сохранения работ по консервации Объекта.

В связи с чем, 05.06.2024 Севгосстройнадзором в очередной раз ООО «Ажур» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено в срок до 09.08.2024 принять необходимые меры, по сохранению результатов работ по консервации Объекта, предусмотренные проектной документацией шифр: 001/21-ТДК и Постановлением Правительства РФ от 30.09.2011№ 802.

Однако, ООО «Ажур», учитывая требования пунктов 3.10, 3.14., 3.15 Положения уведомление об исполнении предостережения, в указанный в предостережении срок до 09.08.2024 в адрес истца не направило.

Кроме того, Севгосстройнадзором направлен запрос в адрес ООО «Ажур» о предпринимаемых мерах, направленных на устранение ранее выявленных признаках нарушений в части обеспечения сохранения результатов консервации Объекта.

30.08.2024 Севгосстройнадзором вновь объявлено ООО «Ажур» Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено в срок до 05.11.2024 принять необходимые меры, по сохранению результатов работ по консервации Объекта, предусмотренные проектной документацией шифр: 001/21-ТДК и Постановлением Правительства РФ от 30.09.2011№ 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства».

Однако уведомления об исполнении предостережений, а также документы в подтверждении производства всех необходимых работ по поддержанию консервации и Объекта в надлежащем состоянии, от общества не поступало.

Извещение о возобновлении строительства Объекта от ООО «Ажур» в адрес Севгосстройнадзора по состоянию на 18.09.2024 также не поступало, строительные работы на Объекте не выполняются.

С учетом отсутствия документального подтверждения исполнения всех предостережений, выданных Севгостройнадзором, а также невозможностью организовать выездную проверку Объекта на предмет сохранения его в состоянии консервации, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

Исследовав и оценив доказательства по делу, изучив доводы, приведенные участниками судебного процесса в обоснование своих требований и возражений, суд считает, что исковое заявление Управления государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя подлежит удовлетворению, исходя из следующего.

Согласно ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный (надзорный) орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Частью 4 статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ (далее - ГрК РФ) предусмотрено, что при необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев застройщик или технический заказчик должен обеспечить консервацию объекта капитального строительства.

Согласно пункту 2 Правил проведения консервации объекта капитального строительства, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2011 № 802 (далее - Правила консервации), решение о консервации объекта принимается в случае прекращения его строительства (реконструкции) или в случае необходимости приостановления строительства (реконструкции) объекта на срок более 6 месяцев с перспективой его возобновления в будущем.

Статьей 52 ГрК РФ закреплены обязанности, которые неукоснительно должны исполняться застройщиками и лицами, осуществляющими строительство.

К таким обязанностям в частности относятся:

-           обеспечение соблюдения требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несение ответственности за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации, в соответствии с частью 3 вышеназванной статьи;

-           при осуществлении строительства, требующего в силу требований законодательства проведения государственного строительного надзора, направление заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, в уполномоченные органы извещения о начале таких работ с приложением необходимых документов в соответствии с частью 5 вышеназванной статьи;

-           при необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев обеспечение консервации объекта капитального строительства, в соответствии с частью 4 вышеназванной статьи.

Порядок проведения консервации объекта капитального строительства определен, как указывалось выше, Правилами консервации, согласно которым консервация является комплексом мероприятий, позволяющих сохранить прочность, устойчивость и надежность выполненных строительных работ, а также обеспечить безопасность объекта капитального строительства для окружающих с целью исключения возникновения угрозы для жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества.

Согласно п. 9 Правил консервации в состав работ по консервации объекта входят в том числе:

а) выполнение конструкций, принимающих проектные нагрузки (в том числе временных);

б) монтаж оборудования, дополнительно закрепляющего неустойчивые конструкции и элементы, или демонтаж таких конструкций и элементов;

в) освобождение емкостей и трубопроводов от опасных и горючих жидкостей, закрытие или сварка люков и крупных отверстий;

г) приведение технологического оборудования в безопасное состояние;

д) отключение инженерных коммуникаций, в том числе временных (за исключением тех, которые необходимы для обеспечения сохранности объекта);

е) принятие необходимых мер, препятствующих несанкционированному доступу внутрь объекта и на территорию строительной площадки.

Определением от 12.12.2024 суд обязал стороны провести осмотр Объекта на предмет его состояния и сохранности результатов консервации.

Исходя из акта совместного осмотра от 16.01.2025 № 1 на Объекте не обеспечена сохранность результатов работ по консервации, а именно:

- часть ограждения с северо-восточной стороны находится в поврежденном состоянии, что создало свободный доступ на территорию незавершенного строительством объекта капитального строительства;

- заполнение оконных проемов полиэтиленовой пленкой пришло в негодность (повреждено);

- не установленными лицами демонтирована решетчатая дверь, препятствующая переходу с первого этажа на второй;

- не установленными лицами демонтированы щиты, закрывающие горизонтальные проемы.

Таким образом, фактически подтверждается то обстоятельство, что несмотря на неоднократные предостережения, направляемые в адрес ООО «Ажур» о недопустимости нарушения обязательных требований, ответчиком не принимается достаточных мер по сохранению Объекта в состоянии консервации, предусмотренном проектной документацией шифр: 001/21-ТДК и Постановлением Правительства РФ от 30.09.2011№ 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства».

С учетом того факта, что Севгосстройнадзор не имеет полномочий по проведению внеплановой выездной проверки без согласования ее с Прокуратурой города Севастополя, и данное согласование несмотря на неоднократные обращение не было получено, единственным способом реализовать свои обязанности как органа контроля и надзора за соблюдением состояния Объекта в надлежащем состоянии консервации в соответствии с проектной документацией шифр: 001/21-ТДК и Постановлением Правительства РФ от 30.09.2011№ 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства» является обращение в суд.

В рассматриваемом случае, суд считает возможным применить положения ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по аналогии, а именно в части подтверждения права органа принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

Хотя предписания Севгосстройнадзором в адрес ООО «Ажур» не выдавались, но с учетом неоднократных предостережений, а также состояния Объекта, зафиксированного в акте совместного осмотра, суд считает возможным и правильным обращение истца с настоящим заявлением.

Невыполнение ООО «Ажур» тех мероприятий, которые предусмотрены не только проектной документацией шифр: 001/21-ТДК, но Правилами проведения консервации, привело к возникновению состояния Объекта, которое может привести к угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, выражающееся в проникновение на недостроенный объект капительного строительства детей, взрослых, животных, что в свою очередь повлечет травмы разной степени тяжести, либо среду для совершения административных правонарушений или уголовных преступлений.

С учетом изложенного, суд не усматривает достаточных оснований для отказа в удовлетворении требований Управления государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя об обязании общество с ограниченной ответственностью  «Ажур» принять меры по по сохранению результатов работ по консервации объекта капитального строительства «Комплексное здание общественно-торгового центра по ул. Косарева, 23, в г. Севастополе», предусмотренные проектной документацией шифр: 001/21-ТДК и Постановлением Правительства РФ от 30.09.2011№ 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства». Срок указанный истцом, суд признает разумным и достаточным для застройщика.

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

С учетом изложенного в доход федерального бюджета подлежит взысканию  с ответчика государственная пошлина в размере 50000 руб.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

исковые требования Управления государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя  удовлетворить.

Обязать застройщика общество с ограниченной ответственностью  «Ажур» принять необходимые меры, по сохранению результатов работ по консервации объекта капитального строительства «Комплексное здание общественно-торгового центра по ул. Косарева, 23, в г. Севастополе», предусмотренные проектной документацией шифр: 001/21-ТДК и Постановлением Правительства РФ от 30.09.2011№ 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства», в двухмесячный срок, а именно:

выполнить ограждение всей территории строительной площадки из сплошных металлических листов высотой 2м в целях предотвращения несанкционированного доступа;

все отверстия и горизонтальные проемы закрыть закрепленными щитами;

по стеновому ограждению необходимо выполнить монтаж заполнения оконных и дверных проемов на незавершенных фрагментах. Допускается заполнить проемы пленкой;

осуществлять плановые осмотры и проверки по графикам, утвержденным ответственным лицом, выведенное из эксплуатации и законсервированное оборудование;

постоянно отключенное оборудование осматривать и проверять не реже одного раза в год;

обеспечить охрану территории стройплощадки, для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц;

выполнить защиту металлических элементов от коррозии;

элементы металлоконструкций, находящихся на открытом воздухе окрасить лакокрасочными материалами.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Ажур» в пользу федерального бюджета государственную пошлину в размере 50000 руб.

Исполнительный лист выдать взыскателю в порядке ст. 318, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Севастополя.

Судья

А.С. Мирошник