28/2021-138916(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 http://kirov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть 

Дело № А28-10748/2021

г.Киров

20 сентября 2021 года

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Прозоровой Е.Ю.,  при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев дело по исковому заявлению  

Администрации города Кирова (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 610027,  

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «3А» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>,  адрес: 610017, 

<

...>)  

об устранении недостатков работ, при участии в судебном заседании представителей: истца-Беспятых Е.А., по доверенности от 28.12.2020 № 240-10-13, 

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

обязать общество с ограниченной ответственностью «ЗА» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) в течение 20 календарных дней со дня вступления решения суда в  законную силу устранить дефекты выполненных работ по адресам: 

<

...>, пр-кт. Строителей, д.13, ул.Тургенева, д.3, ул.Производственная,  д.16, ул.Щорса, д.26б, ул.Калинина, д.За, в рамках муниципального контракта   № 034020000331810974-1000732-02 от 01.10.2018, указанные в актах осмотра от 25, 26,  27 мая 2021 года, а именно:  

- ул. Воровского, д. 102 восстановить асфальтобетонное покрытие на дворовом  проезде у подъездов № 4, № 5; восстановить стыки полос у подъезда № 6; восстановить  асфальтобетонное покрытие на повороте дворового проезда у опоры освещения со  стороны ул. Е. Кочкиной, восстановить асфальтобетонное покрытие на тротуаре у  подъезда № 1 и с торца дома.  

- пр-кт. Строителей, д. 13 восстановить асфальтобетонное покрытие на тротуаре  вдоль бортового камня и поребрика по всей длине; устранить провал вырубки на  тротуаре у подъезда № 2; восстановить асфальтобетонное покрытие на тротуаре при  входе в подъезды № 1, № 2 с торца дома напротив контейнерной площадки;  восстановить асфальтобетонное покрытие на дворовом проезде у подъезда № 1 и между  подъездами № 1 и № 2.  

- ул. Тургенева, д. 3 устранить провал вырубки на дворовом проезде и тротуаре,  восстановить асфальтовый слой на стыке с торца дома; произвести водоотведение на  дворовом проезде с торца дома у водосточной трубы.  

- ул. Производственная, д. 16 восстановить асфальтобетонное покрытие  на дворовом проезде в 3-х местах при въезде с ул. Производственной; восстановить  асфальтобетонное покрытие на тротуаре вдоль бортового камня и поребрика с угла  дома; восстановить асфальтобетонное покрытие стыка полос с торца дома;  восстановить асфальтобетонное покрытие тротуара с торца дома между домами № 16 и   № 14; восстановить асфальтобетонное покрытие на дворовом проезде в районе детской  площадки и трансформаторной подстанции.  

- ул. Щорса, д. 26б восстановить асфальтобетонное покрытие на дворовом  проезде у подъезда № 1; устранить провал вырубок на дворовом проезде у подъезда № 2  и на тротуаре; восстановить асфальтобетонное покрытие на тротуаре и дворовом  проезде между подъездами № 2 и № 3, у подъезда № 4 и № 5, у подъезда № 5, № 6;  восстановить асфальтобетонное покрытие на дворовом проезде стыка полос у подъезда   № 6 и центрального теплового пункта; восстановить асфальтобетонный слой в месте  примыкания люка у ЦТП № 92; восстановить асфальтобетонное покрытие напротив  контейнерной площадки; восстановить асфальтобетонное покрытие дворового проезда  с торца дома у подпорной стенки; произвести водоотведение на дворовом проезде у  подъездов № 4, № 5 у водоотводных люков.  

- ул. Калинина, д. За восстановить асфальтобетонное покрытие в месте  примыкания люков; устранить провал вырубки на тротуаре; восстановить  асфальтобетонное покрытие на тротуаре вдоль поребрика.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «3А» (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошину в сумме 6 000 (шесть  

тысяч) рублей. 

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в  месячный срок в соответствии со статьями 257, 259 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации.  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кировской области.  

Судья Е.Ю.Прозорова. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 10.08.2020 6:56:53

 Кому выдана Прозорова Елена Юрьевна