АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-5287/2022

г. Владивосток

21 июня 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 16 июня 2022 года. 

Полный текст решения изготовлен 21 июня 2022 года.

Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Плехановой Н.А,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Трояк Е.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к  обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "Гильдия свободных каменщиков" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

об обязании предоставить документы

при участии в заседании:

от истца: Ячмень Г.Л., приказ 368 от 22.05.2020 (участвует онлайн);

от ответчика: ФИО1, ген. директор, решение от 01.11.2017, паспорт;

установил:

краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов"  (далее – истец, учерждение) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "Гильдия свободных каменщиков" (далее – ответчик, общество) об обязании предоставить документы подтверждающие класс пожарной опасности К0, в том числе распространяет ли горение фасадная в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на навесную фасадную систему, смонтированную на объекте, расположенном: 

<

...>.   

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком принятых на себя обязательств по контракту,  что выразилось  в не предоставлении документов, подтверждающих класс пожарной опасности К0 фасадной системы. 

            Ответчик исковые требования оспорил, по доводам, изложенным в отзыве.

            Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

            17.07.2019 КГБУСО "Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (заказчик, учреждение) и ООО Строительная компания "Гильдия свободных каменщиков" (подрядчик, общество) заключен контракт 0320200020919000029001 (далее - контракт), по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по капитальному ремонту фасада здания в отделении КГБУСО "Спасский ДИПИ" Черниговского района, а заказчик обязуется принять их результат и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего контракта и технического задания (приложение № 1 к контракту) и проектно — сметной документацией (приложение №2 к контракту).

Согласно пункту 1.2 контракта выполнение работ осуществляется по адресу: 

<

...>.

В соответствии с пунктом 1.3 контракта сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 31.12.2019.

Цена контракта в соответствии со сводным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью контракта, составляет 2 265 495 рублей 60 копеек, без учета НДС (пункт 2.1 контракта).

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (пункт 2.2 контракта).

В соответствии с пунктом 2.6 контракта оплата за фактически выполненные строительно-монтажные работы производится заказчиком в течение 30 календарных дней со дня предоставления акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) и акта приема — сдачи выполненных работ. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ является акт о приемке выполненных работ (Форма КС 2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), счет-фактура от подрядчика, применяющего НДС, либо счет от подрядчика, не применяющего НДС, а также при предоставлении документов (соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования (инженерного и технологического), комплектующих изделий, строительной техники и конструкций), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. Подрядчик обязан предоставлять ежемесячные отчеты о ходе выполнения работ.

Пунктом 3.4 контракта подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, ПОТ РМ, Правил производства и приемки работ, норм и правил, утвержденных действующим законодательством для работ, предусмотренных настоящим контрактом.

Согласно пункту 4.1 контракта подрядчик ежемесячно и по завершении работ информирует заказчика о готовности к сдаче выполненных работ и предоставляет заказчику в двух экземплярах акты о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат форме КС-3 не менее чем 3 рабочих дня до срока окончания работ.

Для проверки качества работ заказчик проводит экспертизу. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается заказчиком. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении указываются предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения  (пункт  4.4 контракта). 

Пунктами 6.1-6.4 контракта предусмотрено, что работы по контракту должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к контракту), качественно в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ по контракту, техническими и строительными нормами и правилами (СНиП), СанПИН и пр.

Подрядчик гарантирует соответствие результатов выполненных работ требованиям проектной документации, условиям контракта, техническому заданию (приложение №1 к контракту), техническим и строительным нормами и правилами, в соответствии с приложением № 2 к контракту и несёт ответственность за отступление от их условий и требований в течение гарантийного срока - 5 лет с даты приемки объекта в эксплуатацию (п.5 ст.724 ГК РФ).

Гарантии качества распространяются на все выполненные подрядчиком работы по настоящему контракту, конструктивные элементы объекта и его части.

Гарантийный срок на результаты выполненных работ составляет 5 лет с подписания завершающего акта.

В пункте пункту 2 технического задания, определены требования к качеству работ, а именно: вce работы должны выполняться в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017 (изоляционные и отделочные работы); ГОСТ 23166-99, СанПин 3.1.2.2645-10 Требования к жилым зданиям и помещениям, ГОСТ 52059-2003 и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.

Контроль качества должен осуществляться  соответствии с СП 48.133.30.2011 «Организация строительства», Постановлением Правительства РФ «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительств» от 21.06.2010 г. № 468, ст.53 Градостроительного кодекса РФ.

Все применяемые материалы (оборудование)  должны соответствовать требованиям органов Государственного пожарного надзора, Ростесхнадзора для данных видов работ и иметь (предоставить) соответствующие сертификаты (в случае  обязательной сертификации) паспорта, лабораторные заключения.

В соответствии с   пунктом 9 технического задания, объект должен быть передан  в эксплуатацию в состоянии, пригодном для эксплуатации. Сдача работ  подрядчиком и приемка заказчиком производится после предоставления подрядчиком  протокола испытаний и оформляется актом сдачи-приемки работ, подписанным сторонами.

Выполненные работы подрядчиком, предусмотренные контрактом, приняты заказчиком, что подтверждается подписанным сторонами без оговорок и замечаний актом выполненных работ №1 от 25.11.2019 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 25.11.2019.

Во исполнение условий контракта выполненные работы оплачены заказчиком в полном объеме.

Как указал ответчик все необходимые документы на использованные при проведении капитального ремонта фасада материалы, в том числе: экспертное заключение № 01.05.П.31230.07.16от 26.07.2016 года, сертификаты соответствия на примененные материалы,   переданы заказчику при сдаче работ, претензий по качеству выполненных работ учреждением не заявлено. 

К материалам дела  ответчиком также приобщены  протоколы испытаний испытательного центра «СЗРЦ ТЕСТ» ООО «СЗРЦ ПБ»  № ПИ-001/01-2020, №ПИ-031/02-2020, по результатам которых установлено, что образцы плиты теплоизоляционной относятся к негорючим материалам.

22.09.2021 истец в адрес ответчика направил претензию о предоставлении документов  подтверждающих класс пожарной опасности К0, в том числе распространяет ли горение фасадная система. 

Письмом № 27 от 04.10.2021 общество сообщило, что запрашиваемая истцом документация передана ответчику ранее.

Полагая, что подрядчик не выполнил условия контракта в полном объеме, не предоставил доказательства безопасности смонтированной им фасадной системы, в частности не подтвержден класс пожарной опасности К0 фасадной системы в целом  и нарушил гарантии качества, закрепленные в контракте, истец  обратился в суд с настоящим иском.

            Оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ,  суд считает  исковые требования не подлежащими удовлетворению в силу следующего. 

Между сторонами сложились правоотношения по контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд, которые подлежат регулированию нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) (подряд), Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон N 44-ФЗ).

В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Закона N 44-ФЗ под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

Согласно статье 763 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

По смыслу пункту 2.6  контракта оплата за фактически выполненные строительно-монтажные работы производится заказчиком помимо прочего после предоставлении соответствующих сертификатов соответствия других документов, удостоверяющих качество материалов, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

При рассмотрении спора судом установлено, что  истцом приняты выполненные работы без каких-либо замечаний, о чем между сторонами подписан акт о приемке выполненных работ № 1 от 25.11.2019. После этого работы были оплачены. При  приемке истец обществу претензий не предъявлял. 

Из этого следует, что работы были выполнены обществом в полном объеме и с надлежащим качеством. 

О том что,   при сдаче работ все необходимые документы и сертификаты соответствия на использованные при выполнении контракта материалы переданы заказчику свидетельствует  сам факт  приемки и  оплаты работ заказчиком,  довод о том, что указанные документы, предусмотренные контрактом  обществом не передавались истцом при рассмотрении спора не заявлен.

В силу статьи  431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Истец требует  обязать  ответчика предоставить документы подтверждающие класс пожарной опасности К0  на смонтированную ООО Строительная компания "Гильдия свободных каменщиков" фасадную систему

Между тем,   из условий контракта  и приложений к нему  соответствующая обязанность подрядчика по  предоставлению документов, подтверждающих  класс пожарной опасности на смонтированную фасадную систему,  не предусмотрена.

По условиям контракта общество должно было отремонтировать фасад здания,  и предоставить документы, подтверждающие безопасность, использованных для ремонта материалов,  а не отремонтированного здания в целом (его фасада,  фасадной системы).

            На основании изложенного,  суд, установив, что ни законом, ни непосредственно контрактом не предусмотрена обязанность  подрядчика  предоставлять документы, подтверждающие  класс пожарной опасности на смонтированную фасадную систему, суд отказывает в удовлетворении иска.

            Расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

            Руководствуясь статьями 110, 167-170  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

В удовлетворении иска отказать.

            Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа  в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

 

Судья                                                                         Плеханова Н.А.