АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25

http://www.kursk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А35-11658/2022

15 февраля 2024 года

г. Курск

Резолютивная часть решения объявлена 08.02.2024.

 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Бесединой А.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании материалы дела по иску

Администрации города Курчатова Курской области (ИНН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Спецстроймонтаж» (ИНН 

<

***>)

об обязании в течение 60 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу устранить недостатки работ, выполненных по договорам №9/88731-Д от 02.07.2019, № 9/96997-Д от 24.09.2019, № 9/114420-Д от 26.03.2020, выявленные в период действия гарантийных обязательств,

третье лицо: АО «Концерн Роэнергоатом» в лице филиала «Курская атомная станция».

В судебном заседании участвуют представители:

от истца: ФИО2, по доверенности от 09.01.2023,

от ответчика: ФИО3, по доверенности от 21.08.2023,

от третьего лица: не явился, извещен.

 

Администрации города Курчатова Курской области обратилась в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Спецстроймонтаж» об обязании в течение 60 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу устранить недостатки работ, выполненных по договорам №9/88731-Д от 02.07.2019, № 9/96997-Д от 24.09.2019, № 9/114420-Д от 26.03.2020, выявленные в период действия гарантийных обязательств.

Определением Арбитражного суда Курской области от 30.01.2023 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» в лице филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция».

В процессе судебного разбирательства от истца поступило заявление об уточнении исковых требований, согласно которому просит обязании в течение 60 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу устранить недостатки работ, выполненных по договорам №9/88731-Д от 02.07.2019, № 9/96997-Д от 24.09.2019, № 9/114420-Д от 26.03.2020, выявленные в период действия гарантийных обязательств:

- на Трибуне стадиона литер «А» в рядах А-Г в осях 1-50 удалить очаги коррозии и восстановить лакокрасочное покрытие опорных конструкций (рам для крепления сидений) от ржавчины (коррозии) на площади 131,274 кв.м в порядке и с применением материалов, предусмотренных договором подряда № 9/88731-Д от 02.07.2019г.;

1.2 устранить недостатки, выявленные в период действия гарантийных обязательств по договору подряда № 9/96997-Д от 24.09.2019г.:

- выполнить штукатурку фасада и окраску фасада Трибуны стадиона литер «А» в рядах А-Г в осях 1-50 на площади 136,7 кв.м в порядке и с применением материалов, предусмотренных договором подряда №9/96997-Д от 24.09.2019г.;

1.3 устранить недостатки, выявленные в период действия гарантийных обязательств по договору подряда № 9/114420-Д от 26.03.2020г.:

- устранить коррозию, покраску металла, осуществить гидроизоляцию, заделать межпанельные швы между плитами в объеме, порядке и с применением материалов, предусмотренных договором подряда № 9/114420-Дот 26.03.2020г.  

Истец просит указать в решении, что на основании пункта 3 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса РФ Администрация города Курчатова Курской области  вправе осуществить соответствующие действия за счет общества с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж», со взысканием с него необходимых расходов в размере 1 744 776 руб. 70 коп. в случае, если общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж» не исполнит решение в течение установленного срока. Так же истец просит в случае неисполнения решения суда в установленный 60-дневный срок, взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж» неустойку в размере 5 000 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения судебного акта. 

Уточненные требования приняты судом к производству.

Через канцелярию суда от ответчика поступило  письменное мнение. Приобщено к материалам дела. 

Соглашение сторон по фактическим обстоятельствам дела и заявленным требованиям и возражениям.     

Представитель истца поддержал заявленные требования.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований.

Представители сторон под аудиозапись подтвердили суду, что иных заявлений и ходатайств, не рассмотренных судом, не имеется, все заявленные ранее ходатайства стороны не поддерживают, в связи с чем, они оставлены судом без рассмотрения.

На основании статьи 156 АПК РФ рассмотрено судом в отсутствие третьего лица, извещенного о времени и месте судебного заседания. 

Изучив материалы дела, выслушав доводы представителя истца, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Администрация города Курчатова Курской области, 307251, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, дата присвоения ОГРН 20.11.2002, ИНН 

<

***>.

Общество с ограниченной ответственностью «Спецстроймонтаж», 305021, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, дата присвоения ОГРН 06.02.2019, ИНН 

<

***>.

Между АО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик) и ООО «СпецСтройМонтаж» (Подрядчик) был заключен договор подряда № 9/88731-Д от 02.07.2019, согласно которому Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ «Выполнение строительно-монтажных работ по восстановлению несущих н ограждающих конструкций трибуны Комбината спортивных сооружений», а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.

Согласно п.1.3, начало работ: с даты подписания договора обеими сторонами.

Окончание работ: 31.10.2019, с правом досрочного выполнения работ по письменному согласованию с Заказчиком.

Стоимость работ по договору определяется на основании Расчета цены договора (Приложение №3) и Тематического задания (Приложение № За) к настоящему договору (п.2.1).

Основанием для расчетов служат акт о приемке выполненных работ (расширенный) по форме КС-2р (приложение № 6), справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КСЗ (приложение № 7), приложение к справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КСЗ (приложение № 8), счет-фактура, предъявленные Подрядчиком в адрес Заказчика (п.2.2).

В силу п.6.2 Заказчик в течение 10 (десять) календарных дней со дня получения от Подрядчика акта сдачи-приемки выполненных работ, обязан направить Подрядчику подписанные документы или мотивированный отказ от их подписания.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ обеими сторонами (п.6.5).

При выявлении в период гарантийного срока дефектов (браков, неисправностей) в результатах работ, выполненных по настоящему договору, Заказчик направляет Подрядчику уведомление о необходимости принять участие в составлении акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях). Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения, Представитель Подрядчика (с надлежаще оформленными полномочиями) обязан прибыть не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

В случае неявки представителя Подрядчика для составления акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях) в сроки и в место, указанные в уведомлении Заказчика, и/или в случае ненадлежащего оформления полномочий такого представителя, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных дефектах (браках, неисправностях). При этом такой акт признается Подрядчиком надлежащим подтверждением выявленных дефектов (браков, неисправностей) (п.6.6).

По договору подряда № 9/88731-Д от 02.07.2019 между АО «Концерн Росэнергоатом» и ООО «СпецСтройМонтаж» были подписаны следующие акты о приемке выполненных работ: №1 от 26.08.2019, №2 от 26.08.2019, №3 от 20.09.2019, №4 от 20.09.2019, №5 от 07.10.2019, №6 от 07.10.2019, №7 от 23.10.2019, №8 от 23.10.2019, №10 от 13.12. 2019, №11 от 08.12.2020, №12 от 22.12.2020, №13 от 28.12.2020.

08.11.2021 между АО «Концерн Росэнергоатом» (Цедент) и Администрацией города Курчатова Курской области (Цессионарий) заключен договор уступки права требования №9/177826-Д, согласно которому основанием для заключения настоящего Договора явилась безвозмездная передача Цедентом в собственность муниципального образования «Город Курчатов» Курской области трибуны стадиона литер «А», площадью 1771,4 кв.м. (далее - Имущество), расположенного но адресу: 

<

...>, в соответствии с решением Курчатовской городской Думы от 28.08.2020 №31 «Об утверждении перечня имущества АО «Концерн Росэнергоатом», принимаемого в собственность муниципального образования «Город Курчатов» Курской области», постановлением администрации города Курчатова от 03.09.2020 №1173 «О принятии имущества в собственность муниципального образования «Город Курчатов» Курской области», договором пожертвования от 02.08.2021 № 9/168386-Д, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области 31,08.2021, актом приема-передачи Имущества от 02.08.2021 года.

Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования в отношении Подрядчика - ООО «СпецСтройМонтаж» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) по договору подряда №9/88731-Д от 02.07.2019 (далее - договор подряда), заключенному между Цедентом и Подрядчиком, в соответствии с которым Подрядчик обязан в соответствии с прилагаемым к договору подряда техническим заданием выполнить работы по восстановлению несущих и ограждающих конструкций трибуны Комбината спортивных сооружений.

1.2. Цессионарию передаются следующие права требования к Подрядчику:

1.2.1. Право требовать в порядке, установленном договором подряда, от Подрядчика исполнения обязательств при выявлении Цессионарием в период гарантийного срока, установленного в пункте 6.5 договора подряда, дефектов (браков, неисправностей) в результатах работ, выполненных по договору подряда.

3.2.2. Право предъявлять претензии по качеству выполненных работ в соответствии с установленном договора подряда.

1.2.3. Право требовать в соответствии с пунктом 6.6 договора подряда и в порядке, установленном договором подряда, от Подрядчика компенсации Цессионарию фактически понесенных Цессионарием затрат в период гарантийного срока.

1.2.4. Право требовать от Подрядчика обеспечение исполнения гарантийных обязательств Подрядчиком, установленного в пунктах 7.1 и 7.8 договора подряда, в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком.

Между АО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик) и ООО «СпецСтройМонтаж» (Подрядчик) был заключен договор подряда № 9/96997-Д от 24.09.2019, согласно которому Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить, в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1), работы по теме Ремонт зданий и сооружений КСС Курской АЭС, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.

Согласно п.1.3, начало работ: с даты подписания договора обеими сторонами.

Окончание работ: 25.11.2019, с правом досрочного выполнения работ по письменному согласованию с Заказчиком.

Стоимость работ по договору определяется на основании Расчета цены договора (Приложение № 3) к настоящему договору. (п.2.1).

Основанием для расчетов служит акт о приемке выполненных работ - форма КС-2р (приложение №8), справка о стоимости выполненных работ и затрат - форма КС-3 (приложение №9), исполнительная документация (технические акты) комплект документации, предусмотренный Календарным планом и Техническим заданием, счет-фактура, предъявленная Подрядчиком в адрес Заказчика (п.2.2).

В силу п.3.2 Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта сдачи-приемки выполненных работ, обязан направить Подрядчику подписанные документы или мотивированный отказ от их подписания.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ обеими сторонами (п.3.5).

При выявлении в период гарантийного срока дефектов (браков, неисправностей) в результатах работ, выполненных по настоящему договору, Заказчик направляет Подрядчику уведомление о необходимости принять участие в составлении акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях). Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения, Представитель Подрядчика (с надлежаще оформленными полномочиями) обязан прибыть не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

В случае неявки представителя Подрядчика для составления акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях) в сроки и в место, указанные в уведомлении Заказчика, и/или в случае ненадлежащего оформления полномочий такого представителя, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных дефектах (браках, неисправностях). При этом такой акт признается Подрядчиком надлежащим подтверждением выявленных дефектов (браков, неисправностей) (п.3.6).

По договору подряда № 9/114420-Д от 26.03.2020г. между АО «Концерн Росэнергоатом» и ООО «СпецСтройМонтаж» были подписаны следующие акты о приемке выполненных работ: №1 от 02.07.2020, №2 от 28.10.2020, №3 от 08.12.2020, №4 от 02.02.2021, №6 от 03.02.2021.

29.04.2022 между АО «Концерн Росэнергоатом» (Цедент) и Администрацией города Курчатова Курской области (Цессионарий) заключен договор уступки права требования №9/177966-Д, согласно которому основанием для заключения настоящего Договора явилась безвозмездная передача Цедентом в собственность муниципального образования «Город Курчатов» Курской области трибуны стадиона литер «А», площадью 1771,4 кв.м (далее - Имущество), расположенного но адресу: 

<

...>, в соответствии с решением Курчатовской городской Думы от 28.08.2020 №31 «Об утверждении перечня имущества АО «Концерн Росэнергоатом», принимаемого в собственность муниципального образования «Город Курчатов» Курской области», постановлением администрации города Курчатова от 03.09.2020 №1173 «О принятии имущества в собственность муниципального образования «Город Курчатов» Курской области», договором пожертвования от 02.08.2021 № 9/168386-Д, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области 31,08.2021, актом приема-передачи Имущества от 02.08.2021 года.

Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования в отношении Подрядчика - ООО «СпецСтройМонтаж» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) по договору подряда №9/96997-Д от 24.09.2019 (далее - договор подряда), заключенному между Цедентом и Подрядчиком, в соответствии с которым Подрядчик обязан в соответствии с прилагаемым к договору подряда техническим заданием выполнить работы по ремонту сооружений КСС Курской АЭС.

1.2. Цессионарию передаются следующие права требования к Подрядчику:

1.2.1. Право требовать в порядке, установленном договором подряда, от Подрядчика исполнения обязательств при выявлении Цессионарием в период гарантийного срока, установленного в пункте 3.5 договора подряда, дефектов (браков, неисправностей) в результатах работ, выполненных по договору подряда.

3.2.2. Право предъявлять претензии по качеству выполненных работ в соответствии с установленном договора подряда.

1.2.3. Право требовать в соответствии с пунктом 6.12 договора подряда и в порядке, установленном договором подряда, от Подрядчика компенсации Цессионарию фактически понесенных Цессионарием затрат в период гарантийного срока.

Между АО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик) и ООО «СпецСтройМонтаж» (Подрядчик) был заключен договор подряда № 9/114420-Д от 26.03.2020, согласно которому Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить, в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение №1) работы по ремонту по теме Ремонт строительных конструкций трибуны стадиона КСС, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.

Согласно п.1.3, начало работ: с даты подписания договора обеими сторонами.

Окончание работ: 25.08.2020, с правом досрочного выполнения работ по письменному согласованию с Заказчиком.

Стоимость работ но договору определяется на основании Локального сметного расчета №9/16493-Д-ЛС.ЛС (Приложение № 3) к настоящему договору. (п.2.1).

Основанием для расчетов служит акт о приемке выполненных работ - форма КС-2р (приложение №8), справка о стоимости выполненных работ и затрат - форма КС-3 (приложение №9), исполнительная документация (технические акты) комплект документации, предусмотренный Календарным планом и Техническим заданием, счет-фактура, предъявленная Подрядчиком в адрес Заказчика (п.2.2).

В силу п.3.2 Заказчик в течение 10 (десять) календарных дней со дня получения от Подрядчика акта сдачи-приемки выполненных работ, обязан направить Подрядчику подписанные документы или мотивированный отказ от их подписания.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ обеими сторонами (п.3.5).

При выявлении в период гарантийного срока дефектов (браков, неисправностей) в результатах работ, выполненных по настоящему договору, Заказчик направляет Подрядчику уведомление о необходимости принять участие в составлении акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях). Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения, Представитель Подрядчика (с надлежаще оформленными полномочиями) обязан прибыть не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

В случае неявки представителя Подрядчика для составления акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях) в сроки и в место, указанные в уведомлении Заказчика, и/или в случае ненадлежащего оформления полномочий такого представителя, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных дефектах (браках, неисправностях). При этом такой акт признается Подрядчиком надлежащим подтверждением выявленных дефектов (браков, неисправностей) (п.3.9).

По договору подряда № 9/114420-Д от 26.03.2020г. между АО «Концерн Росэнергоатом» и ООО «СпецСтройМонтаж» были подписаны следующие акты о приемке выполненных работ: №1 от 02.07.2020, №2 от 28.10.2020, №3 от 08.12.2020, №4 от 02.02.2021, №6 от 03.02.2021.

29.04.2022 между АО «Концерн Росэнергоатом» (Цедент) и Администрацией города Курчатова Курской области (Цессионарий) заключен договор уступки права требования №9/114420-Д-2, согласно которому основанием для заключения настоящего Договора явилась безвозмездная передача Цедентом в собственность муниципального образования «Город Курчатов» Курской области трибуны стадиона литер «А», площадью 1771,4 кв.м (далее - Имущество), расположенного по адресу: 

<

...>, в соответствии с решением Курчатовской городской Думы от 28.08.2020 №31 «Об утверждении перечня имущества АО «Концерн Росэнергоатом», принимаемого в собственность муниципального образования «Город Курчатов» Курской области», постановлением администрации города Курчатова от 03.09.2020 №1173 «О принятии имущества в собственность муниципального образования «Город Курчатов» Курской области», договором пожертвования от 02.08.2021 № 9/168386-Д, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области 31.08.2021, актом приема-передачи Имущества от 02.08.2021 года.

Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования в отношении Подрядчика - ООО «СпецСтройМонтаж» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>,) по договору подряда №9/114420-Д от 26.03.2020г. (далее -договор подряда), заключенному между Цедентом и Подрядчиком, в соответствии с которым Подрядчик обязан в соответствии с прилагаемым к договору подряда техническим заданием выполнить работы по ремонту строительных конструкций трибуны стадиона КСС.

1.2. Цессионарию передаются следующие права требования к Подрядчику:

1.2.1. Право требовать в порядке, установленном договором подряда, от Подрядчика исполнения обязательств при выявлении Цессионарием в период гарантийного срока, установленного в пункте 3.5 договора подряда, дефектов (браков, неисправностей) в результатах работ, выполненных по договору подряда.

3.2.2. Право предъявлять претензии по качеству выполненных работ в соответствии с установленном договора подряда.

1.2.3. Право требовать в соответствии с пунктом 6.12 договора подряда и в порядке, установленном договором подряда, от Подрядчика компенсации Цессионарию фактически понесенных Цессионарием затрат в период гарантийного срока.

1.2.4. Право требовать от Подрядчика обеспечение исполнения гарантийных обязательств Подрядчиком, установленного в пунктах 7.1 и 7.8 договора подряда, в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком.

Как указывает истец, в период действия гарантийного срока (гарантийных обязательств), установленного вышеуказанными договорами подряда, на объекте трибуна стадиона литер «А» были выявлены недостатки в выполненных работах и устанавливались сроки устранения выявленных недостатков, которые были зафиксированы в протоколе совещания рабочей группы по устранению недостатков работы ООО «СпецСтройМонтаж» от 20.04.2022 года.

Однако, ООО «СпецСтройМонтаж» не устранило недостатки, выявленные на объекте.

Администрацией города Курчатова в адрес ООО «СпецСтройМонтаж» 10 июня 2022 года направлялась претензия об устранении недостатков, указанных в протоколе совещания рабочей группы по устранению недостатков работы ООО «СпецСтройМонтаж», выявленные на объекте «Стадион Комбината спортивных сооружений» от 20.04.2022 года, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня направления претензии (исх. от 08.06.2022 №2744).

Претензию администрации города Курчатова от 08.06.2022 №2744 об исполнении гарантийных обязательств ответчик оставил без ответа, выявленные недостатки не устранены.

Распоряжением администрации города Курчатова от 04.10.2022 №429-р была создана комиссия по проверке гарантийных обязательств по договорам подряда.

Во исполнение пункта 4 указанного распоряжения в адрес ООО «СпецСтройМонтаж» направлялось уведомление о необходимости принять участие представителю с надлежаще оформленными полномочиями в обследовании и в составлении акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях), с указанием срока и места (исх. от 07Л0.2022 №4796).

Однако, представитель ООО «СпецСтройМонтаж» не участвовал в обследовании.

Актом о выявленных дефектах (браках, неисправностях) от 14 октября 2022 года, подписанным членами комиссии, были установлены недостатки, требующие устранения в течение гарантийного срока и был установлен срок устранения недостатков до 07.11,2022 года.

В ходе осмотра было выявлены следующие недостатки:

- основания для креплений сидений на трибунах покрыты ржавчиной;

- на фасаде трибун имеется отслоение отделочного слоя (краска слезла, штукатурка отвалилась), мелкие и крупные повреждения, трещины на штукатурке. Многочисленные дефекты лакокрасочного покрытия, неравномерное окрашивание, шелушения лицевой части стен подтрибунных помещений;

- на плитках перекрытия под трибунами имеется коррозия, металл не прокрашен, отсутствует гидроизоляция, швы между плитами неплотно примыкают и не герметично проклеены;

- на трибуне со стороны ул. Гайдара имеется отслоение штукатурки между плитами. Стена прокрашена разной краской и оштукатурена разными по фактуре шпатлевкой;

- имеется затекание воды в подтрибунные помещения.

ООО «СпецСтройМонтаж» не устранило недостатки, выявленные в период гарантийных обязательств по договорам подряда в установленный срок.

На основании вышеизложенного истец обратился в суд с уточненным исковым заявлением.

Ответчик заявленные требования отклонил.

Третье лицо в письменном отзыве поддержало позицию истца.

Оценив представленные доводы и доказательства, суд считает, что исковые требования подлежат частичному  удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом. 

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

В силу пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусмотрены определенные способы защиты гражданских прав.

Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с рассматриваемым требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права потребовать исполнения определенного обязательства от ответчика, наличия у ответчика обязанности исполнить это обязательство и факта его неисполнения последним.

Статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (702 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу пункта 1 статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Согласно пункту 1 статьи 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 755 ГК РФ подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами (пункт 2 статьи 755 ГК РФ).

Таким образом, положения названных норм предусматривают презумпцию вины подрядчика за недостатки (дефекты) выполненных работ, выявленные в пределах гарантийного срока, и безвозмездное устранение недостатков только при выполнении подрядчиком работ с отступлениями от договора подряда.

В соответствии с абзацем 2 части 1 ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика в том числе безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

Согласно представленным в материалы дела документам, требования об устранении недостатков выполненных ответчиком работ предъявлены истцом в пределах гарантийного срока, установленного Договором.

Взяв на себя гарантийные обязательства в соответствии с разделом 7 договора, ООО «Спецстроймонтаж», как подрядчик, в силу пункта 2 статьи 755 ГК РФ, несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Таким образом, в пределах гарантийного срока действует презумпция вины подрядчика за недостатки (дефекты) выполненных работ и на него возлагается обязанность доказать, что работы им выполнены качественно, а возникшие в период гарантийного срока недостатки (дефекты) не являются следствием выполненных подрядчиком работ.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Право заказчика по своему выбору потребовать от подрядчика в случае некачественного выполнения работ или невозможности использования объекта по назначению, в том числе, безвозмездного устранения недостатков, установлено ст. 723 ГК РФ.

В протоколе совещания рабочей группы по устранению недостатков работы ООО «СпецСтройМонтаж» от 20.04.2022 года было установлено следующее:

1) На фасаде трибун имеется отслоение отделочного слоя (краска слезла, штукатурка отвалилась), имеются дефекты лакокрасочного покрытия, мелкие и не мелкие повреждения. Основание для сидений плохо прокрашено, имеются следы коррозии;

Срок устранения недостатков: до 04.05.2022.

2) Затекание воды во внутрь подтрибуипых помещений (ВРУ, тренажерный

зад)

Срок устранения недостатков: до 24.04.2022;

3) Организовать систему оттока воды с сидений стадиона (просверлить два отверстия в сидении)

Срок устранения недостатков: до 01.05.2022;

4) Ливневые стоки на трибунах расположены на уровне выше иола, что препятствует - отхождению воды, имеются застои воды. Выполнить стяжку с уклоном для слива воды с трибун. Нарастить ливневые стоки на трибунах.

Срок устранения недостатков: до 01.05.2022.

5) Па плитах перекрытия под трибунами имеется коррозия, металл не прокрашен, отсутствует гидроизоляция, швы между плитами неплотно примыкают и не герметично проклеены;

Срок устранения недостатков; до 01.05.2022.

6) Заменить деформированные отливы на окнах Срок устранения недостатков: до 10.05.2022.

В установленные сроки недостатки ответчиком устранены не были. На письменные обращения истца о необходимости устранения недостатков ответчик не предпринимал ни каких мер по устранению недостатков и разрешению спора.

Определением суда от 19.05.2023 суд обязал лиц, участвующих в деле провести совместный осмотр спорных работ на объекте 07.06.2023 в 10 час. 00 мин. с составлением совместного акта осмотра с фото и видео фиксацией.

27.06.2023 истцом в материалы дела был представлен Акт от 07.06.2023 совместного осмотра спорных работ на объекте «Трибуна стадиона литер «Л», площадью 1771,4 кв.м., расположенному по адресу: 

<

...>.

В проведении осмотра участвовали представители истца и третьего лица.

В нарушение определения суда представитель ООО «СпецСтройМонтаж» не явился, участие в совместном осмотре не принял.

Дата и время совместного осмотра спорных работ на объекте были назначены Арбитражным судом Курской области по ходатайству ООО «СпецСтройМонтаж» и с учетом мнения представителя ООО «СпецСтройМонтаж», присутствовавшего на судебном заседании 19.05.2023 года, в связи с чем явившиеся стороны осуществили осмотр спорных работ на объекте «Трибуна стадиона литер «А», площадью 1771,4 кв.м, расположенном по адресу: 

<

...>.

В результате осмотра были подтверждены ранее выявленные дефекты (брак, неисправности), перечисленные в акте о выявленных дефектах (браках, неисправностях) от 14 октября 2022 года, а именно:

№

Выявленные дефекты (брак, неисправности)

Объемы (при наличии)

Требуемые действия по устранению недостатков (брака, неисправностей)

1

Опорные конструкции (рамы для крепления сидений), установленные на Трибуне стадиона литер «А», нарушено лакокрасочное покрытие опорных конструкций сидений. Имеются очаги коррозии (приложения №№ 1-7 прилагаются к акту).

   площадь 131,274 кв.м

На Трибуне стадиона литер «А» в рядах А-Г в осях 1-50 необходимо удалить очаги коррозии и восстановить лакокрасочное покрытие опорных конструкций (рам для крепления сидений) от ржавчины (коррозии) на площади 131,274 кв.м (гарантийные обязательства по договору подряда № 9/88731-Д от 02.07.2019г.).

i

На фасаде Трибуны стадиона литер «А» имеется отслоение отделочного слоя (краска слезла, штукатурка отвалилась), мелкие и крупные повреждения, трещины на штукатурке, многочисленные дефекты лакокрасочного покрытия, неравномерное окрашивание, шелушения лицевой части стен подтрибунных помещений. На фасаде трибуны по ряду А в осях 1-50 (со стороны ул. Гайдара) имеется отслоение штукатурки между плитами, стена прокрашена неравномерно (разные оттенки краски) и оштукатурена разными по фактуре шпатлевкой (приложения №№ 8-33 прилагаются к акту).

площадь 136,7 кв.м

Необходимо выполнить штукатурку фасада и окраску фасада Трибуны стадиона литер «А» в рядах А-Г в осях 1-50 на площади 136,7 кв.м в порядке и с применением материалов, предусмотренных договором подряда №9/96997-Дот 24.09.2019.

3

На металлических элементах перекрытия под трибунами имеется коррозия, металл не прокрашен, отсутствует гидроизоляция, швы между плитами неплотно примыкают и не герметично проклеены. Имеется затекание воды в подтрибунное помещение №42 ВРУ, расположенное в рядах Б-В в осях 20-22 (приложения №№ 34-45 прилагаются к акту).

объем

установлен

договором

подряда

№  9/114420-Д

от 26.03.2020г.

Необходимо выполнить работу по устранению коррозии, покраске металла, по гидроизоляции, по заделке межпанельных швов между плитами, в объеме, порядке и с применением материалов, предусмотренных договором подряда № 9/114420-Д от 26.03.2020г.

По состоянию на 07 июня 2023 года, дефекты (браки, неисправности) и объемы, зафиксированные в акте о выявленных дефектах (браках, неисправностях) от 14 октября 2022 года, Обществом с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж» не устранены.

Кроме того, по состоянию на 07 июня 2023 года в результате совместного осмотра были дополнительно выявлены следующие дефекты (брак, неисправности) и их объемы:

№

Выявленные дефекты (брак, неисправности)

Объемы (при наличии)

Требуемые действия по устранению недостатков (брака, неисправностей)

1

На трибуне стадиона литер «А» в рядах А-Г в осях 1-2, 6-7, 12-13, 18-20, 25-26, 38-39, 41-42 имеется разрушение ступеней (лестницы) (приложения №№ 46-53 прилагаются к акту).

разрушения ступеней трибуны в рядах А-Г в осях 1-2, 6-7, 12-13, 18-20, 25-26, 38-39, 41-42.

На Трибуне стадиона литер «А» в рядах А-Г в осях 1-50 необходимо выполнить

работу по устройству железобетонных ступеней (лестницы) в рядах А-Г в осях 1-2, 6-7, 12-13, 18-20, 25-26, 38-39, 41-42 в порядке и с применением материалов, предусмотренных договором подряда № 9/114420-Д от 26.03.2020г.

2

На фасаде Трибуны стадиона литер «А» по ряду А в осях 10-15 (со стороны ул. Гайдара) над металлическим дверным блоком (входной дверью) отсутствует штукатурка (приложение № 54 прилагается к акту).

 

Необходимо выполнить

работу по штукатурке и окраске фасада Трибуны стадиона литер «А» по ряду А в осях 10-15 (со стороны ул. Гайдара) над металлическим дверным блоком (входной дверью) в порядке и с применением материалов, предусмотренных договором подряда №9/96997-Д от 24.09.2019.

Как указали стороны в процессе осмотра, выявленные по результатам осмотра 07 июня 2023 года дефекты (брак, неисправности) попадают под гарантийные обязательства подрядчика, которые должны быть устранены Обществом с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж».

Согласно уточненным исковым требованиям, истец просит устранить недостатки работ, выполненных по договорам №9/88731-Д от 02.07.2019, № 9/96997-Д от 24.09.2019, № 9/114420-Д от 26.03.2020, выявленные в период действия гарантийных обязательств:

- на Трибуне стадиона литер «А» в рядах А-Г в осях 1-50 удалить очаги коррозии и восстановить лакокрасочное покрытие опорных конструкций (рам для крепления сидений) от ржавчины (коррозии) на площади 131,274 кв.м в порядке и с применением материалов, предусмотренных договором подряда № 9/88731-Д от 02.07.2019;

1.2 устранить недостатки, выявленные в период действия гарантийных обязательств по договору подряда № 9/96997-Д от 24.09.2019:

- выполнить штукатурку фасада и окраску фасада Трибуны стадиона литер «А» в рядах А-Г в осях 1-50 на площади 136,7 кв.м в порядке и с применением материалов, предусмотренных договором подряда №9/96997-Д от 24.09.2019;

1.3 устранить недостатки, выявленные в период действия гарантийных обязательств по договору подряда № 9/114420-Д от 26.03.2020:

- устранить коррозию, покраску металла, осуществить гидроизоляцию, заделать межпанельные швы между плитами в объеме, порядке и с применением материалов, предусмотренных договором подряда № 9/114420-Дот 26.03.2020.  

Истец просит указать в решении, что на основании пункта 3 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса РФ Администрация города Курчатова Курской области  вправе осуществить соответствующие действия за счет общества с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж», со взысканием с него необходимых расходов в размере 1 744 776 руб. 70 коп. в случае, если общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж» не исполнит решение в течение установленного срока.

В целях обеспечения исполнимости решения суда истец провел оценку стоимости работ на устранения недостатков по вышеуказанным договорам. Согласно представленным документам (локальная смета и локальный сметный расчет), их общая стоимость составила 1 744 776 руб. 59 коп.

Однако, в представленной истцом локальной смете №297-УКС-2023 включена стоимость работ в разделе 2. «Устранение протечек над потрибунным помещением №22 (ряд Б-В, ось 20-22)» стоимостью 186 585 руб. 47 коп., которые не были предусмотрены условиями договора подряда №9/114420-Д от 26.03.2020. Указанные виды и объемы работ не были включены в локально-сметный расчет и не сдавались подрядчиком по актам выполненных работ.

В этой связи совершенно несостоятельной является ссылка истца на гарантийные обязательства ООО «СпецСтройМонтаж», поскольку в акте о приемке выполненных работ по форме КС-2 работы по устройству гидроизоляции в подтрибунном помещение №42 ВРУ, расположенном в рядах Б-В в осях 20-22 отсутствуют, а гарантийные обязательства и в силу закона, и в силу договора распространяются только на указанные в акте выполненные работы. На иные работы, которые не выполнены, не приняты и не оплачены Заказчиком, гарантийные обязательства не распространяется, иначе на стороне Истца возникнет неосновательное обогащение за счет Ответчика.

Согласно пункту 2 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Таким образом, в пределах гарантийного срока действует презумпция вины подрядчика за недостатки (дефекты) выполненных работ и на него в соответствии со статьей 65 Кодекса возлагается обязанность доказать, что работы им выполнены качественно, а возникшие в период гарантийного срока недостатки (дефекты) не являются следствием выполненных подрядчиком работ (Определение Верховного Суда РФ от 19.12.2017 №306-ЭС17-18387 по делу №А06-7560/2015).

Из указанных обстоятельств и представленных в Арбитражный суд Курской области материалов, иных документальных доказательств в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о том, что результат выполненных ООО «СпецСтройМонтаж» работ не соответствовал условиям договора о качестве, требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода, т.е. с нарушением п. 1 ст. 721 ГК РФ, следовательно, у ООО «СпецСтройМонтаж» перед истцом возникло обязательство по безвозмездному устранению недостатков:

1.1. Устранить недостатки, выявленные в период действия гарантийных обязательств по договору подряда № 9/88731-Д от 02.07.2019г.:

- на Трибуне стадиона литер «А» в рядах А-Г в осях 1-50 удалить очаги коррозии и восстановить лакокрасочное покрытие опорных конструкций (рам для крепления сидений) от ржавчины (коррозии) на площади 131,274 кв.м. в порядке и с применением материалов, предусмотренных договором подряда № 9/88731-Д от 02.07.2019г.;

1.2. Устранить недостатки, выявленные в период действия гарантийных обязательств по договору подряда № 9/96997-Д от 24.09.2019г.:

- выполнить штукатурку фасада и окраску фасада Трибуны стадиона литер «А» в рядах А-Г в осях 1-50 на площади 136,7 кв.м. в порядке и с применением материалов, предусмотренных договором подряда №9/96997-Д от 24.09.2019г.

В соответствии с частями 1, 3 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения. Арбитражный суд может указать в решении, что истец вправе осуществить соответствующие действия за счет ответчика со взысканием с него необходимых расходов в случае, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока.

Таким образом, законодательством предусмотрено право заказчика на возмещение ему необходимых расходов на устранение недостатков работы в случае неисполнения подрядчиком решения суда об обязании устранить эти недостатки безвозмездно.

В пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.01.2013 №153, предусмотрено, что, удовлетворяя негаторный иск, суд может обязать нарушителя совершить действия (например, вывезти мусор) и (или) воздержаться от действий (например, прекратить размещать отходы производства на земельном участке). Если ответчик не осуществил действия, указанные в решении суда, истец вправе совершить их самостоятельно, взыскав с ответчика денежные средства в соответствии со статьей 324 или с частью 3 статьи 174 АПК РФ, если он заявлял требование о взыскании денежных средств в случае неисполнения судебного акта об обязании совершить действия в определенный срок.

На основании изложенного, суд полагает возможным частично удовлетворить требования истца об осуществлении соответствующих действий по устранению недостатков выполненных работ за счет общества с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж», со взысканием с него необходимых расходов в случае, если общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж» не исполнит решение в течение установленного срока, в сумме 1 558 191 руб. 23 коп.

В соответствии с п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (п. 1 ст. 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ). 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» на основании п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (ст. 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка). 

Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства. 

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает её размер и / или порядок определения. 

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения. 

В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»). 

В определениях Конституционного Суда РФ № 1367-О от 27.06.2017, № 2579-О от 24.11.2016 указано на то, что положения ч. 1 ст. 308.3. ГК РФ направлены на защиту прав кредитора по обязательству, в частности путём присуждения ему денежной суммы на случай неисполнения должником судебного акта на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, и с учётом разъяснений, данных в постановлении Пленума ВС РФ № 7, где было указано, что присуждение судебной неустойки в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре возможно только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; суду надлежит учитывать обстоятельства, объективно препятствующие исполнению судебного акта о понуждении к исполнению в натуре. Из изложенного следует, что судебная неустойка в отличие от классической неустойки несёт в себе публично-правовую составляющую, поскольку она является мерой ответственности на случай неисполнения судебного акта, устанавливаемой судом, в целях дополнительного воздействия на должника. Размер судебной неустойки определяется судьей по своему внутреннему убеждению с учётом обстоятельств дела. 

Руководствуясь указанными нормами права и разъяснениями Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ, с учётом принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, учитывая требования об обязательности и неукоснительности исполнения судебных актов, суд, приняв во внимание обстоятельства дела, считает возможным установить размер судебной неустойки в размере 1 000 руб. за каждый день просрочки исполнения судебного акта.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу ст. 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Достаточных доказательств в опровержение доводов истца ответчик в материалы дела не представил.

При указанных обстоятельствах исковые требования суд признает подлежащими частичному удовлетворению.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, расходы по уплате государственной пошлины суд относит на ответчика.

Руководствуясь статьями 6, 10, 49, 65, 70, 110, 167-170, 174, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Уточненные исковые требования Администрации города Курчатова Курской области (ИНН 

<

***>) удовлетворить частично.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж» (ИНН 

<

***>) в течение 60 календарных дней со следующего дня после наступления благоприятных погодных условий (01.05.2024) безвозмездно устранить недостатки, выявленные в период действия гарантийных обязательств по договорам подряда №9/88731-Д от 02.07.2019, № 9/96997-Д от 24.09.2019, а именно:

1.1. Устранить недостатки, выявленные в период действия гарантийных обязательств по договору подряда № 9/88731-Д от 02.07.2019г.:

- на Трибуне стадиона литер «А» в рядах А-Г в осях 1-50 удалить очаги коррозии и восстановить лакокрасочное покрытие опорных конструкций (рам для крепления сидений) от ржавчины (коррозии) на площади 131,274 кв.м. в порядке и с применением материалов, предусмотренных договором подряда № 9/88731-Д от 02.07.2019г.;

1.2. Устранить недостатки, выявленные в период действия гарантийных обязательств по договору подряда № 9/96997-Д от 24.09.2019г.:

- выполнить штукатурку фасада и окраску фасада Трибуны стадиона литер «А» в рядах А-Г в осях 1-50 на площади 136,7 кв.м. в порядке и с применением материалов, предусмотренных договором подряда №9/96997-Д от 24.09.2019г.;

На основании пункта 3 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса РФ Администрации города Курчатова Курской области (ИНН 

<

***>) вправе осуществить соответствующие действия за счет общества с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж» (ИНН 

<

***>), со взысканием с него необходимых расходов в случае, если общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж» (ИНН 

<

***>) не исполнит решение в течение установленного срока в сумме 1 558 191 руб. 23 коп.

В случае неисполнения решения суда в установленный 60-дневный срок, взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж» (ИНН 

<

***>) в пользу Администрации города Курчатова Курской области (ИНН 

<

***>) неустойку в размере 1 000 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения судебного акта.

В остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж» (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в кассационную инстанцию в Арбитражный суд Центрального округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи. 

Арбитражный суд Курской области разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте Арбитражного суда Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://kursk.arbitr.ru (в информационной системе «Картотека арбитражных дел» на сайте федеральных арбитражных судов по адресу: http://kad.arbitr.ru). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов на бумажном носителе могут быть направлены им заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд. 

 

Судья                                                                                                               А.Ю. Беседина