Арбитражный суд Краснодарского края Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

РЕШЕНИЯ

Дело № А32-43111/2023

г. Краснодар

15 февраля 2024 года

руководствуясь ст. 110, 167-171, 176, 180, 181, Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации  

решил:

Обязать муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  образования муниципального образования город Краснодар спортивная школа № 7 ИНН  2309077612 ОГРН 1032304930426 в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента  вступления решения суда в законную силу организовать проведение работ по сохранению  объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Д.Д. Никитиной»,  1905 - 1912 годы, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул.  Постовая, 59, лит. А, в соответствии с согласованной письмом управления  государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского  края от 05.12.2023 № 78-12-21238/23 научно-проектной документацией, в том числе:  

- расчистку и реставрация кирпичной кладки цоколя, стен и архитектурного декора  южного, восточного и северного фасадов;  

- расчистку штукатурного слоя и реставрация кирпичной кладки цоколя и стен  западного фасада;  

- воссоздание элементов архитектурного лепного декора пинаклей на южном  фасаде по сохраненным образцам. Для воссоздания утраченных элементов пинаклей  выполнить работы по созданию моделей и гипсовых форм на основе демонтированных  элементов;  

- воссоздание покрытия кровли здания из листов гладкой о/ц стали, с соединением  в «одиночный фальц» по новой деревянной обрешетке с устройством гидроизоляционного  слоя;  

- воссоздание системы водоотвода кровли в виде настенного желоба и водосточных  труб;  

- воссоздание открытий выступающих элементов фасада и водосточных труб;  

-воссоздание заполнений оконных проемов в виде деревянных блоков из п/м  хвойных пород с остеклением стеклопакетами;  

- воссоздание заполнения дверного проема главного входа в виде деревянного  остекленного филенчатого блока с фрамугой из п/м твердых пород (наружного и  внутреннего);  

- очистку и реставрацию кованых элементов козырька парадного входа и решеток  

остекления цокольных окон и дверного блока главного входа; 

- воссоздание утраченных кованых элементов ограждения кровли;  

- воссоздание утраченных кованых элементов козырька дворового входа на  

северном фасаде; 

- ремонт деформационных трещин в кирпичной кладке инъецированием  

ремонтными составами; - демонтаж поздней пристройки литер аЗ на северном фасаде; 

- ремонт штукатурного слоя фасадов поздних пристроек на восточном фасаде с  

последующей окраской; 

- замену покрытия кровли поздних пристроек на восточном фасаде на новое из  

листов гладкой о/ц стали, с соединением в «одиночный фальц» по новой деревянной  

обрешетке; 

- устройство системы водоотвода кровли пристроек в виде настенного желоба и  

водосточных труб; 

- мероприятия по ремонту существующей отмостки вокруг здания;  

- мероприятия по усилению фундаментов и стен подвалов здания литер А с  

устройством отсечной гидроизоляции по периметру цоколя и наружным стенам внутри  

подвала; 

- ремонт ж/б перекрытий подвала с очисткой и антикоррозионной обработкой  

металлических балок; 

- усиление внутренних поверхностей стен подвала оштукатуриванием по  

армирующей сетке штукатурными санирующими составами; 

- ремонт существующих бетонных оснований полов подвала с устройством стяжки  

и обмазочной гидроизоляции; 

- ремонт и усиление деревянных элементов чердачного перекрытия;  

- мероприятия по замене старого утеплителя на более легкий и эффективный с  

устройством гидроизоляционного и пароизоляционного покрытия из пленки; 

- усиление и ремонт элементов стропильной системы кровли здания с  

последующей обработкой деревянных элементов огнебиозащитным составом. 

- реставрацию мозаичного покрытия бетонных ступеней входной группы в здание  

(очистка и доформовка сколов); 

- реставрацию покрытия цветной керамической плитки на нижней площадке  

лестницы входной группы (очистка, зачеканка швов и доформовка сколов); 

- шлифовку и покрытие лаком существующих паркетных полов; 

- замену покрытия полов (плитка, ламинированный паркет, линолеум) с  

устройством нового выравнивающего основания; - устройство покрытий полов подвала из керамогранита; - демонтаж поздней облицовки стен листами ГКЛ; - демонтаж кирпичных перегородок в венткамере подвала; 

- устройство новых перегородок санузлов и душевых, с облицовкой ГВЛ листами  

по м/каркасу в помещениях подвала; 

- ремонт штукатурных поверхностей стен и потолков с отбивкой деструктивных  

участков и биоцидной обработкой; 

- закладку дверного проема в подвале из коридора в помещение, планируемое под  

санузел; 

- восстановление конструкций бетонной лестницы спуска в подвал и выхода во  

двор на северном фасаде; 

- раскрытие частично заложенного дверного проема выхода во двор на северном  

фасаде; 

- раскрытие частично заложенного оконного проема на первом этаже северного  

фасада; 

- замену заполнений внутренних дверных проемов на аналогичные - деревянные  

филенчатые блоки с фрамугами в основные помещения, двери из массива, облицованные  

шпоном - в подсобные помещения, двери их ПВХ - в санузлы и душевые; 

- ремонт штукатурного слоя потолков подвальных помещений; 

- ремонт штукатурного слоя потолков первого этажа с отбивкой аварийных  

фрагментов; - отделочные работы по окраске поверхностей в/э составами; 

- устройство подвесных конструкций потолков типа «Амстронг»;  

- ремонт входных групп в здание с учетом требований по безопасности и  

противопожарных требований; 

- ремонт инженерных коммуникаций здания (отопление и вентиляция,  

водоснабжение и канализация, электроснабжение и слаботочные системы). 

Взыскать с муниципального бюджетного образовательного учреждения  дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 7 муниципального  образования город Краснодар ИНН 2309077612 ОГРН 1032304930426 в доход  федерального бюджета 6000 рублей государственной пошлины.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в  кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух  месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший  решение.  

Судья В.С. Чуриков