Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40- 167554/17-12-965

г. Москва

05 декабря 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 28 ноября 2017 года

Решение изготовлено в полном объеме 05 декабря 2017 года

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи Чадова А.С.

протокол судебного заседания составлен секретарем ФИО1

рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению 

АО "Гипротрубопровод" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к ответчику: ООО "Компания "НХПС" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании задолженности по договору № 41603-15-ПИР-Нефтехимпромсервис/ГТП от 14.04.2016 г. в размере 24.855.633,28 рублей, неустойки в размере 975.886,16 рублей,

в заседании приняли участие: согласно протоколу. 

УСТАНОВИЛ:

С учетом уточнения заявленных требований АО «Институт по проектированию магистральных трубопроводов» (далее – истец, общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании с ООО «Компания «НЕФТЕХИМПРОМСЕРВИС» (далее – ответчик) в пользу истца суммы задолженности по договору от 14.04.2016 г. № 41603-15-ПИР-Нефтехимпромсервис/ГТП в размере 24.855.633,28 рублей и неустойки в размере 2.416.941,63 рублей..

Заявление мотивировано тем, что ответчик не оплатил выполненные работы по договору.

Представитель истца в судебном заседании требования поддержал по доводам, изложенным в заявлении. 

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал по доводам, изложенным в отзыве.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей, явившихся в судебное заседание, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требование заявителя не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Основанием иска является то, что в соответствии с условиями договора от 14.04.2016 г. № 41603-15-ПИР-Нефтехимпромсервис/ГТП  истец выполнял проектные работы, что подтверждается актами сдачи-приемки работ, на сумму в размере 22.873.896,44 рублей.

Истец утверждает, что вся документация, счета и счета-фактуры были направлены в адрес ответчика, задолженность за выполненные работы оплачена не была. Претензий по результатам работ ответчик не представил.

В соответствии с п. 11.8 договора истцом за нарушение сроков оплаты работ начислена неустойка в сумме 2.416.941,63 рублей.

Данные доводы не приняты судом во внимание и отклонены ввиду несоответствия их фактическим материалам дела, представленным в дело доказательствам и неправильным применением истцом норм материального права.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу положений ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Кроме того, юридическое лицо, осуществляя предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим законодательством и вступая в новые договорные отношения, должно было предвидеть последствия совершения им юридически значимых действий. Являясь субъектом гражданских правоотношений, ответчик обязан не только знать нормы гражданского законодательства, но и обеспечить соблюдение этих норм.

Согласно ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

Следовательно, выполненные работы подлежат оплате после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом.

В соответствии со ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом.

Согласно п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и его приемка заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

При этом, согласно требованиям ст. 720 Гражданского кодекса Российской Федерации, заказчик обязан с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В соответствии с нормой ст. 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода, при этом, п. 2 названной статьи предусмотрено, что если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.

Как следует из материалов дела, согласно п. 8.2.2 договора истец обеспечивает передачу ответчику результатов ПИР по инженерным изысканиям в двух экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде.

Представление субподрядчиком результатов ПИР инженерным изысканиям производится по накладным, фиксирующим дату передачи и состав передаваемой документации и сопровождается письмом субподрядчика.

Результаты ПИР по инженерным изысканиям в электронном виде представляются в формате, указанном в Задании на проектирование.

В соответствии с п. 8.3.2 договора истец обеспечивает передачу ответчику результатов ПИР по проектной документации (этапа ПИР) в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе в сброшюрованном виде и в электронном виде.

Представление субподрядчиком результатов ПИР инженерным изысканиям производится по накладным, фиксирующим дату передачи и состав передаваемой документации и сопровождается письмом субподрядчика.

Результаты ПИР по инженерным изысканиям в электронном виде представляются в формате, указанном в Задании на проектирование.

Ответчик указал, что истцом не представлено доказательств надлежащей сдачи выполненных работ.

В соответствии со ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях применяются цены, устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления.

В нарушение требований ст. 65 АПК РФ, истец не обосновал размер взыскиваемой суммы: природа ее происхождения, обоснованность выполненных работ, расчет цены иска. В материалах дела отсутствует обоснованный расчет, на основании которого истец выполнил спорные работы.

Судом рассмотрены все доводы истца, однако они не могут служить основанием для удовлетворения иска, обратного в материалы дела истцом не представлено.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

В соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений. Истец не доказал наличие обстоятельств, на которых основаны его исковые требования.

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и возлагается на истца.

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 12, 309, 310, 314, 474 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 1, 2, 4, 65, 71, 110, 123, 167 - 171, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении требований АО "Гипротрубопровод" – отказать. 

Взыскать с Акционерного общества "Институт по проектированию магистральных трубопровод" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 7.205 (семь тысяч двести пять) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия. 

Судья:  А.С.Чадов