АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

248600, г. Калуга, ул. Ленина, д. 90; тел: (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: (4842) 505-957, 599-457; 

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: arbitr@kaluga.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Дело № А23-3950/2020

13 октября 2020 года

г. Калуга

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Погонцева М.И., 

руководствуясь ст. ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

Исковые требования муниципального казенного учреждения «Центр по  повышению энергетической эффективности», г. Калуга, удовлетворить.  

1. Обязать общество с ограниченной ответственностью «СК Флагман»  устранить недостатки работ, выполнив гарантийный ремонт кровли  многоквартирного жилого дома № 23 по ул. Чичерина г. Калуги,  предусмотренный муниципальным контрактом от 10.05.2018 г.   № 0137300043318000260-0350126-01, а именно:  

1.1.Выполнить герметизацию трещин деревянных стропильных ног и  удалить с поверхности плесень (п.27-28 акта № 3 о приемке выполненных работ  от 04.10.2019 по форме КС-2);  

1.2.Выполнить крепление профлистов по всему периметру кровли в  местах нахлеста (п.29-32 акта № 3 о приемке выполненных работ от 04.10.2019  по форме КС-2);  

1.3.Вывести за грань желоба настил кровельного покрытия из профлиста  по всему периметру кровли (п.33-36 акта № 3 о приемке выполненных работ от  04.10.2019 по форме КС-2);  

1.4.Восстановить высоту гильз в дымоиентиляпионных каналах в один  уровень (п.37-39 акта № 3 о приемке выполненных работ от 04.10.2019 по форме  КС-2);  

1.5.Произвести герметизацию в местах соединения металлических листов  в местах примыкания к 8-ми дымовентиляционным каналам и 4-м кирпичным  смотровым окнам (п.40-41 акта № 3 о приемке выполненных работ от 04.10.2019  по форме КС-2).  

1.6.Восстановить уровень уклона желобов для слива воды в объеме 136  п.м. для устранения контруклона (п.44-54 акта № 3 о приемке выполненных  работ от 04.10.2019 по форме КС-2);  

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью «СК-Флагман»  устранить недостатки работ, выполнив гарантийный ремонт крыши  многоквартирного жилого дома № 11 по ул. Пухова г. Калуги, предусмотренный  муниципальным контрактом от 10.05.2018 г. № 0137300043318000260-0350126- 01, а именно:  

2.1. Произвести установку колена, обходящего газовую трубу на торце со  стороны 1-го подъезда 1 шт. (п.92-94 акта № 1 о приемке выполненных работ от  19.12.2018 по форме КС-2);  

2.2. Произвести стыковку водосточной трубы с отводным коленом у 2-го и  3-го подъездов (п.92-94 акта № 1 о приемке выполненных работ от 19.12.2018 по  форме КС-2).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК Флагман», в  пользу муниципального казенного учреждения «Центр по повышению  энергетической эффективности» расходы по уплате государственной пошлины в  размере 6000 руб.  

 Решение может быть обжаловано в течение месяца после принятия в  Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через  Арбитражный суд Калужской области.  

Судья М.И. Погонцев