Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Резолютивная часть

Дело №А20-603/2017

г. Нальчик

02 мая 2017 года

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики 

в составе судьи  А.В.Выборнова, 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства", г. Нальчик ОГРН  

<

***>, ИНН  

<

***>

к  обществу с ограниченной ответственностью "Стройградсервис",  г. Нальчик ОГРН  

<

***>, ИНН  

<

***>

о взыскании 153102 рублей 38 копеек

руководствуясь статьями 49, 110, 167-171, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

                                                       Р Е Ш И Л:

Принять уточненные  исковые требования истца от 03.04.2017 .

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройградсервис",  г. Нальчик (ОГРН  

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства", г. Нальчик (ОГРН  

<

***>, ИНН  

<

***>) неустойку в сумме 153102 рубля 38 копеек за период с 01.01.2017 по 13.03.2017  по государственному контракту  от 06.09.2016 № 27.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройградсервис",  г. Нальчик (ОГРН  

<

***>, ИНН  

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 5593 рубля 07 копеек.

Решение суда по настоящему делу подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

Лица, участвующие в деле, вправе подать ходатайство о составлении мотивированного решения в течение пяти дней со дня размещения резолютивной части решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.

        Судья                                                                               А.В. Выборнов