АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

600005, 

<

...> 

тел. 

<

***>, факс 

<

***> е-mail: vladimir.info@arbitr.ru, Интернет-сайт: http://vladimir.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 резолютивная часть

Дело № А11-2635/2024

г. Владимир

16 апреля 2025 года

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Тихонравовой О.Г. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кочетковой Е.С. рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационная контора № 4» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: ул. Ефимьево, д. 5, помещ. 25, 

<

...>)  

к некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: ул. Батурина, д. 30,  

<

...>) 

об устранении недостатков, допущенных при проведении капитального ремонта кровли многоквартирного дома и о взыскании 25 000 руб.,  

руководствуясь статьями 4, 17, 28, 49, 65, 71, 110, 123, 167 – 171, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Обязать некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области», г. Владимир, устранить недостатки выполненных работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, в течение 60 дней с момента вступления решения суда в законную силу:  

- осуществить ремонт стяжки кровли на 50 % площади кровли; - осуществить дополнительное утепление кровли на всей площади;  

- осуществить устройство мембранной кровли на всей площади;  

- осуществить замену всех крышек вентиляционных блоков на зонты из оцинкованной стали;  

- осуществить замену всех водосточных воронок; 

- выполнить устройство кровельного ограждения по периметру всей кровли; - выполнить замену всех фановых стояков выше уровня кровли;  

- выполнить замену всех люков и дверей выхода на кровлю. 

2. Взыскать с некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области», г. Владимир, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационная контора № 4», г. Владимир, неустойку в случае неисполнения решения суда в размере 300 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда, начиная с 61 дня вступления решения суда в законную силу и 500 руб. в день за каждый день просрочки исполнения решения суда, начиная с 81 дня вступления решения суда в законную силу, 25 000 руб. в счет возмещения расходов по оплате услуг ООО «ГарантПроект» по обследованию кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...> руб. в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать в порядке и сроки, предусмотренные статьей 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

3. В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Владимирской области в течение месяца с момента принятия решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.Г. Тихонравова