И М Е Н Е М   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И 

Р Е Ш Е Н И Е

11 июня 2024                                                                            Дело №А40-244128/23-89-1382

 

Резолютивная часть решения изготовлена 23 мая 2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 11 июня 2024 года

 

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи О.А. Акименко

при ведении протокола секретарем судебного заседания Голоскоковой Е.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИТЕХСТРОЙ-СВАРГО" (ИНН: 

<

***>) к ответчику ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК" (ИНН: 

<

***>) о взыскании 49 342 653, 52 руб.

при участии:

от истца: ФИО1 по дов. от 02.05.2024 г.;

от ответчика: ФИО2 по дов. от 02.02.2024 г.; 

 

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен о взыскании неустойки по договору:

- № 40-Л от 22.06.2021 в размере 38 154 298 руб. 90 коп.;

- № 70-Л от 05.09.2021 в размере 11 188 354 руб. 62 коп.

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу. 

Представитель истца требования поддержал, представитель ответчика против удовлетворения заявленных требований возражал.

Исследовав и оценив, имеющиеся в деле документы, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, 22 июня 2021 года между АО «ПОЛИТЕХСТРОЙ (Генподрядчик) и 

ООО «РТК» (Субподрядчик) заключен Договор № 40-Л (Договор), согласно которому Субподрядчик обязуется выполнить полный комплекс строительно-монтажных работ по объекту: «Устройство внутриплощадочных и магистральных сетей: (наружного освещения, сетей связи и слаботочных сетей, электрических сетей 10/0,4 кВ) для комплекса жилых домов и объектов инфраструктуры, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский район, вблизи с. Лайково», Завершение строительства» (Объект) в соответствии с Рабочей документацией, за Цену и в сроки, установленные настоящим Договором, соблюдая промежуточные сроки и общий срок производства Работ, установленные Графиками производства работ, а Генподрядчик — принять и оплатить Работы, выполненные Субподрядчиком в соответствии с требованиями Договора.

Настоящий Договор заключен в рамках исполнения обязательств по договору подряда от 20.05.2019 № 01-ЛК-ГП/СЕТ на проведение работ по завершению строительства Объекта. Пунктом № 2 дополнительного соглашения № 1 Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по устройству вертикальной планировки, укладке трубы и защитного слоя из кирпича (далее — Дополнительные работы) на Объекте, а Генподрядчик обязуется принять выполненные Субподрядчиком работы и оплатить их в порядке и на условиях, установленных настоящим Дополнительным соглашением.

Пунктом № 1 дополнительного соглашения № 2 Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по устройству блочной комплектной трансформаторной подстанции БКТП З (далее - Дополнительные работы) на Объекте.

Цена работ является ориентировочной, определяется Протоколом согласования договорной цены и составляет 102 390 595,01 рублей, предельная стоимость дополнительных работ, указанных в пункте № 2 Дополнительного соглашения № 1 определена на основании Сводного расчета и составляет 20 590 354,98 рублей, предельная стоимость дополнительных работ, указанных в пункте 1 Дополнительного  соглашения № 2 определена на основании Локального сметного расчета (Приложение № 1 к  Дополнительному соглашению) и составляет 870 879,06 рублей (всего 123 851 829,05 рублей).

В силу п. 4.3.2. Договора в пользу Субподрядчика произведено авансирование в сумме 75 485 585,88 рублей, что подтверждается комплектом платежных поручений. 

В соответствии со ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект, либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно пункту 3.1. Договора Субподрядчик обязуется выполнить Работы и осуществить строительство Объекта в сроки, установленные Договором, Графиком производства и финансирования работ и Детальным понедельным графиком производства работ.

Дата окончания работ – не позднее 25.08.2022 (п. 3.3. ДС № 1 от 28.03.2022);

Дата окончания работ по ДС № 1 – 25.08.2022;

Дата окончания работ по ДС № 2 – 14.07.2022. (п. 5 ДС № 2 от 31.03.2022).

Субподрядчик подтверждает, что на дату подписания Договора им от Генподрядчика получены все исходные и иные данные, в том числе рабочая и проектная документация в объеме, необходимом для выполнения Работ по Договору. Субподрядчик подтверждает, что полученные от Генподрядчика исходные данные, переданы ему полностью и содержат все необходимые и достаточные сведения для выполнения Субподрядчиком работ по Договору.

Субподрядчик обязан не позднее 21 (двадцать первого) числа отчётного месяца предоставить Генподрядчику или уполномоченному Генподрядчиком лицу официальное письмо с приложением документов в одном экземпляре, подтверждающих выполненные виды и объемы работ за отчетный период (п. 6.1.1. Договора):

- ведомость выполненных видов и объёмов работ (ВВВиОР), оформленная по позициям утверждённых локальных смет, подписанная уполномоченными представителями Субподрядчика и Генподрядчика. Форма ВВВиОР приведена в Приложении № 7.

- реестр ИД, с отражением в нём реквизитов актов освидетельствования и наименованием выполненных работ, указанием номеров локальных смет и позиций сметы.

- комплект ИД, указанный в Реестре ИД, с приложением исполнительных схем, подписанных представителями геодезического сопровождения и строительного контроля Субподрядчика и Генподрядчика, с наличием документов о качестве применённых материалов.

- в случае использования при выполнении Работ в отчетном периоде оборудования, изделий, конструкций и материалов, предоставленных Генподрядчиком в соответствии с 

п. 7.19 договора, Субподрядчик представляет Генподрядчику Отчет об использовании давальческого материала по форме, установленной в Приложении № 8 к настоящему договору «Отчет об использовании давальческого материала (ФОРМА)» в двух экземплярах.

По состоянию на 10.10.2023 Субподрядчиком выполнено работ на сумму 

31 107 979, 94 рублей, что подтверждается актами о приемке выполненных работ от 11.08.2022 № 1 и № 2 подписанными сторонами, что повлекло за собой срыв сроков сдачи результата работ в рамках договора подряда от 20.05.2019 № 01-ЛК-ГП/СЕТ.

  В соответствии с п. 8.5 Договора Субподрядчик обязан выполнить работы в промежуточные сроки и сдать законченный строительством объект в сроки, предусмотренные Графиком производства и финансирования работ (Приложения №№ 1.1, 1.2, 1.3) и пунктом 3.3 договора. 

  При нарушении условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором (п. 15.1 Договора).

  За нарушение срока завершения Работ в полном объеме, указанного в п. 3.1. Договора, либо промежуточных сроков, указанных в Графике производства и финансирования работ, Генподрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки до даты фактического завершения работ (п. 15.2 Договора).

  Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмотренной законодательством российской Федерации (п. 15.5. Договора).

  Таким образом, неустойка за нарушение срока выполнения работ по Договору 

№ 40-Л от 22.06.2021 составляет 38 154 298,90 рублей.

05 сентября 2022 года между АО «ПОЛИТЕХСТРОЙ (Генподрядчик) и 

ООО «РТК» (Субподрядчик) заключен Договор № 70-Л (Договор), согласно которому Субподрядчик обязуется выполнить комплекс электромонтажных работ и работ по монтажу слаботочных систем на объекте: «головные сооружения: Котельная, КНС1, КНС2, ЛОС 1, ЛОС2 (котельная, канализационная насосная станция № 1 канализационная насосная станция № 25 локальные очистные сооружения дождевых стоков № 1 локальные очистные сооружения дождевых стоков № 2) для комплекса жилых домов и объектов  инфраструктуры, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский район, вблизи с. Лайково в соответствии с Рабочей документацией, за Цену и в сроки, установленные настоящим Договором, соблюдая промежуточные сроки и общий срок производства Работ, установленные Графиками производства работ, а Генподрядчик — принять и оплатить Работы, выполненные  Субподрядчиком в соответствии с требованиями Договора.

Настоящий       Договор заключен в рамках исполнения обязательств по договору подряда от 20.05.2019 № 01-ЛК-ГП/ГС на проведение строительно-монтажных работ по строительству объекта.

Цена Договора является ориентировочной, определяется Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 8 к Договору) и составляет 31 966 727,48 (Тридцать один миллион девятьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот двадцать семь) рублей 48 копеек, в том числе НДС 20%.

В силу п. 4.3.2. Договора в пользу Субподрядчика произведено авансирование в сумме 20 516 272,08 рублей, что подтверждается комплектом платежных поручений. 

В соответствии со ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект, либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно пункту 3.1. Договора Субподрядчик обязуется выполнить Работы и осуществить строительство Объекта в сроки, установленные Договором, Графиком производства и финансирования работ (Приложение № 1 к Договору) и Детальным понедельным графиком производства работ.

Субподрядчик подтверждает, что на дату подписания Договора им от Генподрядчика получены все исходные и иные данные, в том числе рабочая и проектная документация в объеме, необходимом для выполнения Работ по Договору. Субподрядчик подтверждает, что полученные от Генподрядчика исходные данные, переданы ему полностью и содержат все необходимые и достаточные сведения для выполнения Субподрядчиком работ по Договору.

Дата окончания Работ — не позднее 25.10.2022 (п. 3.3. Договора).

В соответствии с п. 6.1.1. Договора Субподрядчик обязан не позднее 21 (двадцать первого) числа отчётного месяца предоставить Генподрядчику или уполномоченному Генподрядчиком лицу официальное письмо с приложением документов в одном экземпляре, подтверждающих выполненные виды и объемы работ за отчетный период (п. 6.1.1. Договора):

- реестр ИД, с отражением в нём реквизитов актов освидетельствования и наименованием выполненных работ, указанием номеров локальных смет и позиций сметы.

- ведомость выполненных видов и объёмов работ (ВВВиОР), оформленная по позициям утверждённых локальных смет, подписанная уполномоченными представителями Субподрядчика и Генподрядчика. Форма ВВВиОР — приведена в Приложении № 7.

- реестр ИД, с отражением в нём реквизитов актов освидетельствования и наименованием выполненных работ, указанием номеров локальных смет и позиций сметы.

- комплект ИД, указанный в Реестре ИД, с приложением исполнительных схем, подписанных представителями геодезического сопровождения и строительного контроля Субподрядчика и Генподрядчика, с наличием документов о качестве примененных материалов.

По состоянию на 10.10.2023 Субподрядчиком работы не выполнены, доказательств их выполнения, в соответствии с условиями Договора, в адрес Генподрядчика не представлено. Бездействие Субподрядчика повлекло за собой срыв сроков сдачи результата работ в рамках договора подряда от 20.05.2019 № 01-ЛК-ГП/ГС.

В соответствии с п. 8.5 Договора Субподрядчик обязан выполнить работы в промежуточные сроки и сдать законченный строительством объект в сроки, предусмотренные Графиком производства и финансирования работ (Приложения №№ 1.1, 1.2, 1.3) и пунктом 3.3 настоящего Договора. 

При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором (п. 15.1 Договора).

За нарушение срока завершения Работ в полном объеме, указанного в п. 3.1. Договора, либо промежуточных сроков, указанных в Графике производства и финансирования работ, Генподрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки до даты фактического завершения работ (п. 15.2 Договора).

Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмотренной законодательством российской Федерации (п. 15.5. Договора).

Таким образом, неустойка за нарушение срока выполнения работ по Договору 

№ 70-Л от 05.09.2021 составляет 11 188 354,62 рублей.

Указанные обстоятельства послужили основаниями для обращения в суд.

Удовлетворяя требования в части, суд руководствуется положениями ст. 8, 10, 12, 307-310, 330, 333, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса, а также отмечает следующее. 

Проверив обоснованность предъявления истцом ответчику требований о взыскании неустоек, суд приходит к выводу об их обоснованности. 

Вместе с тем, ответчиком  заявлено о несоразмерности предъявленного ко взысканию размера неустойки последствиям нарушенного обязательства, в связи с чем, просит применить положения ст. 333 ГК РФ и уменьшить размер взыскиваемой неустойки. 

Положениями ст. 333 ГК РФ суду предоставлено право снижения подлежащей уплате неустойки в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства. В соответствии с разъяснениями, данными в п. 73 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки. 

В пункте 77 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» также разъяснено, что снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ). 

В соответствии с разъяснениями, данными в п. 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ). 

Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий период. Установив основания для уменьшения размера неустойки, суд снижает сумму неустойки. 

В п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 N 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" содержатся разъяснения, в соответствии с которыми, разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения. Снижение неустойки ниже однократной учетной ставки Банка России на основании соответствующего заявления ответчика допускается лишь в экстраординарных случаях, когда убытки кредитора компенсируются за счет того, что размер платы за пользование денежными средствами, предусмотренный условиями обязательства (заем, кредит, коммерческий кредит), значительно превышает обычно взимаемые в подобных обстоятельствах проценты. 

Исследовав представленные доказательства, арбитражный суд пришел к выводу, что размер неустойки в соответствии со ст. 333 ГК РФ подлежит уменьшению до 1 713 014 руб. 52 коп., из которых по договору:

- № 40-Л от 22.06.2021 в размере 1 391 157 руб. 74 коп.;

- № 70-Л от 05.09.2021 в размере 321 856 руб. 78 коп.

 поскольку вменяемые ответчику основания начисления неустоек носят чрезмерный характер.  

В остальной части требований суд отказывает.

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленных требований, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, находит первоначально заявленные требования не подлежащими удовлетворению, встречные требования суд удовлетворяет в части. 

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 8, 10, 12, 307-310, 330, 333, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167, 170, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК" (ИНН: 

<

***>) в пользу АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИТЕХСТРОЙ-СВАРГО" (ИНН: 

<

***>)  по Договору №40-Л от 22.06.2021 г. неустойку в размере 1 391 157, 74 руб.; по Договору №70-Л от 05.05.2022 г. неустойку в размере 321 856,78 руб., госпошлину в размере 200 000 руб.

В остальной части отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья:

О.А. Акименко