АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443001, г. Самара, ул. Самарская, 203Б, тел. (846) 226-56-17, (846) 207-55-15

http://www.samara.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №

А55-27405/2024

01 октября 2024 года

г. Самара

Резолютивная часть решения объявлена 26 сентября 2024 года.

Решение в полном объеме изготовлено 01 октября 2024 года.

Арбитражный суд Самарской области

в составе судьи

ФИО1

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Батуриной Т.В.

рассмотрев в судебном заседании 26 сентября 2024 года дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Белстрой" 

к  государственному казенному учреждению Самарской области "Управление капитального строительства"

о взыскании 3 432 742 руб. 97 коп.

 

при участии в заседании

от истца – не явился, извещен,

от ответчика –  не явился, извещен, 

 

Установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Белстрой" (далее - истец) обратилось  в арбитражный суд Самарской области с иском к государственному казенному учреждению Самарской области "Управление Капитального Строительства" (далее - ответчик)  о взыскании 3 432 742 руб. 97 коп. пени за просрочку срока оплаты контракта с 29.01.2022 по 09.08.2022.

Стороны, извещенные надлежащим образом о времени и месте предварительного судебного заседания, в предварительное судебное заседание не явились.

Согласно п.6 ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.        

На основании ч.1,3 ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд рассмотрел дело в отсутствие  представителей истца и ответчика и по имеющимся в деле материалам.

Поскольку лица, участвующие в деле, не заявили возражений относительно рассмотрения дела в его отсутствие, суд в силу ч. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции.

При этом на возможность такого перехода указано в определении суда от 26.08.2024, определено и время судебного разбирательства.

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов, изложенных в исковом заявлении, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ГКУ «УКС» (далее - ответчик) и ООО «Белстрой» (далее - истец) заключен государственный контракт от 18.10.2021 № 54 (далее - контракт) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство инфекционного корпуса на 100 коек в ГБУЗ СО «Сызранская городская больница №2» (далее - объект).

Согласно 2.1 контракта в редакции дополнительного соглашения от 29.12.2021 № 3 цена контракта составляет 262 004 668 рублей 16 копеек, в том  числе НДС - 20% 43 667 444 рубля 69 копеек.

Согласно абз. 2 п. 2.7 контракта оплата выполненных по контракту работ   осуществляется заказчиком на расчетный счет подрядчика, указанный в контракте, поэтапно в сроки и в размерах, которые установлены графиком оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ, в течение 30 дней с даты подписания.

Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости  выполненных  работ и  затрат (форма КС-3). Оплата производится заказчиком на основании представленных подрядчиком счета и/или счета-фактуры. Объем выполненных по контракту работ определяется    в соответствии с пунктом 1.2 Контракта.

В силу п. 3 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Выполнение работ по контракту подтверждается следующими актами по форме КС-2 и КС-3:

1)         Акт о приемке выполненных работ от 25.10.2021 № АКТ-1 на сумму 49 844 046 руб. 32 коп.;

2)         Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 25.10.2021 № ФЗ-1 на сумму 49 844 046 руб. 32 коп.;

3)         Акт о приемке выполненных работ от 28.10.2021 № АКТ-2 на сумму 2 982 008 руб. 33 коп.;

4)         Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 28.10.2021 № ФЗ-2 на сумму 2 982 008 руб. 33 коп.;

5)         Акт о приемке выполненных работ от 18.11.2021 № АКТ-3 на сумму 35 578 597 руб. 19 коп.;

6)         Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 18.11.2021 № ФЗ-3 на сумму 35 578 597 руб. 19 коп.;

7)Акт о приемке выполненных работ от 02.12.2021 № АКТ-4 на сумму 36 321 814 руб. 69 коп.;

8)         Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 02.12.2021 № ФЗ-4на сумму 36321 814 руб. 69 коп.;

9)         Акт о приемке выполненных работ от 10.12.2021 № АКТ-5 на сумму 8 680 568 руб. 70 коп.;

10)       Акт о приемке выполненных работ от 10.12.2021 № АКТ-2с на сумму-28 856 руб. 54 коп.;

11)       Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 10.12.2021 № ФЗ-5 на сумму 8 651 712 руб. 16 коп.

12)       Акт о приемке выполненных работ от 29.12.2021 № АКТ-6 на сумму 259 910 223 руб. 78 коп.;

13)       Акт о приемке выполненных работ от 29.12.2021 № АКТ-6/1 на сумму 2 094 444 руб. 38 коп.;

14)       Акт о приемке выполненных работ от 29.12.2021 № АКТ-1н на сумму 49 844 046 руб. 32 коп.;

15)       Акт о приемке выполненных работ от 29.12.2021 № АКТ-2н на сумму- 2 982 008 руб. 33 коп.;

16)       Акт о приемке выполненных работ от 29.12.2021 № АКТ-Зн на сумму-35 578 597 руб. 19 коп.;

17)       Акт о приемке выполненных работ от 29.12.2021 № АКТ-4н на сумму- 36 321 814 руб. 69 коп.;

18)       Акт о приемке выполненных работ от 29.12.2021 № АКТ-5н на сумму  -     8 680 568 руб. 70 коп.;

19)Акт о приемке выполненных работ от 29.12.2021 № АКТ-1сн на сумму 49 844 046 руб. 32 коп.;

20) Акт о приемке выполненных работ от 29.12.2021 № АКТ-2сн на сумму  28 856 руб. 54 коп.;

21)Акт о приемке выполненных работ от 29.12.2021 № АКТ-1 кн на сумму49 844 046 руб. 32 коп.;        

22) Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 29.12.2021 №  ФЗ-6 на сумму 128 626 489 руб. 47 коп.

Заказчик производил оплату по Контракту в следующем порядке:

1)         25 527 117 руб. 57 коп. аванс, согласно платежному поручению от 18.10.2021 №1190;

2)         49 844 046 руб. 32 коп. оплата выполненных работ согласно платежному поручению от 26.10.2021 № 1243;

3)         38 290 676 руб. 36 коп. аванс, согласно платежному поручению от 28.10.2021 № 1267;

4)         2 982 008 руб. 33 коп. оплата выполненных платежному поручению от 01.11.2021 № 1278;

5)         24 905 018 руб. 03 коп. оплата выполненных платежному поручению от 23.11.2021 № 1380;    

6)         30 000 000 руб. 00 коп. оплата выполненных платежному поручению от 03.12.2021 № 1426;

7)         8 651 712 руб. 16 коп. оплата выполненных платежному поручению от 13.12.2021       № 1485;

8)         14 918 870 руб. 50 коп. оплата выполненных платежному поручению от 01.02.2022 №66;         .

9)         40 000 000 руб. 00 коп. оплата выполненных платежному поручению от 05.04.2022 № 405;

10)       13 442 609 руб. 45 коп. оплата выполненных платежному поручению от 20.04.2022 № 475;

11)       13 442 609 руб. 44 коп. оплата выполненных платежному поручению ' от 09.08.2022 № 999.

Итого по контракту выплачено 262 004 668 руб. 16 коп.

Работы на сумму 128 626 489 руб. 47 коп. приняты заказчиком 29.12.2021 (Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 29.12.2021 № ФЗ-6), с учетом выплаченного по контракту аванса, заказчик должен был не позднее 28.01.2022       (включительно) оплатить подрядчику 81 804 089 руб. 39 коп, однако в предусмотренный абз. 2 п. 2.7 контракта 30-дневный срок оплата произведена не была.         

В соответствии с п. 7.2 контракта в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных   случаях   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Согласно расчету истца размер пени, подлежащий уплате, составляет 3 432 742 руб. 97 коп. за период с 29.01.2022 по 09.08.2022.

25.01.2024 в адрес ответчика была направлена претензия, с требованием в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения настоящей претензии выплатить ООО «Белстрой» пеню в размере 3 432 742,97 руб. за просрочку-срока оплаты контракта с 29.01.2022 по 09.08.2022.

Ответчик указанную претензию оставил без ответа и без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском.

В соответствии с п.  1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим 4 образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии   с   обычаями   делового   оборота   или   иными   обычно 1 предъявленными требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом, в силу ст. 310 ГК РФ.

В соответствии с положениями ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств  может обеспечиваться неустойкой.

В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно ст. 12 ГК РФ взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.

В соответствии с п. 7.2 контракта в случае просрочки исполнения   заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных  случаях   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения   заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Таким образом, размер пени, подлежащий уплате, составляет 3 432 742 руб. 97 коп. за период с 29.01.2022 по 09.08.2022.

Ответчик отзыв не представил, расчет не оспорил.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований

Суд, проверив расчет истца, считает его соответствующим договору, закону и арифметически верным.

Таким образом, надлежит взыскать с ответчика в пользу истца 3 432 742 руб. 97 коп. неустойки.

Расходы по госпошлине в сумме 40 164 руб.  в соответствии с ст.110 АПК РФ относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца.

Руководствуясь ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с государственного казенного учреждения Самарской области "Управление капитального строительства" (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Белстрой" (ИНН 

<

***>) 3 432 742 руб. 97 коп. неустойки, а также 40 164 руб.  расходов по оплате государственной пошлины. 

Решение  может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

 

Судья

 

/

ФИО1