Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-13025/2020

28 июля 2020 года

г.Санкт-Петербург

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СВАЯ-СПБ" (195030, Санкт-Петербург город, проспект Ириновский, дом 34, корпус 3 литер а, помещение 5-Н часть 2, ОГРН: 

<

***>) 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ" (180004, 

<

...> ОГРН: 

<

***>)

о взыскании 

при участии

- от истца: ФИО2. по доверенности от 14.08.2017

- от ответчика: не явился (извещен)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СВАЯ-СПБ" (далее – Компания) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ" (далее – Общество) о взыскании 2 045 295 руб. задолженности, 23 520,89 руб. неустойки за период с 30.09.2019 по 23.01.2020 по договору подряда от 26.12.2016 № 26/12-2016 (далее – Договор).

Представитель истца поддержал исковые требования.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание своего представителя не направил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения дела в отсутствие представителя ответчика.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между Компанией (подрядчиком) и Обществом (заказчиком) заключен Договор, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить за счет собственных и привлеченных сил комплекс работ по погружению ж/б свай, указанных в приложении № 1 (протокол согласования цены), являющийся неотъемлемой частью договора, а также все технологически неразрывно связанные сопутствующие работы на объекте строительства: «Строительство Прегольской ТЭС в г. Калининград».

Согласно п. 2.1. Договора в редакции дополнительного соглашения от 01.03.2017 № 1 к Договору цена Договора составляет 54511520 руб.

В соответствии с п. 2.2. Договора оплата работ производится в следующем порядке:

По п. 2.2.1. 1 аванса заказчик перечисляется на р/с подрядчика сумму в размере 4260000 руб. в течение 3 банковских дней после подписания договора;

По п. 2.2.2. 2 аванс заказчик перечисляет на р/с подрядчика сумму после фактического погружения 650 свай в размере 3000000 руб.;

По п. 2.2.3. окончательный расчет будет произведен на основании фактически выполненных работ и на условиях протокола согласования договорной цены (приложение № 1кК Договору) в течение 5 банковских дней после подписания форм № КС-2, КС-3. При этом окончательная стоимость работ определяется на основании подписанных сторонами форм КС-2 и КС-3 исходя из объемов работ, фактически выполненных подрядчиком и принятых заказчиком, с применением единичных расценок, указанных в приложении № 1.

В силу п. 2.3. Договора оплата стоимости работ осуществляется заказчиком подрядчику ежемесячно, по мере сдачи подрядчиком и приемки заказчиком фактически выполненных работ, при условии надлежащего выполнения подрядчиком соответствующих обязательств по договору, в течение 30 рабочих дней с даты получения заказчиком всех следующих и надлежаще оформленных оригиналов документов:

- счета подрядчика;

-акта сдачи-приемки  выполненных работ согласно унифицированной форме КС-2 утвержденной постановлением Госкомстата РФ № 100 от 11.11.1999;

- справки о стоимости выполненных работ и затрат согласно унифицированной форме КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата РФ № 100 от 11.11.1999;

- счета-фактуры, оформленные в порядке и сроки, установленные законодательством;

- отчета о ходе выполненных работ;

- отчета об устранении дефектов;

- отчета о расходы материалов заказчика в строительстве по форме № М-29, с приложением копи документов о передаче давальческого материала (если выполнение работ осуществлялось с использованием материала заказчика).

Отсутствие вышеперечисленных документов является основанием для отказа заказчика в оплате работ.

В соответствии с п. 2.4. Договора заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах, подписывает и передает экземпляры форм КС-3 и КС-2 и 1 экземпляр отчета о давальческих материалах заказчика подрядчику. В случае выявления несоответствия в объемах, содержании и (или) ценах, отраженных в документах, заказчик уведомляет об этом подрядчика, который обязан внести соответствующие изменения в течение 3 дней с момента получения письменного уведомления. В случае не поступления уведомления о несоответствии в объемах, содержании и (или) цене работ в адрес подрядчика в течение 5 рабочих дней, документы считаются принятыми и подлежат оплате.

По п. 5.2. Договора срок выполнения работ: на устройство свай – 75 дней со дня начала работ (на погружение свай).

Согласно п. 5.3. Договора ориентировочные сроки начала работ – 15.01.2017 при условии оплаты аванса в полном объеме и предоставления фронта работ.

В соответствии с п. 6.1. Договора подрядчик предоставляет до 25 числа отчетного месяца объемы выполненных работ (форма № КС-2, КС-3) для проверки выполненных объемов представителями заказчика и подрядчика. 

В силу абз. 2 п. 8.2. Договора в случае нарушения сроков, установленных п. 2.2., 2.4., 2.5. Договора, заказчик уплачивает подрядчику неустойку в размере 0,01 % в день от суммы подлежащих уплате денежных средств, но не более 5% от стоимости работ по настоящему договору. 

Сторонами заключены следующие дополнительные соглашения к Договору:

- от 14.03.2017 № 2, стоимостью 3408840 руб., сроком выполнения работ – 35 рабочих дней; начало работ: в течение 2 дней с момента предоставления фронта работ;

- от 19.06.2017 № 3 стоимостью 6075100 руб., сроком выполнения работ 45 рабочих дней; начало работ: в течение 2 дней с момента предоставления фронта работ;

- от 07.08.2017 № 4 стоимостью 65500 руб., сроком выполнения работ 15 рабочих дней; начало работ: в течение 2 дней с момента предоставления фронта работ;

- от 29.09.2017 № 5 стоимостью 1591180 руб., сроком выполнения работ 25 рабочих дней; начало работ: в течение 2 дней с момента предоставления фронта работ;

- от 02.10.2017 № 6 стоимостью 3055300 руб., сроком выполнения работ 30 рабочих дней; начало работ: в течение 2 дней с момента предоставления фронта работ;

- от 30.01.2018 № 7, стоимостью 120000 руб., сроком выполнения работ 10 рабочих дней; начало работ: в течение 2 дней с момента предоставления фронта работ;

- от  16.02.2018 № 8, стоимостью 30283380 руб.; начало работ: в течение 2 дней с момента предоставления фронта работ; срок окончания работ: 01.07.2018; 

- от  20.02.2018 № 9, стоимостью 636000 руб., сроком выполнения работ 25 рабочих дней; начало работ: в течение 2 дней с момента предоставления фронта работ;

- от  27.04.2018 № 10, стоимостью 70000 руб., сроком выполнения работ 25 рабочих дней; начало работ: в течение 2 дней с момента предоставления фронта работ;

- от  07.05.2018 № 11, стоимостью 70000 руб., сроком выполнения работ 25 рабочих дней; начало работ: в течение 2 дней с момента предоставления фронта работ;

- от  29.06.2018 № 12, стоимостью 4727680 руб., сроком выполнения работ 25 рабочих дней; начало работ: в течение 2 дней с момента предоставления фронта работ;

- от  30.07.2018 № 13, стоимостью 159400 руб., сроком выполнения работ 25 рабочих дней, начало работ: в течение 2 дней с момента предоставления фронта работ.

Как указывает подрядчик, он выполнил работы по договору на сумму 3783375 руб., что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 31.08.2019 № 1, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 31.08.2019 № 1.

Поскольку заказчик не оплатил указанные работы, подрядчик направил претензию от 29.11.2019 с требованием оплаты долга.

Общество не исполнило указанное требование, в связи с чем Компания обратилась в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Пунктом 1 статьи 702 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (статья 711 ГК РФ). 

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований.

Выполнение работ по Договору на сумму 2 045 295 руб. подтверждается актом формы КС-2 и справкой формы КС-3, подписанными Компанией в одностороннем порядке.

Согласно сведениям с сайта Почты России названные документы получены ответчиком 20.09.2019 (номер почтового идентификатора 19503036013610).

Ответчик мотивированный отказ подписать указанные акт и справку не заявил, в суд отзыв на исковое заявление, доказательств оплаты не представил.

Согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

Требование о взыскании 2 045 295 руб. задолженности подлежит удовлетворению.

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В соответствии с ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Истцом заявлено требование о взыскании 23 520,89 руб. неустойки за период с 30.09.2019 по 23.01.2020.

Проверив расчет неустойки, суд признает его верным.

На основании изложенного, требование о взыскании неустойки подлежит удовлетворению в заявленном размере, на сумму 23 520,89 руб.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СВАЯ-СПБ" 2045295 руб. задолженности, 23520,89 руб. неустойки, 33344 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Косенко Т.А.