АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28  

Факс 460-945, 460-952, адрес сайта-http://sakhalin.arbitr.ru/ Электронная почта-info@sakhalin.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-7169/2024

г. Южно-Сахалинск

30 января 2025 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Веретенникова И.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Очировой Л.П., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

акционерного общества «Сахалинское ипотечное агентство» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес регистрации: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. имени Ф.Э. Дзержинского, д.21, офис 219, дата регистрации: 19.06.2015)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строитель ДВ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес регистрации: 693021, 

<

...>, дата регистрации: 28.06.2017)  

о понуждении к исполнению гарантийных обязательств по контракту № 550/18 на строительство многоквартирных жилых домов от 27.12.2018  

при участии: 

от истца: ФИО1 по доверенности № 08/2025 от 09.01.2025; в отсутствии ответчика  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Строитель ДВ» исполнить гарантийные обязательства по контракту № 550/18 от 27.12.2018, в соответствии с рекламационным актом от 24.09.2024 в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты вступления судебного акта в законную силу, а именно:  

- в квартире № 93 - устранить нарушение уклона отливов балкона; устранить причину затеканий по периметру балкона в месте примыкания балконных оконных блоков к балконной плите, устранить причину затеканий через балконные оконные блоки; устранить деформацию уплотнительной резинки балконной двери (балкон- юг); на балконе (сторона-восток) устранить разрушение штукатурно-окрасочного слоя на потолке до 1 м² площади.  

- в квартире № 89 - устранить отслоение штукатурно-окрасочного слоя над окном в жилой комнате (сторона - юг), устранить причину затеканий (желтого цвета) до 1 м² площади под окном.  

- в квартире № 87 - устранить деформацию участка стены на площади до 2 м² (отслоение штукатурного слоя); устранить повреждение отдельных участков обоев.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строитель ДВ» в пользу акционерного общества «Сахалинское ипотечное агентство» денежные средства на случай неисполнения судебного акта в размере 2 000 рублей в день за первые 30 календарных дней неисполнения судебного акта, начиная со следующего дня после истечения 30-дневного срока со дня вступления его в законную силу; 4 000 рублей в день в течение следующих 30 календарных дней неисполнения судебного акта; 5 000 рублей в день за все последующие дни неисполнения судебного акта.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строитель ДВ» в пользу акционерного общества «Сахалинское ипотечное агентство» 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей расходов по оплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья И.Н. Веретенников