7/2017-33561(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, 

 www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-3450/2017

г. Салехард

31 августа 2017 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  Максимовой О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарём  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  муниципального казенного учреждения муниципального образования Ямальский район  «Ямальская служба заказчика» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Партнер Групп» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) о расторжении муниципального контракта № 111189  от 27.09.2012 на выполнение работ по внутриквартальному благоустройству в селе Яр- Сале Ямальского района и о взыскании 122 980 352 рублей 91 копейки,  

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц Администрации муниципального  образования Ямальский район (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и  Администрацию муниципального образования село Яр-Сале (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>),  

при участии в судебном заседании: от истца ФИО2 по доверенности от 24.08.2017, от ответчика ФИО3 по доверенности от 25.07.2017, 

от Администрации Ямальского района ФИО4 по доверенности от 07.04.2017,  от Администрации Яр-Сале ФИО5 по доверенности № 26 от 25.08.2017,  

руководствуясь статьями 102, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования муниципального казенного учреждения муниципального  образования Ямальский район «Ямальская служба заказчика» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Партнер Групп»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу муниципального казенного  учреждения муниципального образования Ямальский район «Ямальская служба  заказчика» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку (пени) за нарушение  сроков выполнения работ за период с 01.11.2015 по 30.11.2017 в размере  1 382 005 рублей.  

В удовлетворении остальной части исковых требований истцу отказать. 

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Партнер Групп»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 2 474 рубля.  

3. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке путем подачи  жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало- Ненецкого автономного округа в течение месяца со дня принятия (изготовления) его в  полном объеме.  

В соответствии с пунктом 5 статьи 15 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме  электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной  подписью судьи.  

Судья О.В. Максимова