93/2020-107541(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А79-6323/2020

г. Чебоксары

27 октября 2020 года

Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в составе: судьи  Данилова А.Р.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

бюджетного учреждения Чувашской Республики «Центральная районная больница  Алатырского района» Министерства здравоохранения Чувашской Республики  

(г. Алатырь, Чувашская Республика, ул. Ленина, д. 130, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Великий лес» 

(г. Новочебоксарск, Чувашская Республика, ул. Промышленная, д. 93,  ОГРН 

<

***>),  

о понуждении устранить недостатки и взыскании 93432 руб. 03 коп., в отсутствие сторон, 

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Великий лес» в  пользу бюджетного учреждения Чувашской Республики «Центральная районная  больница Алатырского района» Министерства здравоохранения Чувашской  Республики 93432 (Девяносто три тысячи четыреста тридцать два) руб. 03 коп. в  возмещение убытков и 6000 (Шесть тысяч) руб. в возмещение расходов по уплате  государственной пошлины.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Великий лес» в  течение 10 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу  безвозмездно устранить недостатки путем выполнения следующих работ:  

 № 

п/п  

Помещение  

Выявленные дефекты 

Способ устранения 

1 

Кабинет № 1  

Множественные трещины на стенах  

Очистить от отслоившейся  краски и шпатлевки,  

затереть трещины 

цементно-известковым  

раствором, прогрунтовать,  шпатлевать и заново  

улучшенно окрасить.  Заделать трещины,  

выполнить шпатлевку,  грунтовку и покраску стен –  

44,2 кв.м. 

2 

Кабинет № 2  

Множественные трещины на стенах  

Заделать трещины,  выполнить шпатлевку,  

грунтовку и покраску стен –  44,6 кв.м.  

3 

Кабинет № 11  

Множественные трещины на стенах  

Заделать трещины,  выполнить шпатлевку,  

грунтовку и покраску стен –  44,1 кв.м.  

4 

Кабинет № 12  

Множественные трещины на стенах  

Заделать трещины,  выполнить шпатлевку,  

грунтовку и покраску стен –  26,5 кв.м.  

5 

Коридор 

Множественные трещины на стенах  

Заделать трещины,  выполнить шпатлевку,  

грунтовку и покраску стен –  71,9 кв.м.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Великий лес» в  доход федерального бюджета 3737 (Три тысячи семьсот тридцать семь) руб.  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний  Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого  арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления  арбитражного суда.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики –  Чувашии.  

Судья А.Р. Данилов  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 28.07.2020 10:32:27

 Кому выдана Данилов Александр Ростиславович