Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

 (резолютивная часть) 

г. Волгоград Дело № А12-13633/2020 « 07 » октября 2020 года 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Стрельниковой Н.В. при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Николенко И.В., рассмотрев в  судебном заседании материалы дела по исковому заявлению Унитарной некоммерческой  организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «СМУ  10» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании  

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО1, доверенность от 27.12.2019; от ответчика – ФИО2, доверенность от 19.07.2020 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «СМУ 10» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в рамках гарантийных обязательств по договору № 207-В-СМР-2016  от 15.09.2016г. по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 47  по пр. Ленина г. Волжского Волгоградской области за счет собственных средств в течение  одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда по настоящему делу  устранить недостатки, установленные в процессе производства судебной строительно- технической экспертизы и отраженные в решении Волжского городского суда по  гражданскому делу № 2-12/2020, а именно:  

- произвести демонтаж водосточной системы и устройство её вновь в соответствии с  проектными условиями;  

- произвести демонтаж ранее установленных снегозадержателсй и установить их  вновь, в соответствии с проектными условиями;  

- устранить просвет в кровельном покрытии и последствия замачивания конструкций  перекрытия чердачного помещения;  

- привести в надлежащее техническое состояние фасад жилого дома, устранив  повреждения штукатурного отделочного слоя с его окрасочным слоем в верхних частях  наружных стен в различных местах по периметру всего здания на площади около 7,5 м.кв.,  повреждения защитного слоя нижней поверхности балконной плиты и его окраске,  повреждения окрасочного конструктивного слоя подоконного карниза, повреждения  штукатурного слоя на первом этаже, за исключением повреждения штукатурного слоя в  подоконной части кв. 15;  

- произвести вновь ремонт цоколя жилого дома; 

- устранить повреждения асфальтового покрытия в виде просадок напротив каждого  

из подъезда во дворе дома со стороны проезжей части.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СМУ 10» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в течение месяца  со дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный  суд Волгоградской области.  

 Судья Стрельникова Н.В.