322/2024-7888(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, 

 www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-11897/2023

г. Салехард

13 февраля 2024 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Голощапова  М.В., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску муниципального учреждения  «Управление капитального строительства и капитального ремонта» (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) об устранении недостатков (дефектов) результата  работ по муниципальному контракту, обнаруженных в пределах гарантийного срока,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

исковые требования муниципального учреждения «Управление капитального  строительства и капитального ремонта» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  удовлетворить.  

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) безвозмездно устранить недостатки выполненных  работ по муниципальному контракту от 27.05.2022 № 0190300001222000305 по  благоустройству территории объекта: г. Надым, Многофункциональный спортивный парк в 18  мкр. в период гарантийных сроков, в части полной замены бетонных плит тротуарных на  переходных дорожках в количестве 1 070 м2 в период с 01.06.2024 по 10.07.2024 в полном  объёме производства работ, а именно:  

- доставка всех основных и сопутствующих материалов на объект;  - проведение подготовительных работ согласно условиям муниципального контракта;  

- демонтаж некачественных плит бетонных тротуарных; 

- устройство выравнивающих и подстилающих слоёв основания под устройство плит  бетонных тротуарных из цементно-песчаной смеси;  

- устройство бетонных плит тротуаров с заполнением швов песком. 

Результат работ по устранению недостатков (дефектов) в этот же период передать по  акту приёма-передачи муниципальному учреждению «Управление капитального строительства  и капитального ремонта» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>).  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 629002, Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Салехард) в пользу муниципального учреждения «Управление капитального  строительства и капитального ремонта» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, дата  регистрации: 03.03.2008, адрес: 629736, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

<

...> строение 16Б) расходы по уплате государственной пошлины в  размере 6 000,00 руб.  

 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия (изготовления в  полном объёме) путём подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный  суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Судья 

М.В. Голощапов