Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-289876/19-172-2113

г. Москва

27 декабря 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена  19 декабря 2019 года

Полный текст решения изготовлен 27 декабря 2019 года

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

председательствующего судьи Паньковой Н.М., (единолично)

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в  открытом судебном заседании дело 

по иску МИНОБОРОНЫ РОССИИ (119019, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ЗНАМЕНКА, ДОМ 19, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.02.2003, ИНН: 

<

***>)

к АО "СОКБ "ВЕКТОР" (105318, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА МИРОНОВСКАЯ, ДОМ 33, СТРОЕНИЕ 26, ЭТ/ПОМ 4/2, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 18.08.2004, ИНН: 

<

***>)

о взыскании  635 475,42 руб.

при участии:

от истца – ФИО2  диплом,  доверенность от 25.07.2019;

от ответчика – ФИО3 диплом, доверенность от 23.08.2017;

УСТАНОВИЛ:

МИНОБОРОНЫ РОССИИ обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к АО "СОКБ "ВЕКТОР" о взыскании  635 475,42 руб. – сумму неустойки по государственному контракту от 20 июля 2018 года № 1820187409292412224010808.

Как следует из материалов дела,  в обоснование исковых требований истец ссылается на то, что между Министерством обороны Российской Федерации (Заказчик) и АО «СОКБ «Вектор» (Поставщик) заключен государственный контракт от 20 июля 2018 года № 1820187409292412224010808 на изготовление и поставку автоматизированной системы мониторинга местоположения подвижных объектов с использованием систем ГЛОНАСС/GPS (индекс 14Ц884) с выполнением пусконаладочных работ (по спецификации) для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2018 - 2020 годах.

Цена Контракта составляет 254 190 168, 41 руб. (пункт 4.1. Контракта).

Согласно п. 2.1. Контракта Поставщик обязуется в установленный Контрактом срок изготовить и поставить Заказчику Товар в количестве, комплектности, соответствующий качеству и иным требованиям, установленным Контрактом, путем его передачи Грузополучателю на условиях, установленных Контрактом, включая монтажные работы, инструктаж (обучение) специалистов Заказчика (Грузополучателя) по пользованию и эксплуатации поставленного Товара (если они предусмотрены п. 3.2.2. Контракта).

Согласно п. 3.2.2. Контракта, Поставщик обязан осуществить доставку Товара, включая монтажные и пусконаладочные работы, инструктаж (обучение) специалистов Заказчика (Грузополучателя) по пользованию и эксплуатации поставленного Товара в срок до 10 ноября 2018 г., то есть по 09 ноября 2018 года включительно (в редакции дополнительного соглашения от 6 ноября 2018 г. № 1 к Контракту).

Согласно пункту 7.6. Контракта датой поставки Товара с вводом его в эксплуатацию является дата подписания Грузополучателем акта ввода Товара в эксплуатацию и проведения инструктажа (обучения) специалистов (приложение № 4 к Контракту).

Товар поставлен с просрочкой, что подтверждают: Акт ввода товара в эксплуатацию и проведения инструктажа (обучения) специалистов от 19 ноября 2018 г. № 1/2-2018, подписанного Грузополучателем на сумму 1 011 466,47 руб.; Акт ввода товара в эксплуатацию и проведения инструктажа (обучения) специалистов от 19 ноября 2018 г. № 3/4-2018, подписанного Грузополучателем на сумму 908 007,20 руб.

Просрочка исполнения обязательств по Контракту за период с 10 ноября 2018 года по 19 ноября 2018 г. составляет 10 дней.

В соответствии с пунктом 11.2. Контракта в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования 1 Центрального банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ) от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

Расчет неустойки за просрочку исполнения обязательств по Контракту складывается из следующих показателей: (цена Контракта - сумма, пропорциональная объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком) х 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ (ключевой ставки ЦБ РФ) х количество дней просрочки.

Ключевая ставка ЦБ РФ по состоянию на 19 ноября 2018 г. - 7,5%; таким образом, размер неустойки составляет:  635 475,42 руб.

Согласно разделу 12 Контракта, Министерством обороны Российской Федерации в адрес АО «СОКБ «Вектор» направлены претензии от 10 июня 2019 года исх. № 207/8/1388, № 207/8/1388.1 об уплате неустойки, которые оставлены без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском.

В судебном заседании представитель истца исковое требование поддержал в полном объеме, просил иск удовлетворить.

Представитель ответчика в судебном заседании дал устные пояснения, просил  в иске отказать; в отношении пени просил применить ст. 333 ГК РФ.

Рассмотрев материалы дела, проверив доводы истца и возражения ответчика, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований в силу следующего.

Согласно п. 1.1.3 Контракта 387 военное представительство Министерства обороны Российской Федерации (далее - ВП) в рамках Контракта осуществляет техническую приемку Товара, монтажных и пусконаладочных работ. Согласно условиям Контракта ВП - третья стороной в технологической и временной цепочке поставки Товара Грузополучателю.

В соответствии с п. 6.1 Контракта техническая приемка поставляемого Товара, контроль за качеством поставляемого Товара, а также выполнение Поставщиком иных условий Контракта, со стороны Заказчика возлагается на ВП. Техническая приемка ВП не является окончательной приемкой поставленного по Контракту.

В силу п. 6.3 Контракта ВП приступает к технической приемке Товара в течение 24 (двадцати четырех) часов с даты получения Поставщика подписанного установленным порядком извещения, удостоверяющего готовность Товара и его соответствие условиям контракта.

В соответствии с п. 6.9 Контракта не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания технической приемки и упаковки (пломбировки) Товара ВП выдает Поставщику удостоверение о соответствии Товара условиям Контракта в 5 (пяти) экземплярах.

Согласно п. 8.13 Контракта срок технической приемки выполненных монтажных и пусконаладочных работ составляет 24 часа с момента получения от Поставщика извещения, удостоверяющего окончание монтажных и пусконаладочных работ.

Согласно п.7.1 Контракта поставка товара первоначально осуществляется на объекты Грузополучателя. Разрешением Поставщику доставлять товар Грузополучателю является удостоверение ВП о соответствии Товара условиям Контракта.

Согласно п. 8.2 Контракта об окончании доставки свидетельствует акт приема передачи-Товара. После доставки Поставщик проводит монтажные и пусконаладочные работы, обучает специалистов Грузополучателя.

После окончания монтажа и пуско-наладочных работ Поставщик приступает к работам по вводу Товара в эксплуатацию.

Свидетельством завершения монтажных и пусконаладочных работ, обучения специалистов Грузополучателя и вводом в эксплуатацию является Извещение, направленное в ВП, которое информирует о готовности к проведению приемосдаточных испытаний.

Документальным оформлением результатов проведения приемосдаточных испытаний является «Удостоверение ВО о соответствии монтажных и пусконаладочных работ условиям Контракта».

Грузополучатель принимает результат монтажных и пусконаладочных работ только в случае, если изделия введены в эксплуатацию (п.3.5.1.6 Приложения №10 к Контракту), т.е. после окончания работы ВП. Документальным подтверждение приема Товара Грузополучателем является Акт ввода в эксплуатацию.

Согласно п. 11.13 Контракта сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Согласно п.3 ст. 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

В соответствии с п. 3.2.2. Контракта, Поставщик обязан осуществить доставку Товара, включая монтажные и пусконаладочные работы, инструктаж (обучение) специалистов Заказчика (Грузополучателя) по пользованию и эксплуатации поставленного Товара в срок до 10 ноября 2018 года, то есть по 09 ноября 2018 года включительно (в редакции дополнительного соглашения от 6 ноября 2018 г. № 1 к Контракту).

Между тем из представленных ответчиком доказательств следует, что поставка товара выполнена с нарушением сроков по вине истца. Ответчик не мог исполнить обязательство в срок до момента подписания истцом удостоверений, подтверждающих техническую приемку товара.

Просрочка Заказчика подтверждается данными, приведенными в  таблице:

№

Дата извещения

Номер

Дата

Номер

Кол-во

в порядке п.6.3

извещения

подписания

удостоверения

дней

Контракта

удостоверения

просрочки Истца

1.

08 октября 2018

№01-10/18

09 ноября 2018

№63

24 рабочих

года

года

(приложение 1)

дня

2.

08 октября 2018

№01-10/18

09 ноября 2018

№64

24 рабочих

года

года

(приложение 2)

дня

3.

31 октября 2018

№02-10/18

15 ноября

№68

11 рабочих

года

2019 года

(приложение 3)

дней

Таким образом, суд пришел к выводу, что не имеется оснований для утверждения, что поставка товара с нарушением сроков  произошла по вине ответчика, в связи с чем оснований для  взыскания с него договорной  неустойки нет.

При таких обстоятельствах исковое требование удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 167-171, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать полностью.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                           Н.М. Панькова