126/2020-4133(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

резолютивная часть

дело № А73-13161/2019

г. Хабаровск

15 января 2020 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Никитиной О.П.  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрел в судебном заседании дело по иску некоммерческой  организации «Региональный оператор - Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов в Хабаровском крае» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, место нахождения: 680030, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Истим» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 680009, 

<

...>)  

о понуждении устранить недостатки в рамках гарантийного срока по  договору № 2016/02/92 от 26.05.2016,  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно  предмета спора - общество с ограниченной ответственностью «Побережье  Амура» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 680030,  

<

...>, помещение I (32-39,  60, 61), офис 2,  

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

обязать общество с ограниченной ответственностью «ИСТИМ» в срок  до 01 июля 2020 года безвозмездно устранить недостатки работ,  выполненных по договору подряда № 2016/02/92 от 26.05.2016 по  капитальному ремонту кровли в многоквартирном доме расположенному по  адресу: 

<

...>, выполнить следующие ремонтно- строительные работы:  

- устроить выравнивающую цементно-песчаную стяжку для устранения  прогибов в 2-х местах (над 1-м подъездом и между 2-м и 3-м подъездом) с  заменой наплавляемых материалов - 12,0 м²);  

- выполнить ремонт рулонного покрытия отдельными местами для  устранения трещин, пузырей, отслоений, общей площадью - 22,6м²;  

выполнить огрунтовку основания под водоизоляционный ковер  битумной грунтовкой - 34,6м²;  

- выполнить в отдельных местах ремонт и восстановление герметизации  на примыканиях к стенам машинных отделений лифтов, к парапетам над  балконами, на стыках листов парапета - 73,3м.  

Отказать в остальной части иска. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ИСТИМ» в  пользу некоммерческой организации «Региональный оператор - Фонд  капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» расходы  по уплате государственной пошлину в размере 6 000 руб. и судебные  издержки на оплату экспертизы в размере 70 000 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья Никитина О.П. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 03.04.2019 4:14:04

Кому выдана Никитина Оксана Петровна