АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

г.Назрань                                                                         Дело А18-142/2022

27 сентября 2022 год дата оглашения резолютивной части

28 сентября 2022 года дата изготовления полного текста решения.

 

Арбитражный суд Республики Ингушетия в составе  судьи Гелисхановой Р.З., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании  исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «РТ-СоцСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  к Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Министерство финансов Республики Ингушетия, о взыскании задолженности  по договору подряда в размере  289 495, 84 рублей, неустойки в размере 18 527, 73 рублей, а так же расходы по уплате госпошлины в размере 9 160 рублей., без участия сторон;

Установил:

Истец обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением к ответчику о взыскании задолженности  по договору подряда в размере  289 495, 84 рублей, неустойки в размере 18 527, 73 рублей, а так же расходы по уплате госпошлины в размере 9 160 рублей

Стороны, надлежащим образом уведомленные о времени и месте рассмотрения дела, не обеспечили  явку своего представителя  в судебное заседание. Ответчик отзыв на иск не представил.

Из материалов дела установлено, между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия (далее - Ответчик, Заказчик) и ООО «РТ-СоцСтрой» (далее - Истец, Подрядчик) был заключен Государственный контракт № ТиЦА/10/19 от 20.11.2019 года (далее - Контракт) на выполнение работ по разработке обоснования инвестиций (далее - Работы), осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства: «Республиканская многопрофильная больница на 450 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену. Республика Ингушетия» (далее - Объект).

Согласно п. 2.1 Контракта цена Контракта составила 289 495, 84 руб., в том числе НДС 20% 48 249,31 руб.

В соответствии с п. 4,1 Контракта общий срок выполнения Работ - 72 календарных дня с даты передачи Заказчиком Подрядчику Исходных данных и условий для подготовки обоснования инвестиций (приложение № 5 к Контракту). Согласно Календарному плану выполнения Работ (приложение № 2 к Контракту) срок выполнения Работ по 1 этапу составил 27 календарных дней, по 2 этапу - 45 календарных дней.

В соответствии с п. 2.3 Контракта в редакции дополнительного соглашения № 1 к Контракту от 29.01.2020 г. (далее - Дополнительное соглашение), оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком в следующем порядке:

-       оплата Работ в размере 80 % на основании подписанного сторонами Акта приема-передачи выполненных работ по первому этапу осуществляется Заказчиком в 2020 году в течение 10 календарных дней со дня фактического доведения до Заказчика лимита бюджетных обязательств по Объекту, но не позднее 20.04.2020 года.

-       оплата оставшейся части денежных средств в размере 20 % на основании подписанного сторонами Акта приема-передачи выполненных работ по второму этапу осуществляется Заказчиком в течение 10 календарных дней со дня фактического доведения до Заказчика лимита бюджетных обязательств по Объекту, но не позднее 20.04.2020 года.

Работы по ] и 2 этапам были выполнены Подрядчиком в установленный п 4.1 Контракта срок, документация по 1 этапу передана Заказчику по накладной от 16.12.2019 , по 2 этапу - по накладной от 30.01.2020 г. Работы по 1 и 2 этапам были приняты Заказчиком в соответствии с актами приема-передачи выполненных работ № 1 и 2 от 29.01.2020 года. В соответствии с п. п. 2, 4 указанных актов, качество выполненных Работ соответствует требованиям Контракта, замечаний к выполненным работам Заказчик не имеет.

Стоимость выполненных Работ по 1 этапу составила 231 596,67 рублей, по 2 этапу - 57 899,17 рублей. Общая сумма задолженности Ответчика составила 289 495,84 рублей.

До настоящего момента обязательство по оплате выполненных Работ Ответчик не исполнил.

Согласно п. 6.2 Контракта, в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных Работ, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по оплате, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате выполненных работ в размере 0,01 % от Цены Контракта за каждый день просрочки.

На дату составления искового заявления (20.01.2022 г.) просрочка исполнения  Ответчиком  обязательств  по  оплате  выполненных  Работ по Контракту составляет 640 календарных дней (с 21.04.2020 г. по 20.01.2022 г.).

Общая сумма неустойки по Контракту составила: 289 495,84   руб.  (задолженность  Ответчика)  х  640   календарных  дней (просрочка по Контракту) х 0,01  % (процент от Цены Контракта) = 18 527,73 руб.

11.11.2021 г. в адрес Ответчика была направлена претензия (исх. № 2741) с требованием перечислить на расчетный счет ООО «РТ-СоцСтрой» оплату за выполненные Подрядчиком Работы и неустойку за просрочку исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных Работ по Контракту.

Претензия получена Ответчиком 20.11.2021 г., о чем свидетельствует отчёт об отслеживании отправления с сайта Почты России. Ответ на претензию в адрес Истца не поступал, требования, указанные в претензии, в добровольном порядке Ответчиком не удовлетворены.

Досудебный порядок урегулирования спора соблюден.

Согласно п. 3.3 Дополнительного соглашения, все споры между Сторонами, возникающие по Контракту, подлежат рассмотрению Арбитражным судом Республики Ингушетия.

Задолженность Ответчика по оплате выполненных Работ по Контракту составляет 289 495 (двести восемьдесят девять тысяч четыреста девяносто пять) рублей 84 копейки.

Неустойка за просрочку (за период с 21.04.2020 г. по 20.01.2022 г.) исполнения Ответчиком обязательств по оплате выполненных Работ составляет 18 527,73 руб.

Общая сумма исковых требований - 308 023,57 (триста восемь тысяч двадцать три) рубля пятьдесят семь копеек, 289 495,84 руб. (сумма задолженности Ответчика) + 18 527,73 руб. (размер неустойки) = 308 023,57 руб.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

При таких обстоятельствах заявленные требования подлежат удовлетворению полностью.

Руководствуясь статьями 110, 167-170,176   Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  в пользу Общества с ограниченной ответственностью «РТ-СоцСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) по договору подряда сумму основного долга в размере  289 495 рублей 84 копеек, неустойку за просрочку оплаты с 21.04.2020 по 20.01.2022 в размере 18 527 рублей 73 копеек, расходы по уплате госпошлины в размере 9 160 рублей,

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики  Ингушетия в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

 

Судья                                                                                                               Гелисханова Р.З.