Шестой арбитражный апелляционный суд 

улица Пушкина, дом 45, город Хабаровск, 680000, 

официальный сайт:  http://6aas.arbitr.ru

e-mail: info@6aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

№06АП-1677/2024

24 мая 2024 года

г. Хабаровск

Резолютивная часть постановления объявлена 16 мая 2024 года.Полный текст  постановления изготовлен 24 мая 2024 года.

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе:

председательствующего Брагиной Т.Г.

судей  Волковой М.О., Жолондзь Ж.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шутенко В.М.

при участии  в заседании:

от ООО «Управляющая компания БамСтройМеханизация» - ФИО1, представитель по довеернности №257 от 29.11.2023;

от ООО «Спецстрой-Восток» - ФИО2, представитель по доверенности от 01.01.2024;

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу  общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация»

на решение от 22.02.2024

по делу №А73-15457/2023

Арбитражного суда Хабаровского края

по иску общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой-Восток» 

к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания

БамСтройМеханизация» 

о взыскании 29 530 679 руб. 96 коп.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой-Восток» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, далее -  истец)  обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, далее - ответчик)  о взыскании  26 846 072 руб. 69 коп., суммы основного долга и            7 193 631 руб. 16 коп., суммы  процентов за пользование чужими денежными средствами за периоды с 09.03.2021 по 29.01.2024, процентов  за пользование чужими денежными средствами с 30.01.2024 по день исполнения решения суда.

Решением суда  от 22.02.2024 с ответчика в пользу истца взыскано               29 530 679 руб. 96 коп.:  из них  26 846 072 руб. 69 коп., сумма  основного долга, 2 684 607 руб. 27 коп., пени.

Законность, обоснованность принятого по делу судебного акта  проверяется судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ, по апелляционной жалобе ответчика, который, ссылаясь на наличие оснований, предусмотренных статьёй 270 АПК РФ, просит решение суда отменить, принять новый судебный акт об отказе истцу в иске. 

В обоснование апелляционной жалобы приводит доводы об отсутствии оснований для взыскания гарантийного удержания, поскольку срок для оплаты выполненных работ не наступил.

Истец в отзыве на апелляционную жалобу и его представитель в судебном заседании против удовлетворения апелляционной жалобы возражали по основаниям,  изложенным в оспариваемом  решении суда.

Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы и возражений на неё, заслушав пояснения представителей сторон, суд апелляционной инстанции оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не установил.

Как следует из материалов дела, правоотношения сторон вытекают из договора субподряда  №П-16/09-03 от 12.09.2016, заключенного между истцом (субподрядчик) и ответчиком (подрядчик), в соответствии с которым подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению подготовительных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по строительству объекта: «Строительство пункта технического обслуживания локомотивов (ПТОЛ) на станции Уссурийск».

В соответствии с пунктом 2.1. договора в редакции дополнительного соглашения от 27.03.2020 №7, общая стоимость работ составляет                              452 277 742 руб., кроме того НДС 18% - 62 676 411 руб. 84 коп., НДС 20% -                20 815 090 руб. 80 коп. Всего с учетом НДС-  535 769 244 руб. 64 коп., в том числе: стоимость работ, фактически выполненных в 2016 году -                                112 876 308 руб., кроме того НДС 18% - 20 317 735 руб. 44 коп. Всего с учетом НДС 18% - 133 194 043 руб. 44 коп.; стоимость работ, фактически выполненных в 2017 году - 193 140 609 руб., кроме того НДС 18% -                         34 765 309 руб. 62 коп. Всего с учетом НДС 18% - 227 905 918 руб. 62 коп.;  стоимость работ, фактически выполненных в 2018 году - 42 185 371 руб., кроме того НДС 18% - 7 593 366 руб. 78 коп. Всего с учетом НДС 18% - 49 778 737 руб. 78 коп.;  стоимость работ, фактически выполненных в 2019 году - 0 руб.; стоимость работ, подлежащих выполнению в 2020 году - 104 075 454 руб., кроме того НДС 20% - 20 815 090 руб. 80 коп. Всего с учетом НДС 20% - 124 890 544 руб. 80 коп. 

В соответствии с пунктом 9.1. договора в редакции дополнительного соглашения от 27.03.2020 №7 сдача выполненных субподрядчиком работ осуществляется ежемесячно, до 22 числа отчетного месяца субподрядчик представляет подрядчику акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы), оформленные в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 15.12.2008  №2688р «Об утверждении альбома форм первичной документации». Акт о приемке выполненных работ составляется на основании журнала учета выполненных работ (форма КС-6а). Выполненные объемы работ должны быть в соответствующем порядке согласованы с эксплуатирующим структурным подразделением ОАО «РЖД» (балансодержателем). 

На стоимость выполненного за месяц и принятого подрядчиком объема работ субподрядчик предъявляет подрядчику счет-фактуру, не позднее 5 календарных дней считая со дня выполнения работ с предоставлением ответчику копии документов, подтверждающих право подписания счетов-фактур уполномоченными должностными лицами субподрядчика.

В соответствии с пунктом 10.1. договора в редакции дополнительного соглашения от 27.03.2020 №7 расчеты за выполненные и принятые подрядчиком работы осуществляются ежемесячно с оформлением в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ             «О бухгалтерском учете» и альбомом форм первичной учетной документации, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 15.12.2008 №2688р, в действующей на момент проведения расчетов редакции в установленном ниже порядке.

Пунктом 10.2. договора в редакции дополнительного соглашения от 27.03.2020 №7 установлено, что подрядчик ежемесячно осуществляет оплату выполненных по настоящему договору работ после подписания акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) и предоставления счета-фактуры в пределах договорной цены в следующем порядке:  по работам, сданным субподрядчиком по актам и принятым подрядчиком до 20-го числа (включительно) отчетного месяца, оплата осуществляется в течение 65 календарных дней после принятия работ подрядчиком; по работам, сданным субподрядчиком по актам и принятым подрядчиком после 20-го числа отчетного месяца, оплата осуществляется в течение 75 календарных дней после принятия работ подрядчиком. 

Оплата выполненных и принятых работ (в том числе поставленного оборудования) производится до 95% от стоимости выполненных работ с учетом ранее выплаченного аванса. 

Оплата оставшихся 5% (гарантийные удержания) от стоимости выполненных работ производится подрядчиком в соответствии с пунктом 10.4. настоящего договора. 

Гарантийное удержание, установленное настоящим пунктом договора, является обеспечительной мерой, гарантирующей надлежащее качество выполняемых работ и покрытие возможных расходов подрядчика, вызванных ненадлежащим выполнением субподрядчиком обязательств, в том числе гарантийных, по настоящему договору. 

В соответствии с пунктом 10.2. договора удержанные 5% от стоимости выполненных работ оплачиваются подрядчиком в течение 65 календарных дней со дня утверждения приемочной комиссией акта КС-14. Срок уплаты удержанных 5% от стоимости работ увеличивается на период времени, затраченный субподрядчиком на устранение дефектов, выявленных при приемке объекта, а также на возмещение ущерба, причиненного субподрядчиком подрядчику или третьим лицам. 

Пунктом 10.4. договора в редакции дополнительного соглашения от 27.03.2020 №7 согласовано условие о том, что окончательный расчет за выполненные и сданные работы (в том числе поставленного оборудования) по настоящему договору производится подрядчиком после полного завершения работ по настоящему договору, подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ, включая устранение дефектов и замечаний, выявленных при приёмке объекта, возмещения нанесённого ущерба подрядчику и (или) третьим лицам, с зачётом ранее перечисленных средств не позднее 75 календарных дней после подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме №КС-14 между заказчиком и подрядчиком), с приложением к нему реестра счетов-фактур, актов о приемке смонтированного оборудования формы №ФСУ-3, технической и исполнительной документации, иных предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором документов. 

При наличии дефектов, недостатков работ и иных замечаний к выполненным субподрядчиком работам, срок окончательного расчета по настоящему договору, установленный в настоящем пункте договора, соразмерно продлевается на срок фактического полного устранения субподрядчиком указанных недостатков, дефектов, замечаний и исчисляется с момента подписания сторонами акта об устранении недостатков работ либо составления сторонами иного документа, подтверждающего выполнение субподрядчиком указанных обстоятельств. 

Дополнительным соглашением  №11 от 26.10.2020 согласован   срок окончания  работ - июль 2020 года (пункт 6.1).

31.12.2020 подписан акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией формы КС-14 №ЦУКСк-20/62 (I этап «Реконструкция (ПТОЛ) на станции Уссурийск Дальневосточная дирекция по ремонту тягового подвижного состава»).    

30.12.2021 подписан акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией формы КС-14 №ЦУКСк-21/88.

При рассмотрении спора по существу судом установлено, что спор по объёму и качеству выполненных работ между сторонами отсутствует, спорным является удержание подрядчиком 26 846 072 руб. 69 коп. после приемки выполненных работ по актам КС-2, КС-3  и подписания актов приемки КС-14 и истечения срока, предусмотренного пунктом 10.4. договора в редакции дополнительного соглашения от 27.03.2020 №7.

Оценив представленные сторонами доказательства, суд пришёл к выводу о том, что подписание  акта приемки законченного строительством объекта  формы КС-14 №ЦУКСк-20/62 от 31.12.2020 подтверждает завершение работ по договору  от 12.09.2016  №П-16/09-03, соответственно, гарантийный период,  предусмотренный  пунктом 10.4.  (75 дней после подписания акта КС-14) истек, основания для оплаты 5% гарантийного удержания наступили.

Учитывая, что из денежных средств, являющихся гарантийным удержанием в размере 5% от стоимости работ, выплаты не производились, после ввода объекта в эксплуатацию ответчик не предъявлял каких-либо претензий  в отношении выполненных работ, суд признал требования истца о взыскании с ответчика суммы долга по оплате выполненных работ обоснованными и подлежащими удовлетворению на основании  положений статей  309, 711, 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее-ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи  746  ГК РФ, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Соглашаясь с выводом суда первой инстанции, о том, что установленные  пунктами 10.2., 10.4. договора условия для возврата удержанных 5% от стоимости работ  и  окончательного расчёта за выполненные и сданные работы наступили, суд апелляционной инстанции полагает необходимым отметить, что   из апелляционной жалобы ответчика не усматривается, какие именно фактические обстоятельства  неправильно установлены либо не установлены судом первой инстанции.

Ссылка заявителя на пункт 11.1. договора, устанавливающий гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и результатов работ, неправомерна, поскольку порядок оплаты выполненных работ, согласованный сторонами в разделе 10 договора, не зависит от сроков и объёма  предоставления гарантий качества, согласованных  разделом 11 договора.

Срок гарантии качества работ, установленный пунктом 11.1 договора  равным  60 месяцам  со дня подписания акта приемки объекта капитального строительства, порождает обязательство субподрядчика устранить обнаруженные в период гарантийного срока недостатки или дефекты за свой счет.

Несогласие с выводами суда, иная оценка им фактических обстоятельств дела и иное толкование закона не означают допущенной при рассмотрении дела ошибки и не подтверждают существенных нарушений судом норм первой инстанции норм материального и процессуального права, в связи с чем доводы заявителя жалобы признаются необоснованными.

Принятое арбитражным судом первой инстанции решение является законным и обоснованным, судом полно и всесторонне исследованы имеющиеся в материалах дела доказательства, им дана правильная оценка, нарушений норм материального и процессуального права не допущено.

Оснований для отмены решения суда первой инстанции, установленных статьей 270 АПК РФ, судом апелляционной инстанции не установлено.

По правилам статьи 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение от  22.02.2024 по делу №А73-15457/2023 Арбитражного суда Хабаровского края оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев со дня его принятия через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Т.Г. Брагина

Судьи

 М.О. Волкова

Ж.В. Жолондзь