06/2023-220381(1) 

  АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А43-17389/2023 

г.Нижний Новгород 27 ноября 2023 года 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:  

судьи Кузовихиной Светланы Дмитриевны (шифр 6-527), при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации  городского округа город Бор Нижегородской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Триотраст" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  об обязании выполнить гарантийные обязательства по договору,  

третьи лица: некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов,  расположенных на территории Нижегородской области" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  товарищество собственников жилья "Силикатчик" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

обязать общество с ограниченной ответственностью "Триотраст" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу исполнить  гарантийные обязательства по договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего  имущества в многоквартирном доме № 945347 от 14.05.2018, а именно, безвозмездно устранить  недостатки и дефекты, выявленные в течение гарантийного срока в многоквартирном доме по адресу:  Нижегородская область, городской округ г.Бор, д.Овечкино (Редькинский с/с), д.9:   

1) произвести демонтаж/монтаж аэраторов из слоя керамзитовой засыпки; установить  аэраторы на перекрытия для обеспечения удаления влаги из слоев, в которых имеется влага;  обеспечить аэрирование перекрытия и увлаженного минераловатного утеплителя;  

2) при переустановке аэраторов на перекрытие произвести замер влажности нижнего слоя  минераловатного утеплителя в нескольких местах; по истечении месяца после переустановки  аэраторов провести контрольное вскрытие кровли дома для проверки контролируемых параметров  влажности утеплителя; осуществлять периодический контроль параметров влажности утеплителя до  получения нормируемой влажности;  

3) выполнить устройство фартуков из оцинкованной стали на вентшахтах;  4) выполнить отделку потолков в местах протечек в подъездах дома;  

5) заменить светодиодный светильник с датчиками движения на первом этаже второго  подъезда дома.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Триотраст" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000,00 руб. государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента его принятия.  

Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции может быть  обжаловано в порядке кассационного производства, если такое решение было предметом  рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной  жалобы.  

Судья С.Д. Кузовихина