АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

16 июня 2021 года

Дело № А33-35660/2020

Красноярск

Резолютивная часть решения вынесена в судебном заседании 08 июня 2021 года.

В полном объёме решение изготовлено 16 июня 2021 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Малофейкиной Е.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (ИНН 2466215012, ОГРН 1082468051995)

к обществу с ограниченной ответственностью «Красноярскдорремстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании неустойки,

в отсутствие лиц, участвующих в деле,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

установил:

муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Красноярскдорремстрой» (далее – ответчик) о взыскании 1 407 566,01 руб. неустойки по муниципальному контракту от 08.05.2019 № Ф.2019.237757.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 17 декабря 2020 года возбуждено производство по делу.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, для участия в судебное заседание не явились. Сведения о дате и месте судебного заседания размещены на сайте Арбитражного суда Красноярского края. На основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

08.05.2019 года между муниципальным казенным учреждением города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (далее - МКУ «УДИБ») и обществом с ограниченной ответственностью «Красноярскдорремстрой» (далее - ООО «КДРС», Подрядчик) был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту улиц, дорог и искусственных сооружений в Кировском, Свердловском районах города Красноярска № Ф.2019.237757 (далее - контракт).

В соответствии с пунктом  1.3 контракта заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту улиц, дорог и искусственных сооружений в Кировском, Свердловском районах города Красноярска (далее - работы) в соответствии с Ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение №1 к контракту), Техническим заданием (Приложение № 2 к контракту) с использованием материалов согласно Перечню используемых товаров (Приложение № 3 к контракту).  Качество выполняемых работ и применяемых материалов должны соответствовать требованиям нормативных документов, указанных в Перечне нормативно-технических документов (Приложение № 4 к контракту), обязательных при выполнении работ, в соответствии с Техническим заданием, с использованием материалов согласно Перечню используемых товаров. Во время проведения работ должны быть, обеспечены мероприятия по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения в местах производства работ, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с требованиями действующего законодательства. Место выполнения работ: - ул. Кутузова от ул. Кутузова, 109 до ул. Мичурина, включая конечную остановку ДК Кировский;  ул. Парашютная, от жилого дома № 2 по ул. Парашютная до жилого дома № 26 по ул. Александра Матросова.

В соответствии с пунктом  2.1 контракта, цена его установлена на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 25.04.2019 и Ведомости объемов и стоимости работ, которая является неотъемлемой частью контракта, с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной Подрядчиком и составляет 66 262 952 (шестьдесят шесть миллионов двести шестьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля 82 копейки, в т.ч. НДС - 11 043 825 (одиннадцать миллионов сорок три тысячи восемьсот двадцать пять) рублей 47 копеек.

В соответствии с разделом 3 контракта срок начала выполнения работ - с момента заключения контракта, срок завершения работ - 31.08.2019.

В соответствии с пунктом 4.1.1 контракта заказчик обязан осуществлять контроль над исполнением подрядчиком обязательств в соответствии с условиями контракта, а также соответствию нормативным документам, указанным в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ, в том числе за организацией и ведением работ, а также за объемом, сроками и качеством выполнения работ и используемых материалов.

При осуществлении контроля над выполнением работ, являющихся предметом контракта, заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем результатам работ, технической документации и т.д., в любое время суток, на любой стадии производства работ в течение всего периода действия настоящего контракта.

В соответствии с пунктом  4.1.3 контракта заказчик обязан подписывать акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат в течение пяти рабочих дней с момента предоставления, либо давать мотивированный отказ.

В соответствии с пунктом 4.1.5 заказчик обязан контролировать устранение подрядчиком в установленные сроки недостатков, выявленных при выполнении работ по настоящему контракту.

В соответствии с пунктом 4.1.6 контракта заказчик обязан взаимодействовать с подрядчиком при изменении, расторжении контракта, применять меры ответственности, в том числе направлять подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, в том числе гарантийного обязательства, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, совершать иные действия в случае нарушения подрядчиком условий контракта.

В соответствии с пунктом 4.2.1 контракта заказчик имеет право выдавать предписания об устранении выявленных замечаний, о приостановке или запрещении работ при нарушении технологии работ, применении некачественных материалов, невыполнении предписаний заказчика. Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по контракту.

В соответствии с пунктом 4.3.1 контракта подрядчик обязан выполнять работы в строгом соответствии с приложениями к контракту, календарным графиком производства работ, проектом производства работ (с технологическими регламентами) согласованными с заказчиком. Изменения либо отступления от данных требований подрядчиком, в одностороннем порядке, не допускается. Все отступления и изменения проектных решений согласовать с заказчиком и другими заинтересованными организациями. Подрядчик несет полную ответственность за качественное выполнение работ по контракту в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

В соответствии с пунктом 4.3.9 контракта подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на месте производства работ своего представителя, наделенного полномочиями представлять интересы подрядчика, в том числе участвовать совместно с заказчиком в составлении документов, предусмотренных контрактом, также получать для исполнения данные документы. В случае отсутствия указанного представителя подрядчика на месте производства работ заказчик вправе составить в одностороннем порядке предписание с проведением фотосъемки, которое обязательно для исполнения подрядчиком.

В соответствии с пунктом 4.3.12 контракта подрядчик обязан обеспечить выполнение работ с надлежащим качеством, за счет умений и навыков привлеченного квалифицированного инженерно-технического персонала, имеющего необходимые допуски и разрешения на производство работ, а также аттестации соответствующих специальностей согласно требованиям нормативно-технических документов, указанных  в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 4 к муниципальному контракту).

В соответствии с пунктом 4.3.16 контракта подрядчик обязан обеспечить снабжение объектов материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием, строительной техникой в соответствии с условиями контракта и технической документацией. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за сохранность всех поставленных для реализации муниципального контракта материалов и оборудования.

В соответствии с пунктом 4.3.22 контракта подрядчик обязан выполнить мероприятия по организации движения на Объекте и ограждения мест производства работ, обеспечивающие надежную гарантию безопасности дорожного движения в течение всего периода выполнения работ.  Нести всю ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, в случае не обеспечения подрядчиком безопасности дорожного движения в местах производства работ.

В соответствии с пунктом 4.3.25 контракта подрядчик обязан устранять выявленные недостатки за собственный счёт и в сроки, установленные заказчиком, в случае выявления фактов некачественного выполнения работ, в том числе скрытых работ.

В соответствии с пунктом 4.3.26 контракта при отказе или уклонении Подрядчика от составления или подписания акта выявленных дефектов (Приложение № 5 к контракту) Заказчик составляет односторонний акт выявленных дефектов.

В соответствии с пункта 6.3 контракта (в редакции дополнительного соглашения от 30.10.2019)  за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 662 629,53 рублей, определяемой в следующем порядке: и) 10 процентов пены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей:  б)5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). в) 1 процент цены контракта н случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

16.05.2019 работниками МКУ «УДИБ» был осуществлен выезд на место проведения работ по ул. Матросова, 26А. Подрядчик на объекте отсутствовал. В результате осмотра составлен акт выявленных дефектов, установлено, что ограждение места производства работ не соответствует согласованной заказчиком и подрядчиком схеме организации движения и ограждения места производства дорожных работ, а именно: отсутствуют дорожные знаки: 1.25, 8.2.1, 4.2.2.; отсутствует машина прикрытия в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 и ОДМ 218.6.019-2016.

17.05.2019 работниками МКУ «УДИБ» был осуществлен выезд на место проведения работ по ул. Парашютная от жилого дома №2 по ул. Парашютная до жилого дома №26 по ул. Матросова, место выявленного нарушения от ул. Матросова, 26 до ул. 60 лет Октября 110 г. Подрядчик на объекте отсутствовал. В результате осмотра составлен акт выявленных дефектов, установлено, что бортовой камень на участке закругления не соответствует требованиям технического задания контракта.

Заказчик в соответствии с пунктом 6.3 контракта привлек ответчика к ответственности в виде штрафа в размере 1 278 750 руб., в том числе:  место выявленного нарушения  ул. Матросова, 26А  - 639 375 руб., от ул.   Матросова,  26 до ул.  60 лет Октября, 110г – 639 375 руб. 

Подрядчику направлено требование (претензия) от 28.05.2019 №2631 об оплате штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В соответствии с пунктом 5.2. контракта, подрядчик ежемесячно не позднее последнего числа отчетного месяца, сдает заказчику промежуточные объемы выполненных работ с одновременным приложением следующих документов: 3 (три) экземпляра акта о приемке выполненных работ, 3 (три) экземпляра справки о стоимости выполненных работ и затрат и счета-фактуры (в случае применения упрощенной системы налогообложения предъявляется счет), оформленных в соответствии с действующим законодательством и 3 (три) экземпляра акта промежуточной приемки (по форме заказчика).

В соответствии с пунктом 5.18 контракта, подрядчик извещает заказчика о готовности объекта письменно. За две недели до даты приемки завершенных работ подрядчик передает Заказчику следующую исполнительную документацию, составленную в соответствии с СТО 01У-2017 (Приложение № 6 к муниципальному контракту): согласованный проект производства работ (с технологическими регламентами);  общий журнал работ; специальные журналы работ; приказ о назначении ответственных лиц; календарный график производства работ; схемы организации дорожного движения и ограждения мест производства работ, согласованные с МКУ «УДИБ»; журнал входного контроля материалов; паспорта, сертификаты качества и соответствия на применяемые материалы, рецепты приготовления асфальтобетонных смесей, и другие документы, подтверждающие качество материалов; исполнительную документацию; акты освидетельствования скрытых работ с присвоением каждому акту номера, соответствующего номеру общего журнала работ; исполнительные   планы, чертежи, схемы,  документы, ведомости контрольных измерений; материалы фотосъемки на бумажном и электронном носителях и материалы видеосъемки на электронном носителях, с обязательной привязкой к географическим координатам точки съемки и капитальным строениям; двусторонний договор с привлеченной независимой компетентной организацией на выполнение работ по входному контролю качества применяемых материалов и операционному контролю качества выполняемых работ (при отсутствии у Подрядчика собственной лаборатории компетентной на выполнение конкретного комплекса работ). Независимой компетентной организацией считается организация, не заинтересованная в результатах контроля, наличие в лаборатории которой условий, необходимых для выполнения вышеуказанных измерений, подтверждено Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии;  документы, одтверждающие экологическую безопасность на планируемые к применению материалы; результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ (в случае проведения/необходимости);  по требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие факт вывоза и размещения демонтированных строительных конструкций и отходов на санкционированных местах, и (или) документы, подтверждающие направление отходов на вторичную переработку; иные документы по требованию заказчика. Подрядчик письменно подтверждает заказчику соответствие данной документации фактически выполненным работам.

Согласно пункту 5.19 контракта, приемка завершенных работ производится в течение 2 (двух) недель со дня получения заказчиком письменного извещения подрядчика о его готовности.

Согласно пункту 5.20 контракта, приемка выполненных работ осуществляется заказчиком в два этапа:

Согласно пункту 5.20.1 контракта, в ходе первого этапа, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения о готовности Объекта, заказчик производит осмотр выполненных работ (их результата) на предмет его соответствия условиям контракта о качестве, количестве, на предмет соответствия требованиям технической документации, и иным условиям контракта, проверяет состав представленной подрядчиком исполнительной документации, проверку соответствия объема выполненных работ условиям контракта.

Согласно пункту 5.20.2 контракта, в ходе второго этапа приемки, в течение 5 (пяти) рабочих дней заказчик совместно с подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом окончательной приемки работ (по форме заказчика), подписанным обеими сторонами в день приемки.

В соответствии с пунктом 5.25 контракта дата подписания обеими сторонами составленного в соответствии с требованиями действующего законодательства окончательного акта о приемке выполненных работ соответствует дате завершения работ.

В соответствии с пунктом 6.6 контракта в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, начисляется пеня за каждый день, просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом, и фактически исполненных подрядчиком. 

Как следует из искового заявления в нарушение пункта 3.2 контракта 31.08.2019 работы подрядчиком выполнены не в полном объеме. 

По состоянию на 31.08.2019 подрядчиком были выполнены работы на сумму                                                                  51 773 222,94 руб., что подтверждается:  актом выполненных работ по форме КС-2 №1 от 27.06.2019г. на сумму 12 787 500,00 руб.; актом выполненных работ по форме КС-2 №2 от 31.07.2019г. на сумму 7 469 494,50 руб.; актом выполненных работ по форме КС-2 №3 от 31.07.2019г. на сумму 2 016 378,38 руб.; актом выполненных работ по форме КС-2 №4 от 30.08.2019г. на сумму 11 722 375,40 руб.; актом выполненных работ по форме КС-2 №5 от 30.08.2019г. на сумму 17 777 474,66 руб.

Работы на сумму 9 893 706,93 руб., сданы и подписаны 23.09.2019, что подтверждается справкой о стоимости по форме КС-3 №4 от 23.09.2019 на сумму 9 893 706,93 руб., актом выполненных работ по форме КС-2 №6 от 23.09.2019 на сумму 793 919,71 руб.; актом выполненных работ по форме КС-2 №7 от 23.09.2019 на сумму 9 099 787,22 руб.

Согласно расчету истца размер неустойки за период с 01.09.2019 по 23.09.2019 за просрочку исполнения обязательств по контракту составляет  61 098,36 руб. (14 489 729,88 руб. х 23 х 1/300 х 5,5%).

Работы на сумму 4 596 022,95 руб. сданы и подписаны 31.10.2019,  что подтверждается справкой о стоимости по форме КС-3 №5 от 31.10.2019 на сумму 4 596 022,95 руб., актом выполненных работ по форме КС-2 №4 от 31.10.2019г. на сумму 11 722 375,40 руб.; актом выполненных работ по форме КС-2 №5 от 31.10.2019г. на сумму 17 777 474,66 руб.

Согласно расчету истца размер неустойки за период с 01.09.2019 по 31.10.2019 за просрочку исполнения обязательств по контракту составляет  51 398,86 руб. (4 596 02,95 руб. х 61 х 1/300 х 5,5%).

Подрядчику направлено требование (претензия) от 14.05.2020 №2259 об оплате пени за просрочку исполнения обязательств по контракту в размере 128 816,01 руб. 

Поскольку претензионные требования подрядчиком не выполнены, истец обратился  с настоящим иском в суд.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы присутствующих в заседании лиц, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

На основании статьи 309 Гражданского  кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Заключенный между сторонами муниципальный контракт по своей правовой природе является договором подряда, отношения по которому регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). 

Как следует из материалов дела, истцом заявлено требование о взыскании штрафа за ненадлежащее качество выполненных работ.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского  кодекса Российской Федерации  исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 Гражданского  кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 6.3 контракта (в редакции дополнительного соглашения от 30.10.2019) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 662 629,53 руб., определяемой в следующем порядке: а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Согласно пункту  4.3.3 контракта  подрядчик обязан в течении 10 календарных дней  со дня заключения контракта  разработать и передать  схему  организации дородного движения  и ограждения мест  производства работ.

В соответствии с пунктом 4.3.9 контракта подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на месте производства работ своего представителя, наделенного полномочиями представлять интересы подрядчика, в том числе участвовать совместно с заказчиком в составлении документов, предусмотренных контрактом, также получать для исполнения данные документы. В случае отсутствия указанного представителя подрядчика на месте производства работ заказчик вправе составить в одностороннем порядке предписание с проведением фотосъемки, которое обязательно для исполнения подрядчиком.

Как следует из представленных в материалы дела доказательств, в процессе проведения проверочных мероприятий на объекте выявлен ряд нарушений условий заключенного контракта, перечень которых сводится к следующему: ограждение места производства работ не соответствует согласованной заказчиком и подрядчиком схеме организации движения и ограждения места производства дорожных работ, а именно: отсутствуют дорожные знаки: 1.25, 8.2.1, 4.2.2.; отсутствует машина прикрытия в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 и ОДМ 218.6.019-2016, бортовой камень на участке закругления не соответствует требованиям технического задания контракта.

Факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по контракту  подтвержден актами  от 16.05.2019 работниками МКУ «УДИБ», от 17.05.2019. 

Таким образом, материалами дела подтверждается факт нарушения ответчиком ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

Ответчик факт нарушения обязательств по контракту не опроверг, в связи с чем суд  считает правомерным требование  истца о взыскании с заказчика штрафа в размере                      1 278 750 руб.

Обращаясь в суд с исковым заявлением о взыскании неустойки, истец ссылается на нарушение ответчиком конечного срока выполнения работ.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

В соответствии с пунктом 4 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. 

В силу пункта 7 указанной статьи пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

В соответствии с пунктом 6.6 контракта в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, начисляется пеня за каждый день, просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом, и фактически исполненных подрядчиком. 

Как следует из искового заявления в нарушение пункта 3.2 контракта 31.08.2019 работы подрядчиком выполнены не в полном объеме. 

По состоянию на 31.08.2019 подрядчиком были выполнены работы на сумму                                                                  51 773 222,94 руб., что подтверждается:  актом выполненных работ по форме КС-2 №1 от 27.06.2019г. на сумму 12 787 500,00 руб.; актом выполненных работ по форме КС-2 №2 от 31.07.2019г. на сумму 7 469 494,50 руб.; актом выполненных работ по форме КС-2 №3 от 31.07.2019г. на сумму 2 016 378,38 руб.; актом выполненных работ по форме КС-2 №4 от 30.08.2019г. на сумму 11 722 375,40 руб.; актом выполненных работ по форме КС-2 №5 от 30.08.2019г. на сумму 17 777 474,66 руб.

Работы на сумму 9 893 706,93 руб., сданы и подписаны 23.09.2019, что подтверждается справкой о стоимости по форме КС-3 №4 от 23.09.2019 на сумму 9 893 706,93 руб., актом выполненных работ по форме КС-2 №6 от 23.09.2019 на сумму 793 919,71 руб.; актом выполненных работ по форме КС-2 №7 от 23.09.2019 на сумму 9 099 787,22 руб.

Работы на сумму 4 596 022,95 руб. сданы и подписаны 31.10.2019,  что подтверждается справкой о стоимости по форме КС-3 №5 от 31.10.2019 на сумму 4 596 022,95 руб., актом выполненных работ по форме КС-2 №4 от 31.10.2019г. на сумму 11 722 375,40 руб.; актом выполненных работ по форме КС-2 №5 от 31.10.2019г. на сумму 17 777 474,66 руб.

В связи с нарушением срока выполнения работ истец начислил ответчику 128 816,01 руб. пени, исходя из следующего расчета:

за период с 01.09.2019 по 23.09.2019 в размере  61 098,36 руб. (14 489 729,88 руб. х 23 х 1/300 х 5,5%),

 за период с 01.09.2019 по 31.10.2019 в размере 51 398,86 руб. (4 596 02,95 руб. х 61 х 1/300 х 5,5%).

При проверке правильности расчета неустойки судом установлено, что расчет не противоречит условиям контракта и фактическим обстоятельствам дела, в связи с чем требования о взыскании с неустойки за просрочку выполнения работ в размере 128 816,01 руб. обоснованы и подлежат удовлетворению.

В соответствии с частью 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы. 

В силу статьи 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Учитывая результат рассмотрения настоящего спора, а именно удовлетворение исковых требований в полном объеме, суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания  с ответчика в пользу истца расходов по оплате государственной пошлины в размере 27 076   руб.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 АПК РФ, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковое заявление удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Красноярскдорремстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в пользу муниципального казенного учреждения города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 1 278 750 руб. штрафа, 128 816,01 руб. пени, 27 076 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

Е.А. Малофейкина