АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-05

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: а03.info@arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

МОТИВИРОВАННОЕ  

РЕШЕНИЕ

по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства

 

г. Барнаул                                                                                    Дело № А03-20895/2023         

 

Резолютивная часть решения изготовлена 19 февраля 2024 года.

Мотивированное решение изготовлено 6 марта 2024 года.

 

Арбитражный суд  Алтайского края в составе судьи Хворова А.В., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Курьинская центральная районная больница», с. Курья  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании неустойки по договору об осуществлении технологического присоединения от 30.12.2020 № 2041/2020с за нарушение сроков исполнения мероприятий по технологическому присоединению в размере 78 881 руб. 26 коп.,

без участия сторон, извещенных надлежащим образом о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства,

 

УСТАНОВИЛ

 

Акционерное общество «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением к краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Курьинская центральная районная больница» (далее - учреждение) о взыскании неустойки по договору об осуществлении технологического присоединения от 30.12.2020 № 2041/2020с за нарушение сроков исполнения мероприятий по технологическому присоединению в размере 78 881 руб. 26 коп.

Исковые требования обоснованы ссылкой на статьи 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и мотивированы нарушением ответчиком сроков исполнения мероприятий по технологическому присоединению, что явилось основанием для начисления ему неустойки.

Определением суда от 25.12.2023 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 АПК РФ.

Лица, участвующие в деле, извещены о начавшемся процессе в соответствии со статьями 121-123 АПК РФ надлежащим образом, что подтверждается материалами дела. Кроме того, определение о принятии искового заявления к производству от 25.12.2023 размещено в сети интернет в картотеке арбитражный дел 26.12.2023.

Ответчик отзыв на исковое заявление, иных документов, свидетельствующих об отношении к исковым требованиям, не представил. 

Исследовав письменные материалы дела, оценив доказательства и доводы, приведенные истцом в обоснование своих требований, суд пришел к выводу о частичном удовлетворении исковых требований.

Резолютивная часть решения по делу, рассмотренному в порядке упрощенного судопроизводства, изготовлена 19.02.2024.

От общества поступило заявление о составлении мотивированного решения.

Согласно абзацу 3 части 2 статьи 229 АПК РФ мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы.

Суд установил следующие обстоятельства, имеющие значение для дела.

Между обществом и учреждением заключен договор об осуществлении технологического присоединения от 30.12.2020 № 2041/2020с (далее – договор).

В соответствии с пунктом 3 договора срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 6 месяцев.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 399 от 04.12.2019 и составляет 86 445 руб. 22 коп., в том числе НДС 20% в сумме 14 407 руб.54 коп. (пункт 8 договора).

Плата за технологическое присоединение вносится заявителем в следующем порядке: 

- 15% платы за технологическое присоединение в размере 12 966 руб. 78 коп., в том числе НДС 20 % в сумме 2 161 руб. 13 коп., вносятся в течение 15 дней со дня выставления счета в личном кабинете;

- 30% платы за технологическое присоединение в размере 25 933 руб. 57 коп., в том числе НДС 20 % в сумме 4 322 руб. 26 коп., вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

- 45% платы за технологическое присоединение в размере 38 900 руб. 35 коп., в том числе НДС 20 % в сумме 6 483 руб. 39 коп., вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

- 10% платы за технологическое присоединение в размере 8 644 руб. 52 коп., в том числе НДС 20 % в сумме 1 440 руб. 75 коп., вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта технологическом присоединении (пункт 9 договора).

В силу части 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»  (далее - Закон об электроэнергетике) технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Указанный порядок регламентирует процедуру такого присоединения, предусматривает существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также требования к выдаче индивидуальных технических условий для присоединения к электрическим сетям. Любые юридические и физические лица имеют право на технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям при наличии технической возможности для этого и соблюдении ими установленных правил такого присоединения. 

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям регулируются Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861).

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Данный договор является публичным.

По условиям указанного договора сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления технологического присоединения, а заявитель обязан выполнить свою часть мероприятий по технологическому присоединению и внести плату за технологическое присоединение (пункт 4 статьи 23.1, пункт 2 статьи 23.2, пункт 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, подпункт «е» пункта 16, пункты 16(2) 16(4), 17, 18 Правил № 861). 

Факт технологического присоединения подтверждается материалами дела и не оспаривается ответчиком.

В силу абзаца 2 пункта 1 статьи 424 ГК РФ в предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления.

Как предусмотрено абзацем восьмым части 4 статьи 23.1 Закона об электроэнергетике плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, подлежат государственному регулированию.

К отношениям по договору технологического присоединения помимо приведенных выше специальных норм Закона об электроэнергетике и Правил № 861, также применимы нормы главы ГК РФ и общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ).

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

По положениям статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

 

В соответствии с абзацем 3 подпункта «в» пункта 16 Правил № 861 сторона договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, обязан уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупность размера такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

В связи с нарушением учреждением принятых на себя обязательств по договору, общество начислило неустойку за период с 15.07.2021 по 14.07.2022 в размере 78 881 руб. 26 коп.  (86 445 руб. 22 коп. *365 дней*0,25)/100).

Требование о взыскании неустойки является обоснованным и подлежит удовлетворению, однако суд полагает возможным уменьшить ее размер на основании следующего.

Ответчик является краевым государственным бюджетным учреждением и не относится к числу субъектов предпринимательской деятельности. Исходя из того, что учреждение - некоммерческая организация и спор не связан с осуществлением им приносящей доход деятельности, суд применяет статью 333 ГК РФ по своей инициативе, без мотивированного заявления ответчика.

При определении подлежащей взысканию неустойки для целей применения статьи 333 ГК РФ суд исходит из расчета одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, ориентируясь на меру ответственности в правоотношениях по государственным (муниципальным) контрактам как предположительно соответствующую критерию соразмерности последствиям допущенного ответчиком нарушения обязательства по оплате оказанных истцом услуг.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы на уплату государственной пошлины относятся на ответчика. 

Руководствуясь статьями 65, 71, 110, 226 - 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

 

РЕШИЛ

 

Взыскать с краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Курьинская центральная районная больница» в пользу акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» 16 828 руб. неустойки, а также 2 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Во взыскании остальной части неустойки отказать.

Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению. 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме, либо в кассационной инстанции - Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                                          А.В. Хворов