79_9780605  

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-93535/19

02 июля 2020 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

председательствующий судья Н.А. Кондратенко ,при ведении протокола судебного  заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании  дело по заявлению АО "ЛЮБЕРЕЦКИЙ ВОДОКАНАЛ" к ООО "ГК "АТА"  

о расторжении договора, взыскании, обязании встречного иска ООО «ГК «АТА» к АО «ЛЮБЕРЕЦКИЙ ВОДОКАНАЛ» о взыскании При участии в судебном заседании- согласно протоколу 

Руководствуясь статьями ст. 110,167-170, 176, 211 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Признать договор подряда от 13.03.2019 г. № 2019.65001, заключенный между АО  "ЛЮБЕРЕЦКИЙ ВОДОКАНАЛ" и ООО "ГК "АТА" расторгнутым с 27.09.2019 г.  

 Обязать ООО «ГК «АТА» произвести восстановительные работы резинового  покрытия спортивной площадки по адресу: 

<

...> до первоначального состояния в течении 10 дней с момента вступления в силу  судебного акта.  

 В случае неисполнения ООО «ГК «АТА» судебного акта в части восстановления  резинового покрытия спортивной площадки до первоначального состояния в указанный  срок, предоставить право АО «ЛЮБЕРЕЦКИЙ ВОДОКАНАЛ» восстановить его  самостоятельно, с правом на последующее взыскание расходов на восстановление с ООО  «ГК «АТА».  

 Взыскать с ООО «ГК «АТА» в пользу АО «ЛЮБЕРЕЦКИЙ ВОДОКАНАЛ» 1 863 272  руб. 18 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору, 31 633 руб.  расходов по государственной пошлине.  

 Во встречном иске отказать. 

Судебный акт может быть обжалован в порядке и в сроки, установленные АПК РФ.  

Судья Н.А. Кондратенко