АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А74-7965/2024

13 февраля 2025 года

г. Абакан

 

Резолютивная часть решения объявлена 30 января 2025 года.

Решение в полном объеме изготовлено 13 февраля 2025 года.

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи М.А. Лукиной, при ведении протокола секретарём судебного заседания Т.В. Мигалкиной рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к администрации Жемчужненского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 50 367 руб. 84 коп.,

при участии в судебном заседании представителя истца (посредством веб-конференции) – ФИО1 по доверенности №19/172 от 30.05.2022.

Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к администрации Жемчужненского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия о взыскании 50 367 руб. 84 коп., в том числе 25 010 руб. 24 коп. задолженности по договору №20.1900.1583.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, 25 357 руб. 60 коп. неустойки за период с 13.07.2021 по 08.08.2024.

Ответчик в судебное заседание не направил своих представителей, будучи надлежащим образом извещённым о времени и месте судебного разбирательства.

Информация о движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет http://kad.arbitr.ru.

В порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд рассматривает дело в отсутствие представителей ответчика.

В судебном заседании представитель истца поддержал предъявленные требования по изложенным в исковом заявлении доводам. 

При рассмотрении дела арбитражным судом установлены следующие обстоятельства. 

Между истцом (сетевой организацией) и ответчиком (заявителем) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.1900.1583.21 от 20.05.2021, по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 5 кВт;

- категория надежности третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение 0,23 кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует. 

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 2 договора).

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения Линии уличного освещения улица Комлева от дома № 33 до дома № 47, расположенной по адресу: Республика Хакасия, 

<

...> (пункт 3 договора).

В соответствии с пунктом 11 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия от 24.12.2020 № 16-П и составляет 27 789 руб. 15 коп., в том числе НДС 20% в сумме 4 631 руб. 52 коп.

В соответствии с пунктом 13 договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: 

- 10 % платы за технологическое присоединение в размере 2 778 руб. 92 коп., в том числе НДС 20 % в сумме 463 руб. 15 коп. вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления счета сетевой организацией;

- 30 % платы за технологическое присоединение в размере 8 336 руб. 75 коп., в том числе НДС 20 % в сумме 1 389 руб. 46 коп. вносятся в течение 60  календарных дней со дня заключения договора;

- 20 % платы за технологическое присоединение в размере 5 557 руб. 83 коп., в том числе НДС 20 % в сумме 926 руб. 31 коп. вносятся в течение 180  календарных дней со дня заключения договора;

- 30 % платы за технологическое присоединение в размере 8 336 руб. 75 коп., в том числе НДС 20 % в сумме 1 389 руб. 46 коп. вносятся в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня фактического присоединения;

- 10 % платы за технологическое присоединение в размере 2 778 руб. 90 коп., в том числе НДС 20 % в сумме 463 руб. 14 коп. вносятся в течение 10 календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Платежным поручением от 20.05.2021 №646992 ответчик перечислил истцу 2 778 руб. 91 коп. в счет оплаты долга, приложив заявление о внесении частичной оплаты по договору .№20.1900.1583.21 от 18.05.2021.

Согласно пункту 20 договора, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Во исполнение условий договора истец осуществил технологическое присоединение энергопринимающих установок ответчика к своим электрическим сетям. 

27.06.2021 сетевой организацией подписаны: акт об осуществлении технологического присоединения и акт допуска прибора учета в эксплуатацию. 

За нарушение срока оплаты истцом начислена неустойка в соответствии с пунктом 20 договора в сумме 25 357 руб. 60 коп. за 365 дней, что свидетельствует о соблюдении ограничения, установленного пунктом 20 договора. 

Неисполнение ответчиком обязательств по оплате послужило для истца основанием для обращения к нему с претензией и в арбитражный суд с иском о взыскании задолженности и неустойки.

Исследовав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, и представленные доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд пришел к следующим выводам. 

Возникшие между сторонами обязательства подлежат регулированию нормами главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Согласно статье 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно статье 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Материалами дела установлено, что истец свои обязательства по спорному договору выполнил в полном объеме. 

В материалы дела представлены: акт о выполнении ТУ, акт об осуществлении технологического присоединения и акт допуска прибора учета в эксплуатацию. 

С учетом произведенных ответчиком оплат (в материалы дела истцом представлены соответствующие платежные поручения), истец числит за ответчиком задолженностьв размере 50 367 руб. 84 коп., в том числе 25 010 руб. 24 коп. задолженности, 25 357 руб. 60 коп. неустойки.

Доказательств оплаты задолженности в материалы дела не представлено.

Доказательства, подтверждающие факт ненадлежащего оказания услуг сетевой организации заявителю в материалах дела отсутствуют.

Ответчик заявил о пропуске срока исковой давности.

По мнению ответчика, течение срока исковой давности началось 08.07.2021, со дня, когда истец узнал о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску, что подтверждается данными и документами представленными истцом. Согласно условиям договора окончательный расчет по договору производится в течение 10 календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. Истец предоставил односторонне подписанный акт технологического присоединения от 28.06.2021, следовательно, истец, начиная с 08.07.2021, знал о нарушении его прав.

Согласно статье 196 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1 статьи 200 ГК РФ). 

На основании пункта 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. 

Согласно пункту 24 договора, договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета. 

Ответчик произвел оплату первого счета 20.05.2021 в размере 2778 руб. 91 коп., что подтверждается платежным поручением № 646992 от 20.05.2021, в котором указаны  реквизиты счета (№1600007023 от 18.05.2021).

Пунктом 13 Договора определен порядок внесения платы за технологическое присоединение ответчиком в следующем порядке:

 - 10 % платы в размере 2778 руб. 92 коп. вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления счета Сетевой организацией (данное требование ответчиком выполнено – оплата счета произведена 20.05.2021); 

- 30 % платы в размере 8336 руб. 75 коп. вносятся в течение 60  календарных дней со дня заключения договора (ответчик был обязан оплатить по 19.07.2021); 

- 20 % платы в размере 5557 руб. 83 коп. вносятся в течение 180 календарных дней со дня заключения договора (ответчик был обязан оплатить по 16.11.2021 включительно); 

- 30 % платы в размере 8336 руб. 75 коп. вносятся в течение 15 календарных дней со дня фактического присоединения; 

- 10 % платы в размере 2778 руб. 90 коп. вносятся в течение 10  календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Учитывая изложенное, довод ответчика об истечении срока исковой давности по договору является несостоятельным. Поскольку с учетом согласованных сторонами сроков оплаты и осуществления технологического присоединения, последним сроком оплаты следует считать 16.11.2021, срок исковой давности не мог истечь ранее 16.11.2024. Вместе с тем, иск был направлен в суд 08.08.2024. 

Таким образом, исковые требования Истцом заявлены в пределах срока исковой давности.

Ответчик полагает, что факт выполнения технологического присоединения не подтвержден, указал, что договор, акт об осуществлении технологического присоединения   № 1072 от 28.06.2021, акт о выполнении ТУ № 1072 от 28.06.2021, акт 10 №09-0 допуска прибора учета в эксплуатацию от 21.06.2021 не подписаны ответчиком.

Суд отклоняет данный довод ответчика, поскольку изложенное опровергается материалами дела.

Ответчик был надлежащим образом уведомлен об исполнении истцом мероприятий об осуществлении технологического присоединения посредством размещения в личном кабинете ответчика акта допуска прибора учета в эксплуатацию, акта о выполнении технических условий, содержащего перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями и акта об осуществлении технологического присоединения (пункт 7 Договора).

В обязанности сетевой компании по осуществлению технологического присоединения, в соответствии с пунктом 7 Договора входит не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце четвертом настоящего пункта, с соблюдением срока, указанного в технических условиях, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности. 

Данное мероприятие по технологическому присоединению невозможно осуществить в отсутствие заявителя (его персонала). 

Фактическое присоединение энергопринимающих устройств ответчика к электрическим сетям, фактический прием (подача) напряжения и мощности сторонами были осуществлены.

 Об этом свидетельствует также заключенный договор энергоснабжения № 34780 от 01.09.2024, подписанный истцом (как гарантирующим поставщиком) и ответчиком.

 В строке 11 Приложения 1 к Договору энергоснабжения № 34780 указана точка поставки: «Уличное освещение улица Комлева от дома № 33 до дома № 47, расположенная по адресу: Республика Хакасия, 

<

...>», технологическое присоединение которой было осуществлено на основании Договора (Технические условия к Договору). 

Таким образом, ответчик сам подтвердил фактическое подключение к сетям сетевой организации указанных объектов, кроме того ответчик производит оплату за потребляемую электрическую энергию указанными энергопринимающими устройствами.

Данное обстоятельство также свидетельствует о надлежащем уведомлении  ответчика истцом в рамках исполнения договора.

Таким образом, требования истца подлежат удовлетворению в заявленной сумме 25 010 руб. 24 коп.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки по договору в размере 25 357 руб. 60 коп. за период с 13.07.2021 по 08.08.2024 (за 365 дней).

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с пунктом 2 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения, при этом по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно пункту 20 раздела 5 договора сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Абзац 3 подпункта «в» пункта 16 Правил №861 (в редакции, действующей на дату подачи заявки) также предусматривал ответственность сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей (1100 рублей - для заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) настоящих Правил), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (а в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей (1100 рублей - для заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) настоящих Правил), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки), при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. 

Нарушение ответчиком срока исполнения договорных обязательств материалами дела подтверждено.

Проверив расчет неустойки, представленный истцом, арбитражный суд признал его верным, произведенным в соответствии с условиями договора (0,25% за каждый день, но не более 1 года) и нормами действующего законодательства.

По итогам рассмотрения дела, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию  50 367 руб. 84 коп., в том числе 25 010 руб. 24 коп. долга, 25 357 руб. 60 коп.

Государственная пошлина по настоящему делу составляет 2015 руб., уплачена истцом при обращении в суд платежным поручением № 14837 от 12.08.2024. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения спора расходы по уплате государственной пошлины подлежат возмещению истцу за счет ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Хакасия

РЕШИЛ:

Удовлетворить исковые требования. 

Взыскать с администрации Жемчужненского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия в пользу публичного акционерного общества «Россети Сибирь» 50 367 руб. 84 коп., в том числе 25 010 руб. 24 коп. долга, 25 357 руб. 60 коп. неустойки, а также 2015 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия. Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья                                                                                                                               М.А. Лукина