Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, г. Якутск, 677980 

тел: +7 (4112) 34-05-80, https://yakutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-7952/2024

30 октября 2024 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Гоголевой М.Н., рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению Федерального бюджетного учреждения «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) от 13.08.2024 № 08-3785 к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания 77» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 774 734 рублей, без вызова сторон.

УСТАНОВИЛ:

возможность и необходимость уменьшения размера неустойки, исчисление ее суммы от стоимости несвоевременно исполненного обществом обязательства в данном случае соответствует фактическим обстоятельствам, принципу юридического равенства, предусмотренному пунктом 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации и компенсационной природе неустойки, определенной статьей 330 названного Кодекса, правовому подходу, сформулированному в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.07.2012 № 2241/12, от 15.07.2014 №5467/14. 

Судом были применены положения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, произведен расчет неустойки по просрочке исполнения обязательств по каждому этапу работ, который составил:

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

с

по

дней

5 266 581,00

05.08.2022

Новая задолженность на 5 266 581,00 руб.

5 266 581,00

05.08.2022

26.12.2022

144

7.5

5 266 581,00 ? 144 ? 1/300 ? 7.5%

189 596,92 р.

Сумма основного долга: 5 266 581,00 руб.

Сумма неустойки: 189 596,92 руб.

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

с

по

дней

2 071 881,90

27.12.2022

Новая задолженность на 2 071 881,90 руб.

2 071 881,90

27.12.2022

14.11.2023

323

15

2 071 881,90 ? 323 ? 1/300 ? 15%

334 608,93 р.

Сумма основного долга: 2 071 881,90 руб.

Сумма неустойки: 334 608,93 руб.

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

с

по

дней

834 081,90

15.11.2023

Новая задолженность на 834 081,90 руб.

834 081,90

15.11.2023

14.12.2023

30

15

834 081,90 ? 30 ? 1/300 ? 15%

12 511,23 р.

Сумма основного долга: 834 081,90 руб.

Сумма неустойки: 12 511,23 руб.

При расчете неустойки суд руководствовался ставкой Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на день прекращения обязательства, а вывод истца об исчислении размера неустойки, исходя из ставки рефинансирования, действовавшей на дату принятия решения, является ошибочным. Разъяснения, содержащиеся в пункте 38 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017, не затрагивают ситуацию, когда спорное обязательство было исполнено, поэтому применению к настоящему делу не подлежат. 

Указанный правовой подход содержится в определении Верховного Суда Российской Федерации от 18.09.2019 № 308-ЭС19-8291 по делу № А15-1198/2018.

Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 77» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Федерального бюджетного учреждения «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку по контракту № 0316100015222000217 от 06.06.2022 в размере 536 717,08 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины 18 495 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия. 

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (ч.1 ст.177, ч.1 ст.229 АПК РФ).

Исполнительный лист на основании судебного решения по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, выдается по заявлению взыскателя. 

Решение суда может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

 

Судья

М.Н. Гоголева