АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

 

16 сентября 2024 года

 

Дело № А33-16059/2024

Красноярск

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 09 сентября  2024  года.

В полном объёме решение изготовлено  16 сентября  2024  года.

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Красовской С.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Промстройинвест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Валесин» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании неустойки,

в судебном заседании присутствуют:

от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 28.09.2023,

при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания Заикиной А.В., 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Промстройинвест» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Валесин» (далее – ответчик) о взыскании 4 478 111 руб. 15 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда                       №30-09/22 от 16.09.2022, 11 116 499 руб. 44 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда №19-09/22 от 19.09.2022.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 04.06.2024 возбуждено производство по делу.

Определением от 03.07.2024 судебное разбирательство по делу отложено на  10 час. 00 мин. 09.09.2024.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания уведомлен надлежащим образом. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие представителя ответчика.

Информация о дате и месте проведения судебного заседания размещена на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет по следующему адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru (портал Федерального Арбитражного Суда Российской Федерации: http: www.arbitr.ru/grad/).

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Валесин»                 (субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Промстройинвест»                (подрядчик) заключены договоры от 16.09.2022 № 30-09/22, от 19.09.2022 № 19-09/22.

Согласно пункту 1.1 договора № 30-09/22 подрядчик поручает, а субподрядчик на условиях договора принимает на себя обязательство выполнить общестроительные работы по поручаемому техническому заданию подрядчика на объекте капитального строительства: строительство комплекса зданий Культурно-просветительского центра в с. Казачинское (далее - объект) в объемах и сроки, предусмотренные договором. Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение работ по Договору в строгом соответствии с проектной и рабочей документацией, в сроки установленные пунктом 2.1. договора собственными силами и средствами с использованием давальческого материала подрядчика (лист нержавеющий AISI-304 1*0.667м 0,5мм с покрытием карбонитрида титана цвета меди). Договор заключен для целей исполнения государственного контракта № 201 -01.1-21/490357 от 31.05.2021 на выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением монтируемого оборудования по объекту строительства: строительство комплекса зданий Культурно-просветительского центра в с. Казачинское.

В соответствии с пунктом 3.1 договора № 30-09/22 стоимость работ по договору указывается в локальных сметных расчетах (приложение № 1 к договору).

В силу пункта 3.2 договора № 30-09/22 оплата выполненных и принятых работ по настоящему договору осуществляется на основании подписанных сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры субподрядчика, счета на оплату в течение 30 (тридцати) дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика.

Сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ от 31.08.2023 на сумму 2 583 942,00 руб., от 31.08.2023 на сумму 2 632 911,60 руб., от 31.08.2023 на сумму 2 798 653,20 руб., от 31.08.2023 на сумму 1 954 866,00 руб., справки о стоимости выполненных работ и затрат от 31.08.2023 на сумму 2 583 942,00 руб., от 31.08.2023 на суму 2 632 911,60 руб., от 31.08.2023 на сумму 2 798 653,20 руб., от 31.08.2023 на сумму 1 954 866,00 руб.

Выполненные работы оплачены частично, задолженность составила 6 560 026,36 руб.

Пунктом 1.1 договора № 19-09/22 установлено, что подрядчик поручает, а субподрядчик на условиях настоящего договора принимает на себя обязательство выполнить строительно - монтажные работы на объекте капитального строительства: строительство комплекса зданий Культурно-просветительского центра в с. Казачииское в объемах и сроки, предусмотренные договором. Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение работ по Договору в строгом соответствии с проектной и рабочей документацией, в сроки установленные пунктом 2.1. договора. Договор заключен для целей исполнения государственного контракта № 20 i -01Л-21/490357 от 31.05.2021 на выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением монтируемого оборудования по объекту строительства: строительство комплекса зданий Культурно-просветительского центра в с. Казачииское.

На основании пункта 3.1 договора № 19-09/22 стоимость работ по настоящему договору указывается в Локальных сметных расчетах (приложение № 1 к договору).

Оплата выполненных и принятых работ по настоящему договору осуществляется на основании подписанных сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-3), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры Субподрядчика, счета на оплату в течение 30 (тридцати) дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика (пункт 3.2 договора № 19-09/22).

Сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ от 31.08.2023 на сумму 7 649 748,00 руб., от 31.08.2023 на сумму 1 542 044,40 руб., от 31.08.2023 на сумму 948 664,80 руб., от 31.08.2023 на сумму 7 841 205,60 руб., от 31.08.2023 на сумму 9 864 963,60 руб., справки о стоимости выполненных работ и затрат от 31.08.2023 на сумму 10 140 457,21 руб., от 31.08.2023 на сумму 7 841 205,60 руб., от 31.08.2023 на сумму 9 864 963,60 руб.

Выполненные работы оплачены частично, задолженность составила 22 902 023,60 руб.

Решением арбитражного суда Красноярского края от 02.05.2024 по делу № А33-1664/2024 с общества с ограниченной ответственностью «Промстройинвест»                        (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Валесин» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) взыскано 29 462 049,96 руб. задолженности, 170 310,00 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 08.08.2024 по делу № А33-1664/2024 утверждено мировое соглашение, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Валесин» и обществом с ограниченной ответственностью «Промстройинвест» следующего содержания:

«1. По настоящему мировому соглашению стороны признают, что у ответчика имелась задолженность перед истцом по договорам субподряда № 19-09/22 от 19.09.2022, № 30-09/22 от 16.09.2022 на дату вынесения решения судом первой инстанции в общем размере 29 462 049,96 руб. (двадцать девять миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч сорок девять рублей девяносто шесть копеек).

2. 21.05.2024 истцом и ответчиком было подписано соглашение о зачете взаимных требований, по условиям которого обязательства ответчика в размере 29 462 049,96 руб. (двадцать девять миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч сорок девять рублей девяносто шесть копеек) прекращены полностью путем зачета однородного встречного обязательства истца перед ответчиком.

3. С учетом подписанного соглашения о зачёте встречных однородных обязательств от 21.05.2024 сумма задолженности на момент апелляционной жалобы в Третьем Арбитражном апелляционном суде была погашена в полном объеме.

4. В части судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 170 310 руб. истец отказывается в полном объеме.

5. Расходы по оплате услуг представителей сторон, а также иные расходы, прямо или косвенно связанные с рассмотрением дела № А33-1664/2024, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла».

В рамках настоящего дела истец обратился с требованием о взыскании с ответчика 4 478 111 руб. 15 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда №30-09/22 от 16.09.2022, 11 116 499 руб. 44 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда №19-09/22 от 19.09.2022.

Ответчик отзыв на иск, контррасчет неустойки в материалы дела не представил.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему (статьи 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации). Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Между обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Валесин» (субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Промстройинвест» (подрядчик) заключены договоры от 16.09.2022 № 30-09/22, от 19.09.2022 № 19-09/22. Правоотношения сторон регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

На основании пункта 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. В силу пункта 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса. Пунктом 2 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком.

Исходя из положений статей 711, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации  основанием для возникновения обязанности заказчика по оплате работ является сдача подрядчиком результата работ надлежащего качества и их приемка заказчиком. Оформленный акт является доказательством исполнения подрядчиком обязательства по договору.

Факт выполнения работ по спорным договорам подтверждается вступившими в законную силу судебными актами по делу № А33-1664/2024, в силу чего указанные обстоятельства не нуждаются в повторном доказывании при рассмотрении настоящего дела в силу статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту  1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с пунктом  1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Как указывает истец, дополнительные соглашения о продлении сроков выполнения работ по договорам субподряда между сторонами отсутствуют.

Как следует из материалов дела, 16 сентября 2022 года между ООО «ПромСтройИнвест» (подрядчик) и ООО «ТД «Валесин» (субподрядчик)  заключен договор субподряда № 30-09/22 на выполнение общестроительных работ по поручаемому техническому заданию подрядчика на объекте капитального строительства: строительство комплекса зданий Культурно-просветительского центра в с. Казачинское (далее - объект) в объемах и сроки, предусмотренные настоящим договором.

В соответствии с пунктом 2.1. договора субподряда, срок выполнения работ  с 16 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года.

06 сентября 2023 года подписан Акт приемки законченного строительством объекта: строительство комплекса зданий Культурно-просветительского центра в с. Казачинское по форме КС -11.

Согласно подписанных и сданных  подрядчику форм КС-2 и КС-3 общая сумма выполненных работ на 30 июня 2023 года составила 46 469 606 руб. 40 коп.

В соответствии с пунктом 5.3. договора субподряда - в случае просрочки исполнения субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором субподряда, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, в размере 0,3% в день от стоимости неисполненных (просроченных в исполнении) работ.

Истцом начислена неустойка на основании пункта 5.3. договора субподряда № 30-09/22 от 16.09.2022 исходя из следующего расчета:

Период начисления неустойки: 01.07.2023 - 31.08.2023 (62 дня)

Ставка по договору субподряда: 0,3% в день.

Долг на дату начала периода начисления неустойки (01.07.2023): 24 075 866 руб. 40 коп.

Сумма долга х процентная ставка х количество дней просрочки / 100.

Итого сумма неустойки по договору субподряда № 30-09/22 от 16.09.2022  составила - 4 478 111 руб.  15 коп.

19 сентября 2022 года между ООО «ПромСтройИнвест» (подрядчик) и ООО «ТД «Валесин» (субподрядчик) заключен договор субподряда № 19-09/22 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства: строительство комплекса зданий Культурно-просветительского центра в с. Казачинское (далее - объект) в объемах и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

В соответствии с пунктом 2.1. договора субподряда, срок выполнения работ  с 19 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года.

06 сентября 2023 года  подписан Акт приемки законченного строительством объекта: строительство комплекса зданий Культурно-просветительского центра в с. Казачинское по форме КС -11.

Согласно подписанных и сданных  подрядчику форм КС-2 и КС-3 общая сумма выполненных работ на 30 июня 2023 года составила 1 572 897 руб.  60 коп.

В соответствии с пунктом 5.3. договора субподряда - в случае просрочки исполнения субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных  договором  субподряда,   подрядчик     вправе  потребовать  уплаты неустоек (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, в размере 0,3% в день от стоимости неисполненных (просроченных в исполнении) работ.

Истцом начислена неустойка на основании пункта 5.3. договора субподряда № 19-09/22 от 19.09.2022 исходя из следующего расчета:

Период начисления неустойки: 01.07.2023 - 31.08.2023 (62 дня)

Ставка по договору: 0,3% в день.

Долг на дату начала периода начисления неустойки (01.07.2023): 59 766 126 руб.

Сумма долга х процентная ставка х количество дней просрочки /100.

Итого сумма неустойки составляет - 11 116 499 руб.  44 коп.

Расчет неустойки проверен судом, признан верным, арифметическая правильность расчета ответчиком не оспорена, ходатайства о снижении неустойки на  основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации в материалы дела не представлено.

Просрочка исполнения обязательств ответчика по договорам субподряда № 30-09/22 от 16.09.2022, № 19-09/22 от 19.09.2022 подтверждена материалами дела.

В силу пункта 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которых истец основывает требования, считаются признанными ответчиком, поскольку им прямо не оспорены, возражения относительно существа заявленных требований не заявлены.

Поскольку доказательств оплаты неустойки  ответчиком в материалы дела не представлено, суд признает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При обращении в суд с иском истец уплатил государственную пошлину в размере 100 973 руб.

В связи с удовлетворением исковых требований в полном объеме расходы истца по государственной пошлине подлежат отнесению на ответчика в размере 100 973 руб.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "ВАЛЕСИН" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Промстройинвест" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)                      15 594 610 руб. 59 коп. пени, а также 100 973 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

С.А. Красовская