Арбитражный суд Краснодарского края

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Краснодар                                                                                  Дело № А32-55652/2023

04.04.2024г.                                                                                                             

Резолютивная часть решения оглашена 13.03.2024г.

Решение в полном объеме изготовлено 04.04.2024г.

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Чурикова В.С., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Новошитской К.А., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление ИП ФИО1 г. Иваново (ИНН: 

<

***>) к ООО «Драйв» г. Сочи (ИНН: 

<

***>) о взыскании суммы задолженности в размере 962 500 руб.

при участии: 

от истца: ФИО2, доверенность от 13.04.2022г., ФИО1, паспорт.

от ответчика: не явился. 

 

установил:

В Арбитражный суд Краснодарского края обратился ИП ФИО1 г. Иваново (ИНН: 

<

***>) к ООО «Драйв» г. Сочи (ИНН: 

<

***>) о взыскании суммы задолженности в размере 962 500 руб.

Лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом о месте и времени проведения судебного заседания, ответчик явку  представителей не обеспечил, мотивированный  отзыв на исковое заявление не представил.

Истец направил в материалы дела ходатайство о рассмотрении в его отсутствие, а также ходатайство об увеличении суммы исковых требований, просит суд взыскать 14 251 720 руб.

Определением Арбитражного суда от 07.02.2024 ходатайство истца удовлетворено.

В судебном заседании объявлен перерыв до 13.03.2024 на 17 час. 00 мин., после которого заседание продолжено. 

Суд, проведя предварительное судебное заседание и судебное заседание в соответствии со ст.ст. 135-137 АПК РФ, исследовав материалы дела, изучив все представленные сторонами документальные доказательства и оценив их в совокупности, в порядке ст.ст. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 75, 81 АПК РФ, пришел к следующему выводу.

Как следует из материалов дела, между ИП ФИО1 и  ООО «Драйв» заключен договор подряда № 2 от 04.10.2019г.

Согласно   п.   1.1.   Договора   по   Договору   выполняются   следующие   работы: строительство вольерного комплекса.

В силу п. 2.1. Договора Подрядчик обязуется выполнить работы в порядке и сроки, установленные Договором.

В соответствии с п. 2.2. Договора Заказчик обязуется принять и оплатить работы в порядке и сроки, установленные Договором.

Сторонами в разделе 3  (три) Договора определены сроки выполнения работ, в соответствии с которыми:

п. 3.1.1. начало выполнения работ - 04.10.2019 г. п. 3.1.2. завершение выполнения работ: 10.10.2022 г.

В рамках исполнения Договора, Подрядчиком произведены работы на общую сумму 25 798 308,00 (Двадцать пять миллионов семьсот девяносто восемь тысяч триста восемь) рублей 00 копеек, что подтверждается Актами выполненных работ, а именно:

1.   Акт № 1 сдачи-приемки работ «Бытовка зоопарк» на сумму 54 360 руб. Счет№1 от 21.10.2019 года на сумму 54 360 руб.

2.   Акт № 2 сдачи-приемки работ «Жилой дом на горе» на сумму 376 200 руб. Счет № 4 от 13.11.2019 года на сумму 376 200 руб.

3.   Акт № 3 сдачи-приемки работ «Гараж фастфуд» на сумму 417 285 руб. Счет № 5 от 13.11.2019 года на сумму 417 285 руб.

4.  Акт № 4 сдачи-приемки работ «Временная кровля гараж фастфуд» на сумму 146 600 руб. Счет№ 6 от 21.11.2019 года на сумму 155 600 руб.

5.  Акт № 5 сдачи-приемки работ «Кровля с утеплением дом на горе» на сумму 166 560 руб. Счет № 7 от 24.11.2019 года на сумму 182 010 руб.

6.   Акт № 6 сдачи-приемки работ «Вольеры № 7, 16, 19, 21, 22, 39» на сумму 388 350 руб. Счет № 8 от 13.12.2019 года на сумму 388 350 руб.

7.   Акт № 7 сдачи-приемки работ «Вольеры № 20, 34, 46, 54, 47, 38, 55, 40» на сумму 398 875 руб. Счет № 9 от 21.12.2019 года на сумму 398 875 руб.

8.  Акт № 8 сдачи-приемки работ «Сувенирка» на сумму 415 920 руб. Счет № 10 от 23.12.2019 года на сумму 415 920 руб.

9.  Акт № 9 сдачи-приемки работ «Транспортные расходы» на сумму 75 883 руб. Счет № 74 от 22.12.2020 года на сумму 75 883 руб.

10. Акт № 10 сдачи-приемки работ «Транспортные расходы» на сумму 21 400 руб. Счет № 75 от 22.12.2020 года на сумму 21 400 руб.

11. Акт № 11 сдачи-приемки работ «Вольеры № 58, 55, 33, 45, 20» на сумму 405 500 руб. Счет № 11 от 07.01.2020 года на сумму 405 500 руб.

12. Акт № 12 сдачи-приемки работ «Вольеры № 23, 53, 62» на сумму 624 500 руб. Счет № 16 от 20.01.2020 г. на сумму 301 500 руб.

13. Акт № 14 сдачи-приемки работ «Предоплата» на сумму 50 000 руб. Счет № 2 от 03.11.2019 года на сумму 50 000 руб.

14. Акт № 15 сдачи-приемки работ «Транспортные расходы» на сумму 20 000 руб.

15. Акт №16 сдачи-приемки работ «Заливка дорог бетоном» на сумму 318 500 руб. Счет № 13 от 16.01.2020 года на сумму 318 500 руб.

16. Акт № 17 сдачи-приемки работ «Заливка дорог бетоном» на сумму 213 500 руб. Счет № 14 сдачи-приемки работ от 17.01.2020 года на сумму 213 500 руб.

17. Акт № 18 сдачи-приемки работ «Заливка дорог бетоном» на сумму 171 500 руб. Счет № 15 от 20.01.2020 года на сумму 171 500 руб.

18. Акт № 19 сдачи-приемки работ «Пост охраны дальний» на сумму 302 625 руб. Счет № 17 от 26.01.2020 года на сумму 302 625 руб.

19. Акт № 20 сдачи-приемки работ «Кровли на вольерах № 22, 47, 23, 21, 53, 54, 58, 62» на сумму 249 000 руб. Счет № 18 от 26.01.2020 года на сумму 249 000 руб.

20. Акт № 21 сдачи-приемки работ «Заливка дорог бетоном» на сумму 227 500 руб. Счет № 19 от 03.02.2020 года на сумму 227 500 руб.

21. Акт № 22 сдачи-приемки работ «Вольеры № 35, 36, 17, 32, 51, 50, 57, 56, 60, 37, 62А» на сумму 223 000 руб. Счет № 20 от 03.02.2020 года на сумму 223 000 руб.

22. Акт № 23 сдачи-приемки работ «Кровля сувенирка» на сумму 212 300 руб. Счет № 21 от 10.02.2020 года на сумму 212 300 руб.

23. Акт № 24 сдачи-приемки работ «Кровля фастфуд» на сумму 343 000 руб. Счет № 22 от 10.02.2020 года на сумму 343 000 руб.

24. Акт № 25 сдачи-приемки работ «Туалет» на сумму 422 906 руб. Счет №23 от 16.02.2020 года на сумму 422 906 руб.

25. Акт № 26 сдачи-приемки работ «Вольеры № 27, 28, 29, 30, 44, 42» на сумму 305 500 руб. Счет № 24 от 16.02.2020 года на сумму 305 500 руб.

26. Акт № 27 сдачи-приемки работ «Распиловка» на сумму 22 500 руб. Счет № 25 от 16.02.2020 года на сумму 22 500 руб.

27. Акт № 28 сдачи-приемки работ «Сварочные работы» на сумму 75 000 руб. Счет № 26 от 20.02.2020 года на сумму 75 000 руб.

28. Акт № 29 сдачи-приемки работ «Вольеры № 69, Кровля 37, 33, 44, 48, 56, 50, 43» на сумму 591 520 руб.

Счет № 27 от 12.03.2020 года на сумму 591 520 руб.

29. Акт № 30 сдачи-приемки работ «Отмостка общежитие» на сумму 135 500 руб. Счет № 28 от 12.03.2020 года на сумму 135 500 руб.

30. Акт № 31 сдачи-приемки работ «Кровли вольеры № 17, 57, 42. Укладка камня птичник» на сумму 212 000 руб. Счет № 29 от 16.03.2020 года на сумму 212 000 руб.

31. Акт № 32 сдачи-приемки работ «Заливка дорог» на сумму 280 000 руб. Счет № 30 от 06.04.2020 года на сумму 280 000 руб.

32. Акт № 33 сдачи-приемки работ «Заливка дорог» на сумму 465 500 руб. Счет № 31 от 16.04.2020 года на сумму 465 500 руб.

33. Акт № 34 сдачи-приемки работ «Хозработы» на сумму 82 000 руб. Счет № 32 от 17.04.2020 года на сумму 82 000 руб.

34. Акт № 35 сдачи-приемки работ «Ремонт общежития» на сумму 168 150 руб. Счет № 33 от 17.04.2020 года на сумму 168 150 руб.

35. Акт № 36 сдачи-приемки работ «Камень, Лобовая доска» на сумму 376 300 руб. Счет № 34 от 11.06.2020 года на сумму 376 300 руб.

36. Акт № 37 сдачи-приемки работ «Камень, Лобовая доска» на сумму 394 700 руб. Счет № 35 от 11.06.2020 года на сумму 394 700 руб.

37. Акт № 38 сдачи-приемки работ «Мосты, ограждения металл, кровля вольеров № 30, 34, 17» на сумму 470 000 руб. Счет № 36 от 12.06.2020 года на сумму 470 000 руб.

38. Акт № 39 сдачи-приемки работ «кровли № 25, 27, 28, 29, 42» на сумму 323 000 руб. Счет № 37 от 12.06.2020 года на сумму 323 000 руб.

39. Акт № 40 сдачи-приемки работ «Кровли № 57, 49, 49, 51, 69» на сумму 262 000 руб. Счет № 38 от 12.06.2020 года на сумму 262 000 руб.

40. Акт № 41 сдачи-приемки работ «Заливка дорог» на сумму 350 000 руб. Счет № 39 от 12.06.2020 года на сумму 350 000 руб.

41. Акт № 42 сдачи-приемки работ «Заливка дорог» на сумму 329 000 руб. Счет № 40 от 12.06.2020 года на сумму 329 000 руб.

42. Акт № 43 сдачи-приемки работ «Курятник» на сумму 166 838 руб. Счет № 41 от 12.06.2020 года на сумму 166 838 руб.

43. Акт № 44 сдачи-приемки работ «Арки, металл вольер» на сумму 129 300 руб. Счет № 42 от 12.06.2020 года на сумму 129 300 руб.

44. Акт № 45 сдачи-приемки работ «Заливка дорог» на сумму 329 000 руб. Счет № 43 от 21.06.2020 года на сумму 329 000 руб.

45. Акт № 46 сдачи-приемки работ «Лестницы из бетона» на сумму 175 000 руб. Счет № 44 от 04.07.2020 года на сумму 175 000 руб.

46. Акт № 47 сдачи-приемки работ «Заливка дорог» на сумму 595 000 руб. Счет № 45 от 04.07.2020 года на сумму 595 000 руб.

47. Акт № 48 сдачи-приемки работ «Заливка дорог» на сумму 315 000 руб. Счет № 46 от 13.07.2020 года на сумму 315 000 руб.

48. Акт № 49 сдачи-приемки работ «Курятник 2» на сумму 150 858 руб. Счет № 47 от 21.07.2020 года на сумму 150 858 руб.

49. Акт № 50 сдачи-приемки работ «Бетон» на сумму 854 000 руб. Счет № 48 от 21.07.2020 года на сумму 854 000 руб.

50. Акт № 51 сдачи-приемки работ «Камень» на сумму 424 200 руб. Счет № 49 от 21.07.2020 года на сумму 424 200 руб.

51. Акт № 52 сдачи-приемки работ «Кенгуру» на сумму 179 592 руб. Счет № 50 от 20.07.2020 года на сумму 179 592 руб.

52. Акт № 53 сдачи-приемки работ «Бетон» на сумму 245 000 руб. Счет № 51 от 21.07.2020 года на сумму 245 000 руб.

53. Акт № 54 сдачи-приемки работ «Касса» на сумму 553 796 руб. Счет № 52 от 14.08.2020 года на сумму 553 796 руб.

54. Акт № 55 сдачи-приемки работ «Каскад» на сумму 157 500 руб. Счет № 53 от 14.08.2020 года на сумму 157 500 руб.

55. Акт № 56 сдачи-приемки работ «Бетон» на сумму 437 500 руб. Счет № 54 от 14.08.2020 года на сумму 437 500 руб.

56. Акт № 57 сдачи-приемки работ «Сетка-рабица» на сумму 925 650 руб. Счет № 55 от 30.08.2020 года на сумму 925 650 руб.

57. Акт № 58 сдачи-приемки работ «Подсыпка щебнем» на сумму 273 420 руб. Счет № 56 от 30.08.2020 года на сумму 273 420 руб.

58. Акт № 59 сдачи-приемки работ «Ворота» на сумму 168 000 руб. Счет № 57 от 30.08.2020 года на сумму 168 000 руб.

59. Акт № 60 сдачи-приемки работ «Настилы» на сумму 217 500 руб. Счет № 58 от 30.08.2020 года на сумму 217 500 руб.

60. Акт № 61 сдачи-приемки работ «Покраска вольеров» на сумму 290 000 руб. Счет № 59 от 30.08.2020 года на сумму 290 000 руб.

61. Акт № 62 сдачи-приемки работ «Декоративное ограждение» на сумму 178 200 руб. Счет № 60 от 30.08.2020 года на сумму 178 200 руб.

62. Акт № 63 сдачи-приемки работ «Кровля вольера 12» на сумму 89 625 руб. Счет № 61 от 30.08.2020 года на сумму 89 625 руб.

63. Акт № 64 сдачи-приемки работ «Волчатник» на сумму 349 000 руб. Счет № 62 от 30.08.2020 года на сумму 349 000 руб.

64. Акт № 65 сдачи-приемки работ «Загоны» на сумму 181 120 руб. Счет № 63 от 30.08.2020 года на сумму 181 120 руб.

65. Акт № 66 сдачи-приемки работ «Кормокухня» на сумму 728 167 руб. Счет № 64 от 20.09.2020 года на сумму 728 167 руб.

66. Акт № 67 сдачи-приемки работ «Ветклиника» на сумму 525 792 руб. Счет № 65 от 28.09.2020 года на сумму 525 000 руб.

67. Акт № 68 сдачи-приемки работ «Жирафятник» на сумму 767 540 руб. Счет № 66 от 07.10.2020 года на сумму 767 500 руб.

68. Акт № 69 сдачи-приемки работ «Верхний зоопарк + нижний» на сумму 171 825 руб. Счет № 67 от 07.10.2020 года на сумму 171825 руб.

69. Акт № 70 сдачи-приемки работ «Отделка + ремонт (бригада Питер)» на сумму 360 690 руб. Счет № 68 от 02.11.2020 года на сумму 360 690 руб.

70. Акт № 71 сдачи-приемки работ «Бетон бел.» на сумму 1 540 000 руб. Счет № 69 от 20.12.2020 года на сумму 1 540 000 руб.

71. Акт № 72 сдачи-приемки работ «Каскад» на сумму 91 600 руб. Счет № 70 от 20.12.2020 года на сумму 91 600 руб.

72. Акт № 73 сдачи-приемки работ «арка, морг, хоз.работы» на сумму 481 500 руб. Счет № 71 от 20.12.2020 года на сумму 481 500 руб.

73. Акт № 74 сдачи-приемки работ «Ветклиника на 21.12.20» на сумму 1 248 560 руб. Счет № 72 от 21.12.2020 года на сумму 1 248 560 руб.

74. Акт № 75 сдачи-приемки работ «Скамейка, кормушки» на сумму 210 000 руб. Счет № 73 от 21.12.2020 года на сумму 210 000 руб.

75. Акт № 76 сдачи-приемки работ «Беларусы» на сумму 581 300 руб. Счет № 76 от 28.12.2020 года на сумму 581 301 руб.

76. Акт № 77 сдачи-приемки работ «Беларусы, бургерная на 28.12.20» на сумму 234 760 руб. Счет № 77 от 28.12.2020 года на сумму 234 760 руб.

77. Акт № 78 сдачи-приемки работ «Ремонт вольеров. Хозработы» на сумму 295 000 руб. Счет № 78 от 30.06.2021 года на сумму 295 000 руб.

78. Акт № 79 сдачи-приемки работ «Скамейки, кормушки» на сумму 88 500 руб. Счет № 79 от 30.06.2021 года на сумму 88 500 руб.

Документы Сторонами оформлены надлежащим образом, в соответствии с действующем законодательством, документы подписаны Сторонами, проставлены печати организаций.

Претензий со стороны Заказчика по проделанной Подрядчиком работе, в адрес Подрядчика не поступало.

В свою очередь Заказчик оплатил произведенные Подрядчиком работы в части, в размере 11 546 588,00 (Одиннадцать миллионов пятьсот сорок шесть тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, что подтверждается платежными поручениями, представленными в материалы дела.

Таким образом, задолженность    Заказчика    перед    Подрядчиком    составляет    14 251 720 (Четырнадцать миллионов двести пятьдесят одна тысяча семьсот двадцать) рублей.

Судом признается соблюденным истцом досудебный порядок урегулирования спора с учетом представленного доказательства о направлении претензии по юридическому адресу ответчика.

При рассмотрении данного спора суд пришел к выводу, что между сторонами сложились отношения, регулируемые нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации о подряде.

При рассмотрении данного спора суд пришел к выводу, что между сторонами сложились отношения, регулируемые нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации о подряде.

По правилам ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

Согласно положениям статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями (ст. 309 ГК РФ).

В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В соответствии с нормами статьи 71 Кодекса арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Суд считает, что истец представил в материалы дела все доказательства, обосновывающие и подтверждающие требования последнего, а именно, Акты о приемке выполненных работ. Как указывает истец, документы Сторонами оформлены надлежащим образом, в соответствии с действующем законодательством, документы подписаны Сторонами, проставлены печати организаций. Претензий со стороны Заказчика по проделанной Подрядчиком работе, в адрес Подрядчика не поступало.

Ответчик пояснений в отношении обстоятельств спора не дал, сумму иска по существу не оспорил, отзыв на исковое заявление в соответствии с требованиями части 1 статьи 131 АПК РФ, в материалы дела не представил.

В настоящий момент документы со стороны ООО «Драйв» подписаны, работы приняты.

Таким образом, исковые требования о взыскании задолженности в размере  14 251 720 руб. заявлены правомерно и подлежат удовлетворению.           

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 49, 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд 

 

решил:

Взыскать с ООО «Драйв» г. Сочи (ИНН: 

<

***>) в пользу ИП ФИО1 г. Иваново (ИНН: 

<

***>) сумму задолженности в размере 14 251 720 руб., государственную пошлину в размере 22 250 руб.

Взыскать с ООО «Драйв» г. Сочи (ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 72 009 руб.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его изготовления в полном объеме, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Краснодарского края в течение месяца со дня его принятия, и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа через Арбитражный суд Краснодарского края в двухмесячный срок с момента вступления решения в законную силу.

 

Судья                                                                                                       В.С. Чуриков