Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город  Волгоград

«13» апреля 2021 года

Дело №А12-33628/2020

Резолютивная часть оглашена 08 апреля 2021 года

Полный текст изготовлен 13 апреля 2021 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Поповой Т.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Донцовой Н.Н., рассмотрел в  судебном заседании дело по иску муниципального учреждения коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (ОГРН 1033400473897, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Старт-А» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании неустойки по п. 12.11  муниципального контракта  № 1600 от 20.05.2020.

В судебном заседании участвовали представители:

от истца –  ФИО1, по доверенности №3426/03 от 27.10.2020,

от ответчика – извещены, не явились.

Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (далее  МУ «Комдорстрой», истец) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Старт-А» (далее  ООО «Старт-А», ответчик) о взыскании неустойки  за просрочку исполнения обязательств по  муниципальному контракту №1600 от 20.05.2020 в размере 21 300 руб.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте заседания извещался надлежащим образов.

Выслушав истца, исследовав материалы дела, суд

установил:

МУ«Комдорстрой» ( Муниципальный заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Старт-А» ( Подрядчик) 20 мая 2020 года заключен муниципальный контракт № 1600 (далее - Контракт) на выполнение работ по ремонту тротуаров и устройству парковочных стоянок автомашин у стадиона «Пищевик» в Ворошиловском районе Волгограда в 2020 году.

В соответствии с п. 4.1. Контракта Цена Контракта составляет 2 836 916  рублей 50 копеек. 

Согласно п. 6.1. Контракта сроки выполнения работ с момента заключения Контракта с 20 мая 2020 года, окончание работ: до 01 октября 2020 (включительно).

По состоянию на 13 октября 2020 года Подрядчиком не выполнены в полном объемеобязательства по Контракту, в связи с чем МУ «Комдорстрой» принято решение ободностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с п. 18.4. Контракта, п. 2 ст. 715, п. 3 ст. 723 ГК РФ). 

Контракт считается расторгнутым с 24 ноября 2020 года. 

Пунктом 12.11. Контракта предусмотрено, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем).

Сумма пени, подлежащая к оплате ООО «Старт-А» по муниципальному контракту № 1600 от 20 мая 2020 года за просрочку исполнения обязательств составляет 21 300 рублей 51 копейка, что подтверждено расчетом.  Доказательств исполнения контракта в срок, установленный  контрактом  суду не предоставлено.

В целях соблюдения досудебного порядка МУ «Комдорстрой» в адрес ООО «Старт-А» направлено требование № 3725 /03 от 26 ноября 2020 года об уплате неустойки. Требование не исполнено. 

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Руководствуясь ст. ст. 110, 112, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Старт-А» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу муниципального учреждения коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (ОГРН 1033400473897, ИНН 

<

***>) неустойку в размере 21 300 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Старт-А» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 000 руб.

Решение может быть обжаловано в течение  одного месяца с момента изготовления в полном объеме в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья                                                                                                                   Т.В.Попова