1.64/2025-1098(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

180000, г. Псков, ул. Свердлова, д.36; (8112) 75-29-62, факс: (8112) 72-14-30,  

http://pskov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А52-6351/2024

город Псков

15 января 2025 года

Руководствуясь статьями 167-171, 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

установить сроки выполнения мероприятий по воспроизводству лесов по договорам № 10-2013 от 05.02.2013, № 11-2013 от 05.02.2013.  

Провести посадку лесных культур в срок до 01.06.2025 на площади 32,3 га на пригодных для лесовостановления площадях КУ «Гдовского лесничества»  

- по лесовосстановлению необходимо выполнить за 2022 - 2023 года 32,2 га; площади пригодные для лесовостановления по договору № 10-2013: (квартал 351 выдела 10,19,24,25,27 площадь 20,6 га; квартал 398 выдел 2 площадь 10,1 га; квартал 398 выдел 17 площадь 2,2; квартал 410 выдела 4,8 площадь 4,8 га; квартал 426 выдел 3 площадь 0,3 га; квартал 426 выдел 22 площадь 0,2 га; квартал 426 выдел 1 площадь 0,4 га; квартал 410 выдел 15,20,21,33 площадь 13,1 га; квартал 414 выдел 11 площадь 2,21 га; квартал 386 выдел 24 площадьЗ,8 га; квартал 406 выдел 31,36 площадь 2 га; квартал 425 выдел 36 площадь 2,6 га.; квартал 413 выдел 51 площадь 3,5 га; квартал 386 выдел 25 площадь 1,2 га; квартал 398 выдел 14 площадь 3,9 га; квартал 399 выдел 13 площадь 3,7 га; квартал 396 выдел 28 площадь 3,6 га.) -Партизанское участковое лесничество, (квартал 305 выдела 9,12 площадь 5,4 га; квартал 305 выдел 20 площадь 1,3га; квартал 302 выдел 7,1 площадь 3,4 га; квартал 301 выдела 43,44 площадь 4,57 га; квартал 291 выдел 6 площадь1,05 га.) - Полновское участковое лесничество;  

площади пригодные для лесовостановления по договору № 11-2013: (квартал 368 выдел 16 площадь 5,3 га; квартал 391 выдела 5,16,20 площадь 3 га; квартал 391 выдела 18,24 площадь 3,9 га; квартал 402 выдел 10 площадь1,6 га; квартал 388 выдел 28 площадь 0,9 га; квартал 381 выдел 45 площадь 3 га; квартал 383 выдела 9,15,18 площадь 17 га; квартал 368 выдел 17 площадь 6,7 га) - Партизанское участковое лесничество, (квартал 263 выдел 25 площадь 1,9 га.) - Полновское участковое лесничество.  

Провести согласно ведомости учета молодняков хвойных пород на арендованных участках КУ «Гдовское лесничество» в срок до 01.12.2025:  

- рубки ухода, в молодняках недовыполненные за 2022 - 2023 года на  

площади 48,59 га; площади, пригодные под рубки ухода по договору № 10-2013:  

(квартал 386 выдел 11 площадь 3,1 га; квартал 387 выдел 18 площадь 3,4 га;  

квартал 409 выдел 2 площадь 1,7 га; квартал 409 выдел 15 площадь 2,1 га; квартал  

413 выдел 18 площадь 10,2 га; квартал 301 выдел 21 площадь 3,1 га) - Партизанское  

участковое лесничество. 

площади, пригодные под рубки ухода по договору № 11-2013: (квартал 384  

выдел 5 площадь 6,7 га; квартал 390 выдел 8 площадь 1,6 га; квартал 390 выдел 13  

площадь 6,6 га; квартал 263 выдел 17 площадь 1,9 га; квартал 217 выдел 4 площадь  

8,9 га) - Партизанское участковое лесничество. По договору № 10-2013 от 05.02.2013 выполнить: 

- искусственное лесовосстановление в квартале 398 выдел 2 площадь 9,9 га. в срок  

до 01.06.2025; 

- агротехнический уход в квартале 398 выдел 2 площадь 9,9 га. в срок до  

01.06.2025; 

- агротехнический уход в квартале 395 выдела 10,13,3,7 площадь 8,5 га. в срок до  

01.06.2025; 

- агротехнический уход в квартале 424 выдела 32,33 площадь 1,0 га. в срок до  

01.06.2025; 

- агротехнический уход в квартале 426 выдела 1 площадь 0,7 га. в срок до  

01.06.2025; 

- агротехнический уход в квартале 426 выдела 31 площадь 0,56 га. в срок до  

01.06.2025; 

- выполнить агротехнический уход по проектам 2022 года на площади 23,43 га. в  

срок до 01.10.2025 в квартале 243 выделе 17 площадь 2,4 га.; в квартале 291 выдел 15 площадь 1,0 га.; в квартале 291 выдела 15,14 площадь 3,9 га.; в квартале 301 выдела 2,19,20 площадь 4,1 га.; в квартале 396 выдел 2 площадь 2,3 га.; в квартале 396 выдел 6,14,17 площадь 3,3 га.; в квартале 415 выдел 7 площадь 2,3 га.; в квартале 415 выдел 1 площадь 3,1 га.; в квартале 424 выдел 30,32 площадь 1,03 га.; 

- выполнить агротехнический уход по проектам 2021 года на площади 37,9  

га. в срок до 01.10.2025 в квартале 287 выдела 3, 4 площадь 1,7 га.; в квартале 291 выдел 14, 15 площадь 2,4 га.; в квартале 303 выдела 7, 8, 14 площадь 1,7 га.; в квартале 387 выдела 3,10 площадь 6,3 га.; в квартале 406, выдела 10, 13 площадь 2,0 га.; в квартале 407 выдел 14 площадь 3,5 га.; в квартале 410 выдела 15, 20, 33 площадь 7,9 га.; в квартале 410 выдел 20 площадь 7,3 га., в квартале 424 выдел 33 площадь 2,4 га.; в квартале 424 выдел 47 площадь 2,1 га.; в квартале 425 выдел 38 площадь 0,6 га.. По договору № 11-2013 05.02.2013 выполнить: 

-искусственное лесовостановление в квартале 404 выдел 40 площадь 1,3 га. в  

срок до 01.06.2025; 

- агротехнический уход в квартале 404 выдел 40 площадь 1,3 га. в срок до  

01.06.2025; 

- агротехнический уход по проектам 2022 года на площади 15,0 га. в  

квартале 390, выдела 37,38,39 площадь 15,0 га. в срок до 01.10.2025; 

- агротехнический уход по проектам 2021 года на площади 26,5 га. в срок до  

01.10.2025: в квартале 246 выдела 2, 8, 11 площадь 1,3 га.; в квартале 261 выдела 3, 12 площадь 3,5 га.; в квартале 383 выдела 9,13,15,16,18 площадь 6,4 га.; в квартале 391 выдела 7,9 площадь 7,1 га.; в квартале 402 выдела 3, 15, 16 площадь 2,0 га.; в квартале 402 выдела 39, 40 площадь 1,7 га.; в квартале 403 выдел 11 площадь 1,4 га.; в квартале 404 выдел 53 площадь 3,1 га.. 

На дополнительное решение в течение месяца после его принятия может  

быть подана апелляционная жалоба в Четырнадцатый арбитражный  

апелляционный суд через Арбитражный суд Псковской области. 

Судья М.В. Соколова