Арбитражный суд Краснодарского края

Именем Российской Федерации

Решение

г. КраснодарДело № А32-49280/2019

Резолютивная часть решения объявлена 05.08.2020 г. 

Полный текст решения изготовлен 12.08.2020 г. 

Судья Арбитражного суда Краснодарского края Гречко О.А.

При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Амбелиди В.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании дело на основании искового заявления

Администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района (352022 Краснодарский край район Кущевский поселок Первомайскийулица Советская 23 , ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 02.12.2005, ИНН: 

<

***>, КПП: 234001001) 

к ООО "СК" ЭНКИ" (Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Энки" 350065, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 21.11.2017, ИНН: 

<

***>, КПП: 231201001) 

о взыскании штрафа в размере 135 000 руб. 

при участии: истец: ГЛАВА: ФИО1, водительское удостоверение

установил:

Администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с требованиями к ООО "СК" ЭНКИ" о взыскании штрафа в размере 135 000 руб.

Исковые требования мотивированы тем, что истцом обнаружены недостатки в выполненных ответчиком работах, что влечет начисление суммы штрафа.

Представитель истца поддержал заявленные требования и настаивал их удовлетворении в полном объеме.

Ответчик, извещенный надлежащим образом в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, пояснений в отношении обстоятельств спора не дал, сумму иска по существу не оспорил, отзыв на исковое заявление в соответствии с требованиями части 1 статьи 131 АПК РФ, в материалы дела не представил.

Суд, исследовав собранные по делу доказательства, оценив их в совокупности в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установил следующее.

23 апреля 2018 года между администрацией Первомайского сельского поселения Кущевского района (далее по тексту Заказчик) и Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ЭНКИ» (далее по тексту Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 0818300001118000002-0253520-01 от 23 апреля 2018 года, по условиям которого Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство малобюджетного спортивного комплекса по ул. Кооперативной,2 в пос.Первомайский Кущевского района».

Сумма контракта составляет 23 876 273 (двадцать три миллиона восемьсот семьдесят шесть тысяч двести семьдесят три) рублей 00 копеек.

Обществом с ограниченной ответственностью «Стройторг», осуществляющим строительный контроль по объекту, была проведена проверка ООО «Строительная компания «ЭНКИ» по соблюдению условий муниципального контракта. При проведении строительно-монтажных работ установлены факты грубого нарушения обязательств по Контракту, а также недостатки по выполнению работ в нарушении графика производства работ, которые подробно прописаны в претензии № 504/01-20 от 25 июня 2019 года администрации сельского поселения к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ЭНКИ» (копия с отметкой о получении претензии прилагается).

ООО «Строительная компания «ЭНКИ» штраф в размере 135 000 руб. не оплачен.

В рамках досудебного урегулирования спора истец направил ответчику претензию о взыскании штрафа.

Ответчик отказался удовлетворить требования истца.

На основании изложенного истец обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с требованиями в защиту нарушенного права.

Правоотношения сторон регулируются положениями главы 37 ГК РФ и Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

Согласно статье 1 Федерального закона № 44-ФЗ указанным законом регулируются отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок (пункт 1 статьи 1).

В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ под государственным и муниципальным контрактом понимается договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт к муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

В силу пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

Согласно положениям статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями (ст. 309 ГК РФ).

В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Обществом с ограниченной ответственностью «Стройторг», осуществляющем строительный контроль по объекту, были проведена проверка соблюдения ООО «Строительная компания «ЭНКИ» условий муниципального контракта при проведении строительно-монтажных работ установлены факты  не выполнения обязательств по Контракту, а также недостатков по выполненным работам и не выполненным в нарушение графика производства работ.

         Муниципальным контрактом установлены следующие обязанности подрядчика:

3.2. Промежуточные сроки выполнения строительно-монтажных работ, определяются Сторонами в «Графике производства строительно-монтажных работ», являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

4.1. «Подрядчик» принимает на себя обязательство обеспечить строительство упомянутого в п. 1.1 Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием.

4.2. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены «Заказчику» заблаговременно до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

4.4.    Ответственность за охрану территории строительства Объекта, сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, а также работ и временных сооружений до полного завершения работ до сдачи работ Заказчику (включая период времени, в течение которого «Подрядчик» будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование), несет «Подрядчик».

4.5.  «Подрядчик», предоставивший материалы и оборудование, отвечает за их соответствие проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям:

6.1.   Назначить в трехдневный срок с момента заключения настоящего Контракта представителей «Подрядчика», ответственных за ход работ по настоящему Контракту, официально известив об этом «Заказчика» в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.

6.2.  Качественно выполнить все работы по Объекту в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, приложениями к нему, технической и сметной (проектно-сметной) документацией, и сдать Объект «Заказчику» в срок окончания работ, предусмотренный пунктом 3.1. Контракта.

6.3. Обеспечить:

-  выполнение работ за счет собственных оборотных средств, оплата за фактически выполненные работы производится в соответствии с разделом 12 настоящего Контракта;

-    своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

-   производство работ в полном соответствии с проектом, сметами, строительными нормами и правилами Российской Федерации в соответствии с Описанием объекта закупки, его приложениями.

- обеспечить осуществление следующих мероприятий: 

а) установление пропускного режима;

б) осуществление специального контроля материалов, изделий и конструкций, поставляемых на строительные площадки объекта;

д) незамедлительное уведомление «Заказчика» в письменном виде о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и (или) в связи с исполнением настоящего Контракта, включая, но не ограничиваясь:

1)   выявлением различного рода «аварийных» ситуаций (в течение 2-х часов);

2) обнаружением радиоактивных, химических, взрывчатых и иных веществ, которые могут быть использованы для совершения террористического акта (в течение 2-х часов).

6.4.    Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.

6.5.   Установить все необходимые временные здания и сооружения в соответствии с утверждённым ПОС. Выполнить устройство на строительной площадке временных сантехнических сооружений (биотуалеты), а также установить временное освещение и ограждение.

6.6.  Обеспечить за свой счет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

6.7.1. «Подрядчик» обязуется представить «Заказчику» подтверждающие документы на вывоз строительного мусора со строительной площадки.

6.8.    Производить очистку транспорта,, выезжающего с территории строительной площадки.

6.9.    Осуществить в установленном порядке временные подключения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке, и подключение вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом. Обеспечить оплату за потребляемую электроэнергию, теплоэнергию, воду, сброс канализации, газ и другие коммунальные услуги.

6.10.   Немедленно известить «Заказчика» и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:

-  возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

-    иных, независящих от «Подрядчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.11.  Ежемесячно, до 20-го числа предоставлять «Заказчику» акты скрытых работ, заверенные печатью организации и подписью ответственного лица. Еженедельно представлять видеоотчет/ фотоотчет о выполняемой работе.

6.12.   Официально известить «Заказчика» о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения «Заказчика», в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию «Заказчика» «Подрядчик» обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию «Заказчика», а затем восстановить ее за свой счет.

В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с «Подрядчика» не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.

6.13.   В процессе производства работ персонал подрядной организации должен быть одет в специальную форму и строительные каски.

6.13.1. Постоянно вести общий и специальный журналы работ, форма которых утверждена Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7, а также журнал учета выполненных работ по форме КС-ба, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, письменно извещая «Заказчика» не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ.

6.14.  Оформить и установить на строительной площадке паспорт Объекта (информационный щит).

6.15.    Разработать проект производства работ и согласовать его с «Заказчиком» и соответствующими службами. В течение 10 дней с момента заключения контракта направить «Заказчику» проект производства работ, приказ о назначении ответственных за организацию и безопасное производство работ, список лиц, участвующих в производстве работ, документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих, материалы подтверждающие готовность «Подрядчика» к выполнению работ, документы подтверждающие исправность применяемых при работе машин и механизмов и наличие их технического освидетельствования. Получить разрешение на снос зеленых насаждений.

6.16.   Ежемесячно с 1-го по 20-е числа текущего месяца представлять «Заказчику» акты выполненных за месяц строительно-монтажных работ (формы № КС-2, № КС-3), в том числе на электронном носителе, в формате совместимом с ПК «Гранд-Смета».

6.17. Принимать все необходимые меры для предотвращения причинения ущерба или повреждения в процессе строительства Объекта дорогам, различным сооружениям транспортом «Подрядчика» ( поставщиков или субпоставщиков).

6.18.1.  Представлять «Заказчику» исполнительную документацию, а также отчеты, в соответствии с нормативными актами РФ и Краснодарского края.

6.18.2.    Еженедельно предоставлять уполномоченному представителю «Заказчика» фотоотчет о произведенной на Объекте работе.

6.19.   Осуществлять движение транспорта «Подрядчика» к Объекту по маршрутам движения, определенными «Подрядчиком», согласованными с «Заказчиком» и соответствующими уполномоченными службами.

6.20.  Обеспечить беспрепятственный доступ представителей «Заказчика» на строительную площадку и места производства строительно-монтажных работ на Объекте в любое время.

6.21.   Представить «Заказчику» всю исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах в соответствии с формами, утвержденными постановлением Государственного Комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года № 100, все технические паспорта, сертификаты на русском языке на поставляемое оборудование, согласно актам формы КС-2, комплект документов, необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

Представляемые «Подрядчиком» документы, необходимые для ввода Объекта в эксплуатацию, должны соответствовать перечню документов, указанных в п. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Расходы, связанные с получением указанных документов, «Подрядчик» несет за счет собственных средств.

6.22.   Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров.

6.25.  Вывезти в 15-ти дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие «Подрядчику» строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество, а также строительный мусор. Обеспечить до сдачи Объекта в эксплуатацию генеральную уборку Объекта и строительной площадки от отходов строительства.

6.26.   Организовать и координировать работы по строительству объекта капитального строительства, обеспечить соблюдение требований технической документации,   технических регламентов,  техники   безопасности  в  процессе указанных работ и нести ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям технической документации.

6.27. Своевременно предоставлять «Заказчику» достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, либо препятствующих исполнению Контракта в срок,

7.2. «Подрядчик» несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения Объекта, до сдачи результатов выполненных работ Заказчику.

10.1.    Приемка выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения Контракта (согласно графику производства работ) производится «Заказчиком» собственными силами.

10.2.   Для приемки выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения Контракта (согласно графику производства работ) «Заказчиком» могут привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4.  «Заказчик» вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта в случае выявления несоответствия этих работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работ и устранено «Подрядчиком».

10.5. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем «Заказчика». Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием -представителем «Заказчика» и «Подрядчика» актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, актов гидравлического испытания (включая испытание на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

10.6.   Ежемесячная сдача промежуточных выполненных «Подрядчиком» работ и приемка их «Заказчиком» оформляется актами формы № КС-2, и справками формы № КС-3, подписанными обеими Сторонами. Проверка актов формы № КС-2 и справок формы № КС-3 осуществляется «Заказчиком» в течение 72 часов. В случае замечаний «Подрядчику» направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания актов формы № КС-2, и справок формы № КС-3.

10.6.1. При наличии оборудования в форме КС-2, КС-3, представлять справку о фактической стоимости оборудования.

10.7.   «Подрядчик» передает «Заказчику» за 4 дня до начала приемки результата работ по Контракту 3 экземпляра исполнительной документации с письменным     подтверждением     соответствия     переданной     документации фактически выполненным работам.

10.8.  «Подрядчик» и «Заказчик» организуют сдачу и приемку результата работ; обеспечивают присутствие представителей Сторон, необходимых специалистов, соответствующих должностных лиц.

10.9.    При сдаче работ «Подрядчик» обязан письменно сообщить «Заказчику» и эксплуатирующей организации о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а так же о возможных последствиях при несоблюдении этих требований.

10.9.1. Приемка работ осуществляется в соответствии с нормативными документами и правилами, оговоренными в Описании объекта закупки (Приложение № 4).

10.10. При обнаружении «Заказчиком» в ходе приемки выполненных работ недостатков, Сторонами составляется Акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения «Подрядчиком». При отказе (уклонении) «Подрядчика» от подписания указанного Акта, в нем делается отметка об этом и подписанный «Заказчиком» Акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной по выбору «Заказчика», присутствующей при обнаружении недостатков.

10.10.1.   «Подрядчик» обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

10.10.2.  Устранение «Подрядчиком» в установленные сроки выявленных» недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

10.10.3.  «Заказчик», принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

10.11.    «Заказчик» вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации и не могут быть устранены «Подрядчиком» или третьим лицом.

Контроль за осуществлением работ:

13.1.  «Заказчик» осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.

13.2.  «Заказчик» имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

Журнал производства работ.

13.3.   С момента начала работ и до их завершения «Подрядчик» ведет журнал производства работ в установленном порядке, в которых отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Заказчика» и «Подрядчика». Форма журнала производства работ соответствует типовой межотраслевой форме № КС-б, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 30 ноября 1997 года № 71 а. Представитель «Заказчика» проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

13.4.    Если «Заказчик» не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями «Подрядчика», то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. «Подрядчик» в течение указанного «Заказчиком» срока исполняет указания представителя «Заказчика», о чем «Подрядчик» обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

13.5.   В случае "если представителем «Заказчика» внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться «Подрядчиком» без письменного разрешения «Заказчика» за исключением случаев неявки представителя «Заказчика» для приемки.

13.6.  Осуществляя контроль ведения работ, «Заказчик» не вмешивается в оперативно - хозяйственную деятельность «Подрядчика».

15.1.  За качество выполненных работ Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.2.  В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

15.3.   За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере 10 (десять) от цены контракта, определенном согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения • или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Постановление № 1042):

15.4.     За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере 5000 рублей, определенном согласно Постановлению № 1042:

15.5.    В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей- на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

15.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.7. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений,

15.8.  Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

15.9. В случае не предоставления информации, предусмотренной пунктом 4.1.7 настоящего контракта, Заказчик взыскивает с Подрядчика пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

15.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

15.11.     Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

15.12.    «Подрядчик» несёт ответственность перед «Заказчиком» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

15.13.  «Подрядчик» обязан по требованию «Заказчика» и в установленный им срок безвозмездно устранить недостатки (дефекты), обнаруженные «Заказчиком» в период выполнения работ, а также на протяжении гарантийного срока эксплуатации их результатов.

15.13.1.     В период выполнения работ по Контракту недостатки фиксируются в соответствующих журналах, а также в Акте, составленном в соответствии с п. 10.10. настоящего Контракта, а в период гарантийного срока -в Акте, составленном в соответствии с п. 10.10. настоящего Контракта, где вместо «Заказчика» выступает «Балансодержатель».

15.13.2.  «Заказчик» вправе вместо требования о безвозмездном устранении недостатков потребовать от «Подрядчика» соразмерного уменьшения установленной за работу цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков.

15.14.  При оплате штрафа, пени «Подрядчик» в течение 2-х рабочих дней направляет в бухгалтерию «Заказчика» дубликат платежного поручения с отметкой банка.

15.15.  В случае просрочки оплаты штрафа, пени, «Заказчик» оставляет за собой право приостановить оплату за последующее выполнение работ и осуществить взыскание через Арбитражный суд Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством РФ.

15.16. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Контракту в натуре, а также устранения допущенных нарушений.

15.17.    Все суммы убытков, штрафов, пеней подлежащих уплате «Заказчиком» третьим лицам в связи с нарушением обязательств «Подрядчиком» возлагаются на «Подрядчика», при этом уплата штрафа, пени, 'возмещение убытков не освобождает «Подрядчика» от выполнения условий Контракта.

15.18.  В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения обязательств по Контракту «Подрядчиком», «Заказчик» вправе получить возмещение денежных средств в соответствии с выбранным «Подрядчиком» способом обеспечения исполнения Контракта (удержание перечисленных «Подрядчиком» денежных средств в счет обеспечения обязательств по Контракту, обращение в банк-гарант за выплатой денежных средств).

15.19. «Подрядчик» за неисполнение обязательств по настоящему Контракту несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Согласно п. 6. постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» определенно ;

- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

По расчету истца, ответчиком не выполнены из вышеперечисленных, обязательства предусмотренные контрактом по следующим пунктам: 4.2., 4.4., 4.5., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7.1, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12, 6.13, 6.13.1, 6.15, 6.16, 6.18.1, 6.18.2,6.21,6.26,6.27,7.2, 10.5, 10.10.1, 13.3.

Итого 27 (двадцать семь) обязательств.

Штраф составил 135 000 руб. (27*5000=135 000)

Суд не усматривает оснований для взыскания штрафа по п. 7.2 договора – «Подрядчик» несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения Объекта, до сдачи результатов выполненных работ Заказчику. Доказательств того, что объект уничтожен, либо поврежден не имеется.

В остальной части требования заявлены правомерно, ответчик доводы истца не опроверг.

Суд считает, что истец представил в материалы дела все доказательства, обосновывающие и подтверждающие требования последнего на сумму 130 000 руб. 00 коп.

Исковые требования о взыскании задолженности в размере 130 000 руб. 00 коп. заявлены правомерно и подлежат удовлетворению.

В остальной части исковые требования удовлетворению не подлежат, в связи с их необоснованностью.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В соответствии со статьей 112 АПК РФ, руководствуясь общим принципом отнесения судебных расходов на стороны пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований (часть 1 статьи 110 АПК РФ), суд разрешает вопрос о распределении расходов исходя из фактического удовлетворения заявленных требований.

 

На основании изложенного и, руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  суд  

решил:

Взыскать с ООО "СК" ЭНКИ" в пользу Администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района штраф в размере 130 000 руб. 

В остальной части в иске отказать.

   Взыскать с ООО "СК" ЭНКИ" в доход федерального бюджета госпошлину  в сумме 4862 руб.96 коп.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в порядке апелляционного производства и в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения, через принявший решение в первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края.

Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке, если было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                             О.А. Гречко