1_16951904 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

Р Е Ш Е Н И Е

 Именем Российской Федерации

Дело № А40-110143/17-1-780

г. Москва

20 сентября 2017 г.

Резолютивная часть решения объявлена 13 сентября 2017 года Полный текст решения изготовлен 20 сентября 2017 года 

Арбитражный суд в составе судьи Коноваловой Е.В.  

при ведении протокола секретарем ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску АДМИНИСТРАЦИИ МАГИ- СТРАЛЬНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ОГРН 

<

***>, 666504 обл  ИРКУТСКАЯ р-н КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ 

<

...>- СКАЯ д. 5) к ООО "СТРОЙГРУПП" (ОГРН 

<

***>, 121614 

<

...>) об обязании предоставления банковской гарантии на сумму  372526 руб. 70 коп. по Муниципальному контракту № 0134300025215000050-016570602  

при участии представителя ответчика - ФИО2 по дов. от 28.08.2017 

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен понуждении предоставить банковскую гарантию на сумму 372526  руб. по Муниципальному контракту № 0134300025215000050-0165706-02 либо предоставить в залог Администрации денежные средства в сумме 372526 руб.  

Извещенный истец в судебное заседание не явился, суд в порядке ст.156 АПК  РФ рассмотрел дело в отсутствие истца. Ответчик представил отзыв, просит в иске  отказать по мотивам, изложенным в отзыве, ссылаясь на принятие мер по исполнению  контракта.  

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу об удовлетворении иска. 

Как следует из материалов дела, в соответствии с Муниципальным контрактом  от 25.01.2016 г. № 0134300025215000050-0165706-02 на участие в долевом строитель- стве многоквартирного жилого дома в Магистральнинском городском поселении Каза- чинско-Ленского района Иркутской области для переселения граждан из аварийного  жилищного фонда (общая площадь жилых помещений (квартир): не менее 220,43 кв.м.)  Застройщик, ООО «Стройгрупп», обязалось своими силами построить (создать) жилые  помещения (далее - Квартиры или Объекты долевого строительства), в количестве 4  штук, общей площадью не менее 220,43 кв. м. (без учета лоджий) и передать администрации Магистральнинского городского поселения объекты долевого строительства  (квартиры) в срок, не позднее «31» октября 2016г.  

Как указывает истец, работы по строительству многоквартирного дома с подво- дящими сетями и благоустройством прилегающей территории, по адресу: 

<

...> ВЛКСМ,  дом 12/2, на земельном участке с кадастровым номером 38:07:020213:237 не выполне- ны, что подтверждается соответствующими актами.  

В соответствии со ст. 96 Федерального закона «О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных  нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ) и п. 8.1 ст. 8 Муниципального контракта исполнение  контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ обеспечивается безотзыв- ной банковской гарантией в размере 372 526,70 рублей. Срок представленной ответчи- ком банковской гарантии истек 31.12.2016 г. Согласно п. 8.4. ст. 8 Контракта если по  каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту  перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало  обеспечивать исполнение обязательств Застройщика по настоящему контракту, За- стройщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Участнику долевого строительства иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств  по настоящему Контракту.  

Поскольку обязательство не исполнено, истец правомерно требует принуждения  ответчика к исполнению обязательств по предоставлению аналогичного обеспечения в  соответствии с п.8.4 контракта.  

Доводы отзыва отклоняются, поскольку не освобождают от исполнения обязательств по спорному договору.  

Досудебный порядок администрацией соблюден. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что исковые требова- ния по заявленным истцом основаниям являются обоснованными и подлежат удовле- творению.  

Расходы по государственной пошлине распределяются в соответствии со ст. 110  АПК РФ.  

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 180, 182 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ 

Обязать ООО "СТРОЙГРУПП" в течение недели с момента вступления в закон- ную силу решения предоставить истцу обеспечение в виде банковской гарантии на  сумму 372526 руб. по Муниципальному контракту № 0134300025215000050-016570602, либо предоставить в залог Администрации денежные средства в сумме 372526 руб.  

 Взыскать с ООО "СТРОЙГРУПП" в доход федерального бюджета 6000 руб.  госпошлины.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца после принятия в порядке, установленном ст.ст. 257-260 АПК РФ.  

Судья Е.В. Коновалова