АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6

Тел/факс (8512) 48-23-23, E-mail: astrahan.info@arbitr.ru

http://astrahan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А06-211/2020

г. Астрахань

01 октября 2020 года

Резолютивная часть решения вынесена 24 сентября 2020 года. 

Арбитражный суд Астраханской области  в составе  судьи Морозовой Т.Ю.

при ведении протокола судебного заседания   секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело  по иску  Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области "Наримановская районная больница" (ОГРН: 

<

***>; ИНН: 

<

***>) к Государственному предприятию Астраханской области "Проектно-технологический трест "Оргтехстрой" (ОГРН: 

<

***>; ИНН: 

<

***>) о взыскании по контрактам:

- №0325300036919000042 от 26.03.2019г. неустойки в размере 14 822 руб. 82 коп. за период с 26.04.2019г. по 10.12.2019г., штрафа в сумме 32 364 руб. 24 коп.;

- №0325300036919000122 от 07.06.2019г. неустойки в размере 2 534 руб. 74 коп. за период с 09.07.2019г. по 13.08.2019г., штрафа в сумме 35 204 руб. 79 коп.

третье лицо,  не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора:  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

при участии:

от истца: (до перерыва) не явился, извещен; (после перерыва) ФИО2 - представитель по доверенности от 15.05.2020г. 

от ответчика: (до и после перерыва) не явился, извещен;

от третьего лица: (до и после перерыва) не явился, извещен;

              Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области "Наримановская районная больница" обратилось в арбитражный суд с иском к  Государственному предприятию Астраханской области "Проектно-технологический трест "Оргтехстрой" о взыскании по контрактам: №0325300036919000042 от 26.03.2019г. неустойки в размере 14 822 руб. 82 коп. за период с 26.04.2019г. по 10.12.2019г., штрафа в сумме 32 364 руб. 24 коп.; №0325300036919000122 от 07.06.2019г. неустойки в размере 2 534 руб. 74 коп. за период с 09.07.2019г. по 13.08.2019г., штрафа в сумме 35 204 руб. 79 коп.

            Определением суда от 12 февраля 2020 года дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей  228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

            Определением от 13.04.2020 года суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

              В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

            В судебном заседании в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 24 сентября 2020г.

Ответчик, третье лицо до и после перерыва в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации извещены о времени и месте проведения судебного заседания, в суд не явились.

В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие не явившихся лиц.

            Представитель истца в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заявил ходатайство об уточнении исковых требований, просит взыскать по контрактам: №0325300036919000042 от 26.03.2019г. сумму неустойки в размере 14 822 руб. 82 коп. за период с 26.04.2019г. по 10.12.2019г., штраф в размере 32 364 руб. 24 коп.; №0325300036919000122 от 07.06.2019г. сумму неустойки в размере 2 534 руб. 74 коп. за период с 09.07.2019г. по 13.08.2019г., штраф в размере 35 204 руб. 79 коп.

            Судом уточнения исковых требований приняты.

            Изучив материалы дела, выслушав представителя истца, суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, 26.03.2019г. года между Государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Наримановская районная больница" (Заказчик) и Государственным предприятием Астраханской области "Проектно-технологический трест "Оргтехстрой" (Подрядчик) подписан контракт №0325300036919000042 на разработку проектно-сметной документации на проведение  капитального ремонта помещений.

      Пунктом 1.1 контракта предусмотрено, что подрядчик обязуется выполнить разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта помещений ГБУЗ АО «Наримановская районная больница» в соответствии с техническим заданием и сдать результат работ заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, которые установлены контрактом. 

      Согласно пункту 12 приложения №1 к контракту №0325300036919000042, обязательство по разработке проектно-сметной документации должно быть исполнено в течение 30 дней с момента заключения контракта. 

      В соответствии с пунктом 2.1 цена контракта составляет 323 642 руб. 40 коп.

             Пунктами 6.4, 6.4.1, 6.4.2. контракта установлено, что в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, в том числе гарантийного обязательства, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику претензию, содержащую требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

             Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

             Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, в том числе гарантийного обязательства, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа - 10 процентов цены Контракта, что составляет 32 364,24 рубля.

     07.06.2019 года между Государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Наримановская районная больница" (Заказчик) и Государственным предприятием Астраханской области "Проектно-технологический трест "Оргтехстрой" (Подрядчик) подписан контракт №0325300036919000122 на разработку проектно-сметной документации на проведение  капитального ремонта помещений.

            Пунктом 1.1 контракта предусмотрено, что Исполнитель обязуется оказать услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги, оказанные в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему.

            Перечень услуг, место оказания и сроки, согласно которым Исполнитель обязан оказать услуги в рамках Контракта, определены в Описании объекта закупки (Приложение №1 к Контракту), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта (пункт 1.2).

            Согласно пункту 12 приложения №1 к контракту №0325300036919000122, обязательство по разработке проектно-сметной документации должно быть исполнено в течение 30 дней с момента заключения контракта. 

      В соответствии с пунктом 2.1 цена контракта составляет 352 047 руб. 91 коп.

             Пунктами 5.5, 5.6 контракта установлено, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных исполнителем.

             Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения исполнителем обязательств, в том числе гарантийного обязательства, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, что составляет 35 204,79 рубля.

             Учитывая, что ответчик ненадлежащим образом выполнил работы, предусмотренные контрактами, истцом начислены неустойки и штраф в общей сумме 84 926 руб. 59 коп.

      Истцом в адрес ответчика направлялись  претензии об оплате пени и штрафа, которые ответчиком оставлены  без удовлетворения. 

      Данные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд за защитой нарушенного права.

      Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доводы сторон, доказательства и обстоятельства по делу, суд считает требования истца    обоснованными и   подлежащими    удовлетворению.  

     В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

     В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

    Учитывая, что ответчик ненадлежащим  образом выполнил условия контрактов, истцом начислены неустойка и штрафы в общей сумме 84 926 руб. 59 коп.

     На основании статьи 332 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор вправе требовать уплаты неустойки (штрафа, пени), определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

     Частью 4 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) установлено, что в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

   Как следует из ч. 7 ст. 34 Федерального закона N 44-ФЗ, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

   В соответствии с п. 8 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

  Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

  Учитывая изложенное, с  ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 84 926 руб. 59 коп. (штраф, пени):по контракту №0325300036919000042 от 26.03.2019г. сумма неустойки в размере 14 822 руб. 82 коп. за период с 26.04.2019г. по 10.12.2019г., штраф в размере 32 364 руб. 24 коп.; по контракту №0325300036919000122 от 07.06.2019г. сумма неустойки в размере 2 534 руб. 74 коп. за период с 09.07.2019г. по 13.08.2019г., штраф в размере 35 204 руб. 79 коп. ( с учетом прекращения сроков действия контрактов).

   В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

   Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Государственного предприятия Астраханской области "Проектно-технологический трест "Оргтехстрой" (ОГРН: 

<

***>; ИНН: 

<

***>) в пользу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области "Наримановская районная больница" (ОГРН: 

<

***>; ИНН: 

<

***>)84926руб. 59коп.-сумму неустойки (штраф, пени).

Взыскать с Государственного предприятия Астраханской области "Проектно-технологический трест "Оргтехстрой" (ОГРН: 

<

***>; ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 3397руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Астраханской области.

Судья

Т.Ю. Морозова