10513_4259233  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А53-22294/2017

12 октября 2017 года

город Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи О.М. Брагиной,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания А.С.  Хатламаджияном,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело, возбужденное по иску Администрации  Зимовниковского сельского поселения (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Торгово-Строительная компания  «Артстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об обязании устранить нарушения, допущенные при строительстве объекта, 

при участии в судебном заседании: от истца – представитель ФИО1, по доверенности № 6 от 09.01.2017 г., от ответчика – представитель не явился. 

 Руководствуясь статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации,  статьями 49, 65, 110, 156, 167, 168, 169, 170, 174, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Торгово-Строительная  компания «Артстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в срок до 31.12.2017 г.  устранить нарушения, допущенные при строительстве, реконструкции объекта  капитального строительства по муниципальному контракту № 0158300029216000001- 0250876-01-84-16 от 06.05.2016 г. «Реконструкция водопроводных сетей от пер.  Мостового по ул. Основания и ул. Дружбы, по пер. Бригадный от ул. Дружбы до ул.  Энергетическая протяженностью 4180 м в п. Зимовники, Зимовниковского района,  Ростовской области», а именно: заполнить разделы № 5 «Сведения о строительном  контроле лица осуществляющего строительства», № 6 «Перечень исполнительной  документации», общего журнала работ; предоставить документы на монолитные и  сборные элементы колодцев, с указанием из какого материала они изготовлены, либо  предоставить технические паспорта с указанием материала из какого материала они  изготовлены; предоставить документ, подтверждающий квалификацию сварщика на право  производства работ по сварке полиэтиленовых труб; предоставить проект производства  

работ по реконструкции водопроводных сетей; предоставить результаты испытаний  строительной лаборатории песчаного основания и обратной засыпки трубопровода с  указанием коэффициента стандартного уплотнения К>0,95; произвести замену на  отдельных водопроводных колодцах водопроводных люков из полимера на чугунные  люки типа «Л», типа «Т», на водопроводной сети по адресу: пер. Мостовой, 41 (1 шт.), ул.  Основания, 12 (1 шт.), пересечение пер. Мельничный – ул. Дружбы (1 шт.), ул. Дружбы, 4  (1 шт.), уд. Дружбы, 46 (1 шт.), пересечение ул. Дружбы – пер. Горобцова (1 шт.), ул.  Дружбы, 74 (1 шт.), ул. Дружбы,76 (1 шт.), ул. Дружбы, 82 (1 шт.), ул. Дружбы, 84 (1 шт.),  ул. Дружбы, 90 (2 шт.), ул. Дружбы, 98 (1 шт.), ул. Дружбы,101б (1 шт.), ул. Дружбы,107  (1 шт.), ул. Дружбы, 109 (1 шт.), ул. Дружбы, 123 (1 шт.), ул. Дружбы, 125 (1 шт.), ул.  Дружбы, 134а (1 шт.), пересечение ул. Красноармейской – пер. Бригадный (3 шт.), пер.  Бригадный, 48 (2 шт.), пер. Бригадный, 18 (1 шт.), пер. Бригадный, 16 (1 шт.), пер.  Бригадный, 10 (1 шт.), пер. Бригадный, 4 (1 шт.), пер. Бригадный, 2 (1 шт.); пересечение  пер. Бригадный – ул. 302 Стрелковой Дивизии (3 шт.), пересечение ул. Совхозной – пер.  Бригадный (1 шт.); произвести работы по установке стальных футляров при пропуске  труб через стены колодцев на всей водопроводной сети от пер. Мостового по ул.  Основания и ул. Дружбы, по пер. Бригадный от ул. Дружбы до ул. Энергетическая  протяженностью 4180 м в п. Зимовники, Зимовниковского района, Ростовской области;  произвести герметизацию трубопроводов проходящих через стенки колодцев на всей  водопроводной сети от пер. Мостового по ул. Основания и ул. Дружбы, по пер.  Бригадный от ул. Дружбы до ул. Энергетическая протяженностью 4180 м в п. Зимовники,  Зимовниковского района, Ростовской области; предоставить документы, на основании  которых было проведена замена бетона марки F75 по морозостойкости на марку бетона по  морозостойкости F100; выполнить наружную гидроизоляцию конструкций отдельных  водопроводных колодцев; представить документ о качестве на песок, применяемый при  устройстве основания под водопроводную трубу; предоставить исполнительную  документацию ГНБ по прокладке водопровода под существующими асфальтовыми  дорогами.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торгово-Строительная  компания «Артстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход бюджета  Российской Федерации 6 000 руб. государственной пошлины.  

 Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

 Решение может быть обжаловано через суд, вынесший решение, в арбитражный  суд апелляционной инстанции в течение месяца с даты принятия решения, а также в  арбитражный суд кассационной инстанции в течение двух месяцев с даты вступления  решения по делу в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал  в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.М. Брагина