Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-109823/2018

22 марта 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  07 марта 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  22 марта 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Индивидуальный предприниматель Елина Елена Евгеньевна (адрес:  Россия 194295, Санкт-Петербург, пр.Просвещения д.33,к.1,пом.9Н, ОГРН:  );

ответчик: САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬ" (адрес:  Россия 193231, Санкт-Петербург, пр.Товарищеский д.28,к.1,кв.176; Россия 188860, п ЛЕЙПЯСУО, ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл ВЫБОРГСКИЙ р-н, 0, ОГРН:  1034700882655; 1034700882655);

о взыскании 534489.12

при участии

- от истца: ФИО3 выписка из ЕГРЮЛ, 

- от ответчика: ФИО4 по доверенности от 30.08.18,

установил:

ИП ФИО2 обратилась с иском о взыскании с СНТ "СТРОИТЕЛЬ" 400 000 руб. 00 коп. задолженности по оплате выполненных работ и 133 224 руб. 55 коп. пеней за просрочку платежа на основании договора №13 от 22.07.16. 

Ответчик иск отклонил и предъявил встречное исковое заявление, который к рассмотрению не принят и возращен заявителю.

Определением от 06.11.18 суд перешел из упрощенного в общий порядок искового производства.

Судом установлено:

Между сторонами был заключен договор строительного подряда №13 от 22.07.16.

Согласно п.1.1 договора подрядчик – истец обязался выполнить строительно-монтажные работы на объекте по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО "Гончаровское сельское поселение", ст. Лейпясуо, СНТ "Стротиель", а заказчик – ответчик обязался принять результат работ и уплатить предусмотренную договором цену.

Общая стоимость работ составляет 2 218 236 руб. 12 коп.

Истец выполнил работы по договору в полном объеме, что подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ формы КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. Оплата ответчиком произведена частично.

В настоящее время задолженность ответчика по оплате выполненных работ составляет 400 000 руб. 00 коп., что подтверждается подписанным сторонами актом сверки расчетов.

В соответствии с п.6.5 договора за задержку расчетов свыше пяти дней предусмотрены пени в размере 0,02% от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости работ по договору.

Согласно расчету истца неустойка составляет 133 224 руб. 55 коп. 

Расчет неустойки проверен судом и признан правильным.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по государственной пошлине на ответчика.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с садоводческого некоммерческого товарищества "СТРОИТЕЛЬ" в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2 533 224 руб. 55 коп., из них: 400 000 руб. 00 коп. основного долга и 133 224 руб. 55 коп. пеней, а также 13 690 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Встречный иск возвратить заявителю.

Выдать садоводческому некоммерческому товариществу "СТРОИТЕЛЬ" справку на возврат государственной пошлины по встречному иску в размере 6 000 руб. 00 коп., уплаченную по платежным поручениям №148 от 07.11.18 и №43 от 06.03.19.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.