Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения

22 июля 2019 годаДело № А56-58271/2019

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Константинова Е.В.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА" (адрес:  Россия 191069, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул САДОВАЯ 18, ОГРН:  1027809256672);

к ООО "Архитектурная мастерская" (адрес:  Россия 191023, г Санкт-Петербург, г Санкт-Петербург, наб Реки Фонтанки 59/литер В, ОГРН:  1077847425358);

о взыскании неустойки в размере 48.620 руб. 77 коп., а также 2.000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

( 25 сентября 2018 г. между федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская национальная библиотека» (далее -Учреждение) и Обществом с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская» (далее - ООО «Архитектурная мастерская») был заключен государственный контракт № 108/18-ЭА на оказание услуг по разработке паспортов фасадов зданий РНБ, по адресам: 

<

...> в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оказываемым услугам Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), в порядке и на условиях предусмотренных контрактом.

Стоимость услуг по контракту определена в п. 3.1. к контракту и составляет 399 513 (Триста девяносто девять тысяч пятьсот тринадцать) руб. 25 коп.

В соответствии с п. 2.1. контракта срок оказания услуг по контракту составляет 120 (сто двадцать) дней с момента заключения контракта, соответственно в срок до 22 января 2019 г.

В соответствии с п/п. 4.1.1 п. 4.1. ООО «Архитектурная мастерская» обязалось оказать услуги надлежащим образом, в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к контракту), законодательством и нормативными документами Российской Федерации и условиями Контракта.

4 октября 2018 г. в соответствии с Актом приема передачи документации для проектирования по Контракту от 25.09.2018 № 108/18-ЭА в ООО «Архитектурная мастерская» были переданы документы Учреждения.

Таким образом, общая сумма неустойки по Контракту от 25 сентября 2018 г. № 108/18-ЭА составляет 48.620 руб. 77 коп.

Документы, представленные Истом, приобщены судом к материалам дела.

руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

решил:

Взыскать с  ООО "Архитектурная мастерская" в пользу  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА" неустойку в размере 48.620 руб. 77 коп., а также 2.000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Исполнительные  листы  выдать  в  соответствии  со  ст. 319  Арбитражного  процессуального  кодекса  Российской  Федерации.     

Решение

 подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья Константинова Е.В.