1165/2022-411197(1) 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 13 декабря 2022 года 

по делу А33-34347/2019 Красноярск

«13» декабря 2022 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Стройтехникс» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в течение шести месяцев с момента вступления  решения суда в законную силу и при наличия устойчивой положительной температуры  воздуха в г.Красноярске, в целях устранения выявленных строительных недостатков работ и  приведения объекта, расположенного по адресу: 

<

...> (пом. 98),  в состояние, позволяющее эксплуатацию его по прямому назначению, выполнить  следующие работы на указанном объекте в следующем объеме:  

- разобрать жестяные фасонные элементы парапета общей длиной 39м; - разобрать кровельное покрытие из наплавляемого материала общей площадью 400м2; 

- разобрать примыкание рулонных материалов к стенам и парапетам высотой' 600мм  общей длиной 95м;  

- разобрать стяжку общей площадью 400м2; 

- произвести армирование цементно-растворной стяжки объемом 0,80598т;  

- произвести устройство цементно-растворной стяжки общей площадью 400м2 с  обеспечением уклона, исключающего скапливание влаги от атмосферных осадков на  поверхности покрытия;  

- произвести устройство кровли из наплавляемого материала (2 слоя) общей площадью  400м2;  

- произвести устройство примыкания рулонных материалов к стенам и парапетам  высотой 600мм общей длиной 95м;  

- произвести устройство жестяных фасонных элементов парапета общей площадью  31,2м2.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройтехникс» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу муниципального бюджетного  учреждения культуры «Централизованная библиотечная система для детей имени Н.  Островского» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) 100 000 руб.  судебных расходов по оплате экспертизы; взыскать в доход федерального бюджета  

6 000 руб. государственной пошлины.  В удовлетворении иска в остальной части отказать. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья А.А. Горбатова