АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ Театральный переулок, дом 10, г. Биробиджан, Еврейская автономная область, 679016 

E-mail: info@eao.arbitr.ru, сайт: http://eao.arbitr.ru, тел./факс: (42622) 2-37-98 Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  резолютивная часть

Дело № А16-2756/2018

г. Биробиджан

02 декабря 2019 года

Арбитражный суд Еврейской автономной области в составе: судьи Нехамкиной А. А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению администрации  Николаевского городского поселения Смидовичского муниципального района  Еврейской автономной области (пос. Николаевка Смидовичского района  Еврейской автономной области, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Хабаровскдорснаб" (г. Хабаровск  Хабаровского края, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об обязании выполнить в течение трех месяцев с момента вступления решения суда  в законную силу работы по устранению дефектов, выявленных в рамках  гарантийного срока, предусмотренного муниципальным контрактом от 28.12.2015   № 43, а именно:  

- на водопропускном сооружении ВПС № 1 на ПК0+20 восстановить сопряжение  железобетонного кольца трубы и оголовка железобетонной трубы ВПС-1;  

- на водопропускном сооружении ВПС № 2 на ПК-9 восстановить сопряжение  железобетонного кольца трубы и оголовка железобетонной трубы ВПС-2;  

- на водопропускном сооружении ВПС № 3 на ПК-13+70 восстановить сопряжение  железобетонного кольца трубы и оголовка железобетонной трубы ВПС-3;  

- на водопропускном сооружении ВПС № 4 на ПК-52+60 восстановить сопряжение  железобетонного кольца трубы и оголовка железобетонной трубы ВПС-4;  

- на водопропускном сооружении ВПС № 5 на ПК-62+20 восстановить тело дамбы  под лестницей, ведущей к затворному механизму, засыпать воронку шириной 160  см. рядом с лестницей, устранить причину возникновения воронки;  

- устранить ручейковую эрозию (размывы) на всем участке дамбы, в том числе  крупные из них на участке от ПК-52 до ПК-53, один размыв шириной 50 см; от ПК- 56 до ПК-59 3 штуки, 1 шириной 110 см, 1 шириной 80 см, 1 шириной 65 см; от  ПК-66 до ПК-68 3 штуки, 1 шириной 90 см, 1 шириной 100 см, 1 шириной 60 см;  

- на участке дамбы в районе ПК08-ПК-16, ПК-41, ПК-62 восстановить проектную  высоту гребня дамбы;  

- вынести в натуру недостающий линейный пикетаж, о взыскании штрафа в размере 1 102 500 рублей, 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета  спора, на стороне ответчика - общество с ограниченной ответственностью  «Гидростройпроект» (г. Хабаровск Хабаровского края, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>),  

при участии представителей: от истца – ФИО2 (на основании  доверенности № 4 от 20.06.2019); от ответчика – ФИО3 (на основании  доверенности от 23.01.2018),  

руководствуясь статьями 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований администрации Николаевского городского  поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области  отказать.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  течение месяца с даты его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд, а  

также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд  Дальневосточного округа при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды  апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Еврейской  автономной области.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или  кассационного производства информацию о времени, месте и результатах  рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Шестого  арбитражного апелляционного суда http://6aas.arbitr.ru или Арбитражного суда  Дальневосточного округа http://fasdvo.arbitr.ru.  

Судья А.А. Нехамкина  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 15.02.2019 3:11:00Кому выдана Нехамкина Анастасия Александровна