АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-11061/2020

г. Ярославль

21 апреля 2021 года

Резолютивная часть решения принята  14 апреля 2021 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Танцевой В.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление  Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (ИНН   

<

***>, ОГРН   

<

***>)

к  ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РЖДСТРОЙ" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

о   взыскании   337885.06  руб.

при участии:

от истца – ФИО2 доверенность от 12.01.2021 , диплом 

от ответчика – не явились

установил:

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" обратилось с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом "РЖДстрой" о взыскании 337 885,06 руб. неустойки.

Истец поддерживает исковые требования в полном объеме.

В судебном заседании в порядке ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса РФ был объявлен перерыв в течение дня до 15 час. 50 мин.

После перерыва судебное заседание продолжено без участия сторон.

Ответчик в судебное заседание представителя не направил, ранее в судебном заседании представитель ответчика против иска возражала по основаниям, изложенным в письменном отзыве и возражениях на дополнение истца, заявил о применении ст. 333 Гражданского кодекса российской Федерации.

Исследовав письменные материалы дела, суд установил следующее.

03.04.2019 между открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «РЖДстрой» (подрядчик) подписан договор № 528/ОАЭ-ЦДИ ЦП/19/2/1 на выполнение работ по капитальному ремонту (далее – договор), в соответствии с п. п. 1.1. и 1.2. договора в соответствии с протоколом конкурсной комиссии от 21 марта 2019 года № 56, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту железнодорожного переезда путевого хозяйства (далее - Объект) Северной дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» (далее - Получатель), именуемые в дальнейшем «Работы».

Перечень Объектов капитального ремонта определен в приложении № 1 к настоящему Договору. В рамках настоящего договора подрядчик выполняет комплекс работ, включая производимые в ходе капитального ремонта основных средств ремонтно-монтажные работы, комплектация материалами, изделиями, конструкциями, оборудованием в полном объеме. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. настоящего договора в соответствии с приложением № 3, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

В соответствии с п. 1.3. Договора срок начала выполнения работ – 01.06.2019. Срок окончания выполнения работ – 30.11.2019.Сроки выполнения работ указаны в календарном плане, являющимся приложением № 2 к настоящему договору.  

Разделом 3 Договора определены права и обязанности сторон, к которым, помимо прочего, отнесены обязанности подрядчика по обеспечению согласования с получателем порядка ведения работ на объекте и обеспечение соблюдения его на строительной площадке; обеспечение в ходе проведения работ выполнения требований, установленных положением об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД»; немедленного извещения получателя (заказчика) о приостановлении работ до получении от него указаний при обнаружении: возможных неблагоприятных последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ; иных, не зависящих от подрядчика обстоятельств, влияющих на результаты работ либо создающих невозможность их завершения в срок (п. 3.1.4, 3.1.6, 3.1.15).

В соответствии с п. 3.1.21. подрядчик обязан иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для выполнения Работ по настоящему Договору.

Разделом 16 Договора установлена ответственность сторон за не исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. 

Согласно п. 16.2. Договора за нарушение сроков сдачи работ (сдачи объекта) подрядчик уплачивает получателю неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ по объекту за каждый день просрочки. Если просрочка составит свыше 30 календарных дней подрядчик уплачивает неустойку в размере 2% от стоимости работ по соответствующему объекту за каждые последующие 10 (календарных) дней до фактического исполнения обязательства. 

Срок действия договора установлен с даты его подписания и по 28.02.2020 (пункт 20.4 договора).

24.12.2019 по результатам комиссионной проверки выполнения работ по капитальному ремонту железнодорожного переезда 679 км. ст. Вохтога, включенный в перечень объектов по капитальному ремонту по договору № 528/ОАЭ-ЦДИ ЦП/19/2/1, установлено, что объект требует капитального ремонта. Признаков проведения либо начала проведения работ по капитальному ремонту железнодорожного переезда не выявлено. 

Ввиду невыполнения ООО «Торговый дом «РЖДстрой» возложенных на него обязательств, ОАО «РЖД» начислило неустойку последнему за не выполнение работ в срок, установленный договором. 

24.12.2019 претензией ОАО «РЖД» потребовало от ООО «Торговый дом «РЖДстрой» уплаты начисленной неустойки.

10.02.2020 требованием № 874/СевДИ заказчик (ОАО "РЖД", бенефициар) обратился с требованием к АКБ "Абсолют банк" (публичное акционерное общество, гарант) с требованием об уплате платежа по банковской гарантии.

Платежным поручением № 984009 от 27.02.2020 года гарант произвел выплату бенефициару в размере 76 846 руб. 98 коп.

В связи с образовавшейся задолженностью истец обратился с заявлением о выдаче судебного приказа.

Судебный приказ выдан 08.06.2020.

Определением суда от 18.06.2020 судебный приказ отменен.

Неудовлетворение требований истца в добровольном порядке, явилось основанием для обращением с иском в суд.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, суд считает требования о взыскании неустойки подлежащими удовлетворению частично в силу следующего.

В силу ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Статьей 71 названного Кодекса предусмотрено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 ГК РФ).

Согласно статье 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

На основании статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Как установлено материалами дела, по условиям договора, ответчик должен был выполнить спорные работы в срок до 30.11.2019.

Результат работ к указанному сроку не сдан, доказательств свидетельствующих об обратном в материалы дела не представлено.

Таким образом, ответчиком допущена просрочка выполненных работ. 

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором (статья 329 ГК РФ).

В силу статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Довод ответчика относительно надлежащего извещения о невозможности проведения работ, и, как следствие, отсутствие оснований для начисления неустойки, является необоснованным ввиду следующего.

Согласно пункту 1 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства (пункт 2 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Доказательств обоснованности приостановления работ ответчиком не представлено.

Доводы о невозможности приступить к выполнению работ отклонены судом как необоснованные и противоречащие материалам дела.

Ответчиком заявлено  о несоразмерности неустойки.

В силу п. 1 ст. 333 Гражданского кодекса РФ суд вправе уменьшить размер неустойки, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 71).

Из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в определениях от 22.04.2004 N 154-О и от 21.12.2000 N 263-О, следует, что при применении статьи 333 ГК РФ суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности (неустойкой) и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела, в соответствии с требованиями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу п. 73 постановления Пленума № 7 бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика.

Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

Неустойка как способ обеспечения обязательства должна компенсировать кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения должником своего обязательства перед кредитором.

Рассмотрев ходатайство о снижении неустойки, проанализировав собранные по делу доказательства, руководствуясь принципами разумности и соразмерности, соблюдая баланс интересов сторон, суд считает возможным уменьшить размер неустойки, и определить ее размер из расчета 0,1% за каждый день просрочки с учетом вычета банковской гарантии в размере 178 809,77 руб. 

Принимая во внимание установленные сторонами в договоре сроки выполнения работ по 30.11.2019, учитывая фактические обстоятельства дела, доводы ответчика о неприменении штрафных санкций ввиду п. 476.2 Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ОАО "РЖД" судом не принимаются как необоснованные.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (ч.1 ст.177 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РЖДСТРОЙ"  (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу  Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН  

<

***>; ОГРН   

<

***>) 178809,77 руб. неустойки, 9758 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья

Танцева В.А.