АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru

E-mail: info@crimea.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-17885/2018

12 ноября 2019 года

город  Симферополь

Резолютивная часть решения объявлена 08 ноября 2019года.

Полный текст решения изготовлен 12 ноября 2019года.

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гаврилюк Марии Павловны, при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Антарес» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

при участии в деле в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора - Федерального государственного бюджетное учреждение «Тренировочный центр спортивного подготовки сборных команд России «Крымский»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о признании договора недействительным и применения последствий недействительности, 

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Антарес»

к обществу с ограниченной ответственностью «Альтернатива»

о признании договора действующим в редакции,

при участии:

от истца (по первоначальному иску)- не явились;

от ответчика (по первоначальному иску) - ФИО2, представитель по доверенности № б/н от 21.-08.2019,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива» обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Антарес», согласно которого просит суд признать договор субподряда недействительным и применить последствия недействительности.

Исковые требования мотивированы тем, что договор субподряда подписан неустановленным лицом.

Ответчик исковые требования не признал, обратился со встречным исковым заявление к обществу с ограниченной ответственностью «Альтернатива» о признании Договора субподряда № 8/А от 07.11.2016 г., подписанный между ООО «Антарес» и ООО «Альтернатива» в представленной редакции.

Рассмотрев материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании статьи 71 АПК РФ, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований по первоначальному исковому заявлению и удовлетворению встречных исковых требований ввиду следующего:

Из материалов дела усматривается, что между Федеральным государственным бюджетным  учреждением «Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» и обществом с ограниченной ответственностью «Антарес» был заключен Государственный Контракт № 547001 от 25 октября 2016 года на выполнение работ по Капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за ФГБУ «ТЦСКР «Крымский», находящейся по адресу: 298510, 

<

...>.

В порядке исполнения п. 4.3.15 основного контракта №547001 от 25.10.2016 г., между обществом с ограниченной ответственностью «Антарес» и обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» заключен договор субподряда № 121 от 07.11.2016 г., Договор субподряда №8/А от 07.11.2016 г.

27.11.2017 г. ООО «Альтернатива» письмом исх. №138 сообщает, что необходимо считать записи в документах вместо договора № 121 от 27.11.2016 года договор №8/А от 07.11.2016 года не предоставляется возможных на основании того, что поскольку подписан уполномоченным лицом.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с п. 1 ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Пунктом 3 ст. 420 ГК РФ установлено, что к обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 – 419), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе.

В соответствии с пунктом 1 ст. 425 ГК РФ договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

Ввиду отсутствия в гражданском законодательстве (в том числе в ГК РФ) отдельного нормативно-правового регулирования субподряда к правоотношениям сторон по договору строительного субподряда применяются правила, установленные законодательством для договоров строительного подряда с учетом особенностей, установленных Главой 37 ГК РФ, иными нормативными актами с учетом характера гражданско-правовых обязательств участников данных правоотношений. 

В силу изложенного при заключении договора строительного субподряда подрядчик выступает в качестве заказчика, а субподрядчик – в качестве подрядчика как лицо, фактически выполняющее порученные ему строительные работы.

В силу ст. 706 ГК РФ если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 2 ст. 702 ГК РФ  к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Согласно п. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Материалами дела подтверждается, а именно: КС-3 №1 от 31.11.2016 г., КС-2 № 1 от 07.11.2016 г., КС-3 №5 от 27.03.2017 г., КС-2 №5 от 27.03.2017 г., КС-3 №6 от 14.04.2017 г., КС-2 №6 от 14.04.2017 г., КС-3 №7 от 13.10.2017 г., КС-2 №7 от 13.10.2017 г., что работы, предусмотренные договором субподряда № 8/А от 07.11.2016 г., были выполнялись субподрядчиком и были приняты заказчиком без замечаний, что подтверждается подписями и печатями сторон.

Суд критично оценивает довод истца о том, что договор субподряда не был подписан со стороны субподрядчика, в виду следующего:

В соответствии с частью 1 статьи 174 ГК РФ, если полномочия лица на совершение сделки ограничены договором или положением о филиале или представительстве юридического лица либо полномочия действующего от имени юридического лица без доверенности органа юридического лица ограничены учредительными документами юридического лица или иными регулирующими его деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается сделка, и при ее совершении такое лицо или такой орган вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения, лишь в случаях, когда доказано, что другая сторона сделки знала или должна была знать об этих ограничениях.

Ответчиком не представлено доказательств, что ответчик был осведомлен о том, что договор подписывался не директором ФИО3, из обстоятельств заключения и исполнения сделки, а именно принятие работ, поступление аванса и оплата работ, истец был вправе рассчитывать на добросовестность сторон по сделке.

В соответствии с частью 5 статьи 166 ГК РФ заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в частности если его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки.

 В пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" обращено внимание судов на то, что оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное. Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (п. 2 ст. 10 ГК РФ).

Пунктом 3 ст. 432 ГК РФ предусмотрено, что сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1).

Учитывая изложенное, суд не находит оснований для удовлетворения первоначальных исковых требований.

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд находит встречные исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что между сторонами возникли правоотношения по договору подряда, которые регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно § 3 указанной главы, строительный подряд.

В соответствии с п. п. 1, 2 ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

В договоре подряда также указываются начальный и конечный сроки выполнения работы, а по согласованию между сторонами могут быть предусмотрены сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (п. 1 ст. 708 названного Кодекса).

По смыслу приведенных правовых норм существенными условиями договора подряда являются предмет договора, определяющий, в том числе виды, содержание и объемы работ, конечный срок выполнения работ, их стоимость.

Согласно правовой позиции, сформулированной Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 18.05.2010 N 1404/10, требования к существенным условиям договора устанавливаются законодателем с целью недопущения неопределенности в правоотношениях сторон и для предупреждения разногласий относительно исполнения договора. Если одна сторона договора совершает действия по исполнению договора, а другая сторона принимает их без каких-либо возражений, то неопределенность между сторонами в отношении достигнутых договоренностей отсутствует, в таком случае соответствующие условия договора должны считаться согласованными, а договор - заключенным.

При этом в случае наличия спора о заключенности договора суд должен оценивать обстоятельства и доказательства в их совокупности и взаимосвязи в пользу сохранения, а не аннулирования обязательства, а также исходя из презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.02.2014 N 165 "Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными").

Из материалов дела усматривается, что сторонами договор субподряда№ 8/А от 07.11.2016 г. исполнялся, работы по последнему были сданы субподрядчиком и приняты заказчиком без замечаний, что подтверждается подписями и печатями сторон в отчетной документации, а именно: КС-3 №1 от 31.11.2016 г., КС-2 № 1 от 07.11.2016 г., КС-3 №5 от 27.03.2017 г., КС-2 №5 от 27.03.2017 г., КС-3 №6 от 14.04.2017 г., КС-2 №6 от 14.04.2017 г., КС-3 №7 от 13.10.2017 г., КС-2 №7 от 13.10.2017 г. Более того, выполненные работы подрядчиком, отраженные в КС-2, КС-3, соответствуют работ, предусмотренным в техническом задании к договору субподряда № 8/А от 07.11.2016 г.

Таким образом, из материалов дела не усматривается, что в ходе исполнения договора у сторон имелся спор относительно заключенности договора (наличие каких-либо возражений относительно заключенности договора до рассмотрения соответствующего иска судом). Напротив, стороны сочли возможным приступить к его исполнению. 

Совокупность указанных обстоятельств не дает оснований считать исполняемый сторонами договор незаключенным, в связи с чем суд приходит к выводу о заключенности договора.

Суд также обращает внимание на то, что письмо исх.№02/02-3 от 02.02.2017 г. о  подписании договора субподряда № 8/А от 07.11.2016 г. неуполномоченным лицом, направлено в адрес заказчика после окончания срока выполнения работ (20.12.2016 г.), что может свидетельствовать о недобросовестности  

Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

в удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Альтернатива» к обществу с ограниченной ответственностью «Антарес» о признании договора недействительным и применения последствий недействительности - отказать. 

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Антарес» к обществу с ограниченной ответственностью «Альтернатива» о признании договора действующим в редакции - удовлетворить.

Признать договор субподряда№ 8/А от 07.11.2016 г., подписанный между ООО «Альтернати» и ООО «Антарес», заключенным в следующей редакции:

 

Договор субподряда № 8/А

г. Алушта                                                                                                       «07» ноября 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Антарес» (ООО «Антарес»), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик» в лице директора ФИО4, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (ООО «Альтернатива»), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Генерального директор ФИО3, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор субподряда (далее - Договор) в целях исполнения обязательств по муниципальному контракту № 547001 от 25.10.2016      г., заключенного между Федеральным государственным бюджетным учреждением «Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» (ФГБУ «ТЦСКР «Крымский») и ООО «Антарес» (Подрядчик) о нижеследующем:

1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.   Субподрядчик обязуется по заданию Генерального подрядчика в соответствии с настоящим Договором в установленный Договором срок выполнить работы по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за ФГБУ «ТЦСКР «Крымский» (далее - Работы), находящихся по адресу: 298510, 

<

...> (далее - Объекты).

1.2.   Работы, указанные, в п. 1.1. настоящего Договора, выполняются Субподрядчиком в соответствии с техническим заданием, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, определяющими объём, содержание работ, а также условиями настоящего Договора, определяющими цену выполнения работ, сроки выполнения работ и иные обязательства Сторон.

2.    СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1.     Сроки выполнения работ:

С даты подписания акта приема-передачи Объектов для выполнения работ до 20.12.2016 г. Акт приема-передачи Объектов для выполнения работ должен быть подписан Генеральный подрядчиком и Субподрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора.

2.2.   Работы осуществляются поэтапно. Сроки каждого этапа выполнения работ определяются Графиком производства работ, предоставляемым Субподрядчиком для согласования Генеральному подрядчику не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора.

2.3.   Субподрядчик вправе выполнить работы досрочно. При этом Генеральный подрядчик в случае выполнения Субподрядчиком Работ в полном объеме, вправе принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.    ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.  Цена Договора составляет 30 101 205 (Тридцать миллионов сто одна тысяча двести пять) рублей 50 копеек, в т. ч. НДС 18% - 4 591 709 (Четыре миллиона пятьсот девяносто одна тысяча семьсот девять) рублей 31 копейка.

3.2.  В стоимость Договора включены оплата транспортных и накладных расходов, уплата налогов, сборов, таможенных пошлин, страховые премии и другие обязательные платежи и возможные затраты Субподрядчика. Авансовый платеж не предусмотрен.

3.3.  Оплата осуществляется поэтапно за фактически выполненные работы в соответствии с Графиком производства работ, в течение 20 (двадцати) календарных дней на основании подписанных Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), составленных на основании локальных сметных расчетов, выставленного счета и счет-фактуры.

Окончательный расчет производится в течение 20 (двадцати) календарных дней на основании подписанных Генеральный подрядчиком и Субподрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), составленных на основании локальных сметных расчетов, акта приемки Объектов в эксплуатацию, выставленного счета и счет-фактуры.

3.4.  Днем оплаты считается день принятия к исполнению банком Генеральный подрядчика платежного поручения о перечислении денежных средств на расчетный счет Субподрядчика.

3.5.  Работы, выполненные Субподрядчиком с отклонениями от требований нормативноправовых актов, сметной документации или иными недостатками, не подлежат оплате Генеральным подрядчиком до устранения Субподрядчиком обнаруженных недостатков.

3.6.    Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

4.    ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.      Генеральный подрядчик обязан:

4.1.1.     Передать Субподрядчику Объекты и утвержденную сметную документацию.

4.1.2.    Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Договором цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

4.1.3.    При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего''

Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ или иных недостатков, немедленно заявить об этом Субподрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.4.    Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.5.    Оплачивать выполненные Субподрядчиком работы на условиях настоящего Договора.

4.1.6.    По окончании выполнения Субподрядчиком работ осуществить приёмку их результата в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

4.2.      Генеральный подрядчик вправе: 

4.2.1.    Требовать надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору.

4.2.2.    Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчётных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором.

4.2.3.    Не оплачивать работы, не соответствующие условиям настоящего Договора.

4.2.4.    В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

4.2.5.    Провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. Если Генеральный подрядчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Генеральный подрядчиком только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Генеральный подрядчика от исполнения Договора.

4.3. Субподрядчик обязан:

4.3.1 Принять Объекты и подписать акт приема-передачи Объектов не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора, предоставить на утверждение Генеральный подрядчику ППР (Проект производства работ) не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора.

Выполнить работы, определенные в п. 1.1. настоящего Договора в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), настоящим Договором и действующим законодательством, в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

4.3.2.         Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов, Локально-сметного расчета, сметной документации, стандартов, строительных норм и правил и иных действующих на территории Российской Федерации нормативно-правовых актов.

Все работы должны быть выполнены Субподрядчиком в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами: СанПиН, СНиП, ППБ, ПТЭЭУ, ГОСТ и т.д.

4.3.3.         В случаях, установленных нормативными правовыми актами, вести работы по настоящему Договору при наличии разрешений на работы, выдаваемых уполномоченными государственными органами.

4.3.4.       Нести ответственность за соблюдение своим персоналом установленных правил техники безопасности, пожарной и экологической безопасности, санитарных и строительных норм и правил.

4.3.5.         По первому требованию Генерального подрядчика в случае, если работы по настоящему Договору выполнены с нарушением требований настоящего Договора , немедленно с момента получения извещения Генеральный подрядчика устранить указанные недостатки своими силами и за свой счет в срок, установленный Генеральный подрядчиком и согласованный с Субподрядчиком .

4.3.6.       При выполнении работ по монтажу и ремонту пожарной сигнализации в случае, если Субподрядчик не обладает лицензией на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, привлекать субподрядные организации, обладающие указанной лицензией. Копия такой лицензии передается Генеральному подрядчику за 5 (пять) календарных дней до начала проведения работ по монтажу и ремонту пожарной сигнализации.

4.3.7.       Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их разгрузку и складирование.

4.3.8.          Гарантировать качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов, лицензий и других документов, удостоверяющих качество установленного оборудования и по требованию Генерального подрядчика предоставить ему эти документы.

4.3.9.          Содержать рабочую площадку и прилегающие к ней участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку. Обеспечивать сохранность Объектов, материалов, комплектующих и оборудования, находящихся на Объектах, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе. С момента передачи Объектов в работу до передачи Объектов в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения Объектов.

4.3.10.       Обеспечивать Генеральный подрядчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объектов, представлять по их требованию отчёты о ходе выполнения работ.

4.3.11.      Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Генеральный подрядчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Генеральный подрядчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Договора.

4.3.12.            Привлекать к исполнению работ, указанных в Договоре, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных нормативными правовыми актами в области строительства.

4.3.13.       Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

4.3.14.       Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами и настоящим Договором.

4.4. Субподрядчик вправе:

4.4.1.       Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Договору от Генерального подрядчика.

4.4.2.          Требовать своевременной оплаты по настоящему Договору в случае полного исполнения обязательств по настоящему Договору.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1.  Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами и иным законодательством Российской Федерации при наличии сертификатов, технических паспортов и иных документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования.

5.2.  Субподрядчик не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента окончания этапов работ, установленных согласованным с Генеральный подрядчиком Графиком производства работ, направляет Генеральный подрядчику письменное извещение о готовности результата выполненной работы к приемке и представляет:

-  акт о приемке выполненных работ, составленный по форме КС-2;

-  справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме КС-3;

-  счет и счет-фактуру;

-  исполнительную документацию (акты скрытых работ; сертификаты качества (с печатью подрядной организации); паспорта на оборудование; перечень передаваемой документации).

5.3.   Генеральный подрядчик в течение 5 рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах (в том числе объемы работ и затрат), подписывает их и передает 1 экземпляр формы № КС-3 и 1 экземпляр формы № КС-2 Субподрядчику.

В процессе приемки проверяется соответствие результата выполненной работы условиям Договора, обязательным требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации в отношении работ (СНиП, СанПиН и т.д.) и требованиям иных действующих нормативных актов и документов в отношении работ, если соблюдение таких актов и документов прямо предусмотрено Договором.

В случае выявления Генеральный подрядчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Договором, Генеральный подрядчик в течение суток при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Субподрядчика и не подписывает документы до внесения Субподрядчиком в них соответствующих изменений.

В случае выявления недостатков в выполненных работах на отдельных этапах

исполнения настоящего Договора, фиксация и устранение таких недостатков производится в соответствии с требованиями п. 5.5. Договора.

5.4.  Сдача-приемка результата работ осуществляется в соответствии с нормативноправовыми и нормативно-техническими актами Российской Федерации, регулирующими указанные работы, путем осмотра объекта, изучения представленных документов, определения соответствия выполненных работ требованиям нормативных документов.

При наличии замечаний к результатам отдельных этапов исполнения Договора и (или) результата выполненной работы составляется перечень дефектов (недоделок) и составляется рекламационный акт, в котором Сторонами согласовывается срок для устранения дефектов (недоделок).

При отказе (уклонении) Субподрядчика от подписания рекламационного акта, - Генеральным подрядчиком в нем делается соответствующая отметка об этом.

5.5.  Субподрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта, на котором производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет полную материальную ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

5.6.  Генеральный подрядчик вправе отказаться от приемки результатов отдельного этапа исполнения Договора и (или) результата выполненной работы в случае обнаружения недостатков, которые исключают его использование по назначению и не могут быть устранены.

5.7.  Риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполнения работ, а также бремя их содержания переходят от Субподрядчика к Генеральный подрядчику с момента оформления в установленном порядке акта о приемке выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки результата работ недостатков - с момента устранения Субподрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному Сторонами или Г енеральный подрядчиком рекламационному акту.

5.8.  Для проверки предоставленных Субподрядчиком результатов отдельного этапа исполнения Договора и (или) результата выполненной работы в части их соответствия условиям Договора Генеральный подрядчик проводит экспертизу.

Экспертиза результатов отдельного этапа исполнения Договора и (или) результата выполненной работы может проводиться Генеральным подрядчиком своими силами и/или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Генеральный подрядчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненной работы в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

В случае привлечения Генеральным подрядчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора и (или) результата выполненной работы Приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.9.  Для проверки предоставленных Субподрядчиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Генеральный подрядчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Генеральным подрядчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации, на основании договоров, заключенных в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

В случае, если экспертиза докажет вину Субподрядчика, расходы по экспертизе Субподрядчик перечисляет на расчетный счет Генеральный подрядчика в течение 30 календарных дней.

Условия и порядок проведения экспертизы определяются локальными актами Генеральный подрядчика.

5.10.       Дополнительно к исполнительной документации Субподрядчик после выполнения работ передает Генеральный подрядчику:

-  журнал учета выполненных работ (КС-6а);

-  акт пусконаладочных работ;

-  акт освидетельствования скрытых работ - 1 экз.;

-  паспорта и сертификаты на используемый товар (материалы, изделия, детали, комплектующие и оборудование)- 1 экз.

Приемка результата выполненной работы оформляется документом о приемке - акт о приемке в эксплуатацию Приемочной комиссией законченных капитальным ремонтом Объектов, который подписывается всеми членами Приемочной комиссии и утверждается

Генеральный подрядчиком, либо Субподрядчику в тот же срок Генеральный подрядчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

Генеральный подрядчик вправе не отказывать в приемке результата выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо этой работы условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой работы и устранено Субподрядчиком.

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1.   Качество работ, являющихся предметом Договора, а также используемых материалов (комплектующих и оборудования) должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов, Техническому заданию, сметной документации, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории Российской Федерации нормативноправовым актам.

6.2.      Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в таблице характеристики товаров (материалов, изделий и конструкций), используемых при выполнении работ (Приложение №1 к Техническому заданию) и в сметной документации (Приложение №2 к Техническому заданию).

6.3.   Срок гарантийных обязательств на выполненные работы: 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию Приемочной комиссией законченных капитальным ремонтом Объектов. Объем гарантийных обязательств распространяется на все устройства, оборудование и составляет не более срока, установленного заводом - изготовителем (при условии правильной эксплуатации).

6.4.      В случае обнаружения недостатков работ в пределах гарантийного срока Субподрядчик обязан устранить указанные недостатки в установленный Генеральный подрядчиком срок и за свой счет.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Генеральный подрядчик и Субподрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.  В случае просрочки исполнения Генеральный подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральный подрядчиком обязательств, предусмотренных                                                      Договором,

Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральный подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3.  В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Генеральный подрядчик направляет Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в том числе, но не ограничиваясь:

-  за неявку для передачи рабочей документации и Объектов в срок, указанный в п.2.2. Договора;

-  за несвоевременное начало работ в срок, указанный в п. 2.1 Договора, по вине Субподрядчика;

-  за задержку устранения недостатков (дефектов) в работе, обнаруженных в процессе производства работ либо при приёмке работ;

-  за задержку конечного срока выполнения работ, указанных в пункте 2.1 Договора.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком

обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной, трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора , уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Субподрядчиком , и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена Договора ; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Субподрядчиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения Договора ; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ - размер ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента; ДП -количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП -количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату/ уплаты пени/

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.4.  За ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором (в том числе п. 4.3.15. настоящего Договора), за исключением просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, начисляется штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 5 процентов цены Договора.

7.5.  Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.

7.6.  Сторона Договора освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7.  Субподрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им в порядке и на условиях, установленных Договором, к исполнению обязательств по Договору.

7.8.  Субподрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на Объекте.

7.9.  В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору, Генеральный подрядчик вправе произвести оплату по Договору в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Субподрядчику в соответствии с условиями ответственности по Договору.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ

8.1.  Договор считается заключённым с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31.12.2016 г., а в части расчетов до полного исполнения обязательств.

8.2.  Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.3.  По соглашению Сторон Договор считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении Договора Сторонами.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1.    При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.2.    В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.        

9.3.  В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10.   ФОРС-МАЖОР

10.1.      Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами (стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия).

10.2.      Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.

10.3.      Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, то каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора . В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

11.   ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1.    Любое уведомление или извещение, которое должно быть отправлено по условиям настоящего Договора одной из Сторон другой Стороне, может быть отправлено почтой, электронной почтой, телеграфом, факсимильной связью или самостоятельно доставлено по адресам, указанным ниже.

11.2.   Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

11.2.1.      Произошло снижение цены настоящего Договора без изменения предусмотренного настоящим Договором объема выполняемых работ и иных условий настоящего Договора.

11.2.2.      По предложению Генерального подрядчика происходит увеличение либо уменьшение предусмотренного настоящим Договором объема выполняемых работ не более чем на 10 (десять) процентов.

11.2.3.      При исполнении Договора по согласованию Генерального подрядчика Субподрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

11.3.        Всякого рода изменения и дополнения к данному Договору действительны, если они совершены в письменной форме за подписями уполномоченных лиц и за печатями обеих Сторон и не противоречат нормам действующего законодательства Российской Федерации.

11.4.   Содержание данного Договора и его приложений считаются конфиденциальными и не подлежат передаче третьим лицам без обоюдного согласия Сторон.

11.5.    Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, урегулируются путём переговоров. При недостижении Сторонами согласия, спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым.

11.6.    Во всем остальном, что осталось не урегулированным настоящим Договором, Стороны, руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.7.    Стороны обязаны в течение 3 (тех) календарных дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

11.8.      К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение - Техническое задание.

1. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

 

Генеральный подрядчик: Общество с  ограниченной ответственностью «Антарес»

ООО «Антарес»

125466,, 

<

...>

ИНН/КПП 

<

***>/773301001

ОГРН 

<

***>

Южный филиал АО "Райффайзенбанк" г.

Краснодар

р/счет 

<

***>

БИК 040349556

к/счет 30101810900000000556

Тел: +7 938 450 20 45; +7 938 888 40 40

E-mail: savicom@mail.ru

Директор

______________/ФИО4/

м.п.

 

 

 

 

 

Субподрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива»

ООО «Альтернатива»

660075, 

<

...>, пом.

ИНН/КПП 

<

***>/246001001

ОГРН 

<

***>

Филиал «Сибирский» Банка ВТБ

г.Новосибирск

Р/с 

<

***>

БИК 045004788

Кор.сч 30101810850040000788

Тел,:+7 (391)266 99 62

E-mail: alternativa0672@mail.ru

Генеральный директор

______________/ ФИО3./

м.п.

 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альтернатива» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Антарес» расходы, связанные с уплатой государственной пошлины в размере 6000,00 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.                                                                     

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Судья                                                                                                            М.П. Гаврилюк