1 1077_6646596  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-32944/2022

г. Уфа

02 августа 2023 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в лице судьи Проскуряковой С.В.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

Администрации городского поселения город Белебей муниципального района  Белебеевский район Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Стройсервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

о признании недействительным (ничтожным) дополнительного соглашения № 5 от  25.11.2020г. к муниципальному контракту от 17.12.2019г. в части применения к цене  дополнительных работ аукционной уступки, применении последствий  недействительности ничтожной сделки в порядке возмещения в бюджет городского  поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики  Башкортостан суммы в размере 4 292 783 руб. 00 коп.,  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:  1) Администрация муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), 2) Министерство финансов Республики  Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Администрации городского поселения город Белебей  муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.  

Признать недействительным Приложение № 6 к муниципальному контракту от  17.12.2019 № 0101500000319002071_52859 «Сводный сметный расчет стоимости  строительства» в редакции Дополнительного соглашения от 25.11.2020 № 5 к контракту  заключенному между Администрацией городского поселения город Белебей  муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан и обществом с  ограниченной ответственностью "Стройсервис" в части включения в расчет стоимости  работ затрат по статье «Прибыль подрядчика» в размере 4 292 783 руб. 00 коп.  

Признать недействительными пункт 1.1 дополнительного соглашения от 22.09.2020   № 4 и пункт 1.2.1 дополнительного соглашения от 25.11.2020 № 5 к муниципальному  контракту от 17.12.2019 № 0101500000319002071_52859 заключенному между  

Администрацией городского поселения город Белебей муниципального района  Белебеевский район Республики Башкортостан и обществом с ограниченной  ответственностью "Стройсервис" в части увеличения цены контракта на 4 292 783 рубля  вследствие включения в сводный сметный расчет стоимости строительства затрат по  статье «Прибыль подрядчика».  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройсервис" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Администрации городского поселения город  Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) неосновательное обогащение в сумме 4 292 783 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройсервис" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в сумме 56 464 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  заявлению взыскателя.  

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины в доход  федерального бюджета выдать после вступления решения в законную силу.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через  Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской  Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или  кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или  Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья С. В. Проскурякова