ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

610007, г. Киров, ул. Хлыновская, 3,http://2aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело № А82-15877/2018

г. Киров

27 марта 2019 года

Резолютивная часть постановления объявлена 20 марта 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 марта 2019 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Горева Л.Н.,

судейМалых Е.Г., ФИО1,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО2,

без участия в судебном заседании представителей сторон,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Дельта Констракшн» и общества с ограниченной ответственностью «СК АльпСтрой»

на решение Арбитражного суда Ярославской области от 20.12.2018 по делу № А82-15877/2018, принятое судом в составе судьи Бессоновой И.Ю.,

по иску общества с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА Констракшн» (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «СК Альпстрой» (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

о   взыскании   4 054 339 рублей 94 копеек,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА Констракшн» (далее – ООО «ДЕЛЬТА Констракшн», истец, заявитель1) обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «СК  Альпстрой» (далее – ООО «СК  Альпстрой», ответчик, заявитель2) о взыскании 4 054 339 рублей 94 копеек, в том числе 1 812 268 рублей 56 копеек пени, предусмотренные пунктом 7.1 рамочного соглашения по договорам № 1,2,3,8,9,4,5,6,19,11,12,13,14,7,15,20,6-Ф, 3-Ф, 4-Ф, 394 071 рубль 38 копеек штрафа, установленного пунктом 7.2 рамочного соглашения по договорам № 19, 20, 6-Ф, 1 848 000 рублей штрафа за отсутствие отчетов предусмотренных пунктом 7.4 рамочного соглашения по договорам № 1,2,3,8,9,4,5,10,18,6,19,11,12,13,14,7,15,20,5-Ф, 6-Ф, 3-Ф, 2-Ф, 4-Ф.

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 20.12.2018 с  ООО «СК  Альпстрой» в пользу ООО «ДЕЛЬТА Констракшн» взыскано 1 686 376 рублей 65 копеек пени, 138 357 рублей 13 копеек штрафа, 23 848 в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска отказано.

ООО «ДЕЛЬТА Констракшн» с принятым решением суда не согласно, обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Ярославской области от 20.12.2018 по делу № А82-15877/2018 отменить, принять по данному делу новый судебный акт, в котором отразить все существенные фактические обстоятельства дела.

В обоснование доводов жалобы заявитель1 указывает на то, что решение суда в части взыскания с ответчика - ООО «СК Альпстрой» в пользу истца - ООО «ДЕЛЬТА Констракшн» неустойки в размере 1 686 376 рублей 65 копеек пени, 138 357 рублей 13 копеек штрафа подлежит изменению, так как решение суда в соответствующей части не является обоснованным, а выводы суда не соответствуют материалам дела. Поскольку отдельные этапы работ не предусмотрены протоколом разногласий к рамочному соглашению № ЯрС-8/1-17 от 22.05.2017, заявитель1считает, что начисление неустойки возможно только на общую сумму договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту. А также просит учесть, что на момент возникновения нарушения невозможно определить исходную базу начисления неустойки и произвести ее расчет. Установленная договором неустойка подлежит начислению на цены, зафиксированные этим договором. В связи с чем, считает, что ссылка ответчика на то, что неустойка подлежит исчислению с учетом фактически выполненного объема работ по договорам и производить ее нужно от стоимости фактически не выполненных в срок работ, несостоятельна. Если договором строительного подряда не предусмотрена поэтапная приемка работ заказчиком, то акты приемки выполненных работ по форме КС-2, подписываемые заказчиком в отношении работ, выполненных подрядчиком за отчетный месяц, являются основанием для определения стоимости выполненных работ, по которой производятся расчеты с подрядчиком, и, согласно договору, не являются принятием результата работ заказчиком. Следовательно, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 считается обязательным документом при сдаче всех предусмотренных договором подряда документов. Ответчиком справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 сдана позже. В связи с чем, расчет неустойки должен производиться на дату сдачи справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Считает, что Арбитражным судом Ярославской области несоразмерно уменьшен размер неустойки до суммы однократного штрафа в размере 7000 рублей.

ООО «СК Альпстрой» в отзыве на апелляционную жалобу ООО «ДЕЛЬТА Констракшн» доводы заявителя1 отклонило, просит оставить апелляционную жалобу ООО «ДЕЛЬТА Констракшн» без удовлетворения.

ООО «СК Альпстрой» с принятым решением суда не согласно, обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Ярославской области от 20.12.2018 по делу № А82-15877/2018 изменить в части взыскания пени в размере 1 686 376 рублей 65 копеек, снизив размер пени до минимально возможного размера.

В обоснование доводов жалобы заявитель2 указывает на то, что просрочка выполнения работ большей частью была связана с неблагоприятными погодными условиями. По мнению ответчика, размер пени за просрочку выполнения работ с учетом исключения дней с неблагоприятными погодными условиями составляет 735 223 рубля 62 копейки. Суд первой инстанции необоснованно отказал в снижении размера неустойки за просрочку выполнения работ на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заявитель2 просит суд учесть следующие обстоятельства: незначительность периода просрочки, превышение размера неустойки за нарушение сроков окончания выполнения работ двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, отсутствие убытков истца от просрочки выполнения работ (неустойка за просрочку выполнения работ к истцу заказчиком работ не применялась), повышенный размер ответственности субподрядчика по сравнению с подрядчиком: договорами и рамочным соглашением не установлена ответственность Подрядчика перед Субподрядчиком за какие-либо нарушения, в том числе и за нарушения в части своевременной оплаты и приемки работ. Таким образом, ответственность подрядчика за нарушение сроков оплаты определяется только нормами статьи 395 ГК Гражданского кодекса Российской Федерации (в размере однократного размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации). Учитывая, что в соответствии с данными заказчика - Регионального фонда, штрафные санкции по спорным договорам к подрядчику не применялись, убытки истца в связи с просрочкой выполнения работ отсутствуют. Таким образом, суд первой инстанции в судебном акте неправильно применил нормы материального права, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, решение суда первой инстанции подлежит изменению.

ООО «Дельта Констракшн» отзыв на апелляционную жалобу ООО «СК Инжиниринг» не представило.

Стороны явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителей сторон.

Определение Второго арбитражного апелляционного суда о принятии апелляционной жалобы к производству вынесено 30.01.2019 и размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 31.01.2019 в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 122 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Законность решения Арбитражного суда Ярославской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как следует из материалов дела, 05.05.2017 между ООО «ДЕЛЬТА констракшн» (Подрядчик) и ООО «СК АльпСтрой» (Субподрядчик) подписано рамочное соглашение к договорам подряда на выполнение работ по капитальному ремонту № ЯрС-2/1-17, согласно пункту 1.3 которого Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. Объект, на котором выполняются работы, определяется договором подряда, заключаемым в рамках настоящего соглашения. 

Согласно пункту 4.1.4 Соглашения Субподрядчик обязан ежедекадно представлять Подрядчику отчет о выполнении работ на объектах по форме, установленной в Приложении к настоящему Договору, с указанием в разрезе каждого объекта. 

В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, включая срок исполнения его этапа. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается Договором не менее одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа работ, сроки по которому нарушены. Субподрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика (пункт 7.1 рамочного соглашения). 

Согласно пункту 7.2 рамочного соглашения в случае расторжения Договора подряда по вине Субподрядчика, по основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением или действующим законодательством Российской Федерации или Ярославской области Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 15% от стоимости соответствующего Договора подряда. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Субподрядчик обязан будет возместить Подрядчику в качестве причиненных убытков (вреда).

В случае нарушения Субподрядчиком требований пунктов 4.1-4.3 настоящего Соглашения Субподрядчик обязуется уплатить Подрядчику штраф в размере 7 000 рублей за каждое допущенное нарушение (пункт 7.4 рамочного соглашения). 

05.05.2017 между ООО «ДЕЛЬТА констракшн» (Подрядчик) и ООО «СК АльпСтрой» (Субподрядчик) подписан договор подряда №1, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно пункту 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работы (адрес) - 

<

...>. Начало выполнения работ - 05.05.2017, окончание выполнения работ - 05.06.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 2 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 3 258 290 рублей 58 копеек, в том числе НДС - 497 027 рублей 38 копеек. 

05.05.2017 между ООО «ДЕЛЬТА констракшн» (Подрядчик) и ООО «СК АльпСтрой» (Субподрядчик) подписан договор подряда №2, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно пункту 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями Рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работы (адрес) - 

<

...> Октября д. 10. Начало выполнения работ - 05.05.2017, окончание выполнения работ - 05.06.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 2 321 000 рублей 53 копейки, в том числе НДС - 354 050 рублей 93 копейки. 

05.05.2017 между ООО «ДЕЛЬТА констракшн» (Подрядчик) и ООО «СК АльпСтрой» (Субподрядчик) подписан договор подряда №3, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 г. на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно пункту 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями Рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работы (адрес) - 

<

...> Октября д. 16. Начало выполнения работ - 05.05.2017, окончание выполнения работ - 05.06.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 3 569 072 рубля 37 копеек, в том числе НДС - 544 434 рубля 77 копеек. 

05.05.2017 между ООО «ДЕЛЬТА констракшн» (Подрядчик) и ООО «СК АльпСтрой» (Субподрядчик) подписан договор подряда №4, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно пункту 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работ (адрес) - 

<

...>. Начало выполнения работ - 05.05.2017, окончание выполнения работ - 05.06.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 2 543 879 рублей 87 копеек, в том числе НДС - 388 049 рублей 47 копеек. 

05.05.2017 между ООО «ДЕЛЬТА констракшн» (Подрядчик) и ООО «СК АльпСтрой» (Субподрядчик) подписан договор подряда №5, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно пункту 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями Рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работы (адрес) - 

<

...>. Начало выполнения работ - 05.05.2017, окончание выполнения работ - 05.06.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 2 849 525 рублей 36 копеек, в том числе НДС - 434 673 рубля 36 копеек. 

05.05.2017 между ООО «ДЕЛЬТА констракшн» (Подрядчик) и ООО «СК АльпСтрой» (Субподрядчик) подписан договор подряда №6, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно пункту 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работы (адрес) - 

<

...>. Начало выполнения работ - 05.05.2017, окончание выполнения работ - 05.06.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 2 148 718 рублей 64 копейки, в том числе НДС - 327 770 рублей 64 копейки. 

05.05.2017 между ООО «ДЕЛЬТА констракшн» (Подрядчик) и ООО «СК АльпСтрой» (Субподрядчик) подписан договор подряда №7, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно пункту 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работы (адрес) - 

<

...>. Начало выполнения работ - 05.05.2017, окончание выполнения работ - 05.06.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 2 062 864 рубля 67 копеек, в том числе НДС - 314 674 рубля 27 копеек. 

26.05.2017 между ООО «ДЕЛЬТА констракшн» (Подрядчик) и ООО «СК АльпСтрой» (Субподрядчик) подписан договор подряда №8, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно пункту 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работы (адрес) - 

<

...>. Начало выполнения работ - 31.05.2017, окончание выполнения работ - 31.07.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 4 149 960 рублей 88 копеек, в том числе НДС - 633 044 рубля 88 копеек. 

26.05.2017 между ООО «ДЕЛЬТА констракшн» (Подрядчик) и ООО «СК АльпСтрой» (Субподрядчик) подписан договор подряда №9, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно пункту 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работ (адрес) - 

<

...>. Начало выполнения работ - 31.05.2017, окончание выполнения работ - 31.07.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 2 149 923 рубля 18 копеек, в том числе НДС - 327 954 рубля 38 копеек. 

26.05.2017 между ООО «ДЕЛЬТА констракшн» (Подрядчик) и ООО «СК АльпСтрой» (Субподрядчик) подписан договор подряда №10, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно пункту 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работ (адрес) - 

<

...>. Начало выполнения работ - 31.05.2017, окончание выполнения работ - 31.07.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 4 941 371 рубль 78 копеек, в том числе НДС - 753 768 рублей 58 копеек. 

26.05.2017 между ООО «ДЕЛЬТА констракшн» (Подрядчик) и ООО «СК АльпСтрой» (Субподрядчик) подписан договор подряда №11, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно пункту 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работы (адрес) - 

<

...>. Начало выполнения работ - 31.05.2017, окончание выполнения работ - 31.07.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 2 203 337 рублей 54 копейки, в том числе НДС - 336 102 рубля 34 копейки. 

26.05.2017 между ООО «ДЕЛЬТА констракшн» (Подрядчик) и ООО «СК АльпСтрой» (Субподрядчик) подписан договор подряда №12, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно пункту 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работы (адрес) - 

<

...>. Начало выполнения работ - 31.05.2017, окончание выполнения работ - 31.07.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 1 856 649 рублей 76 копеек, в том числе НДС - 283 217 рублей 76 копеек. 

26.05.2017 между ООО «ДЕЛЬТА констракшн» (Подрядчик) и ООО «СК АльпСтрой» (Субподрядчик) подписан договор подряда №13, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно пункту 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работы (адрес) - 

<

...>. Начало выполнения работ - 31.05.2017, окончание выполнения работ - 31.07.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 850 365 рублей 58 копеек, в том числе НДС - 129 716 рублей 78 копеек. 

26.05.2017 между ООО «ДЕЛЬТА констракшн» (Подрядчик) и ООО «СК АльпСтрой» (Субподрядчик) подписан договор подряда №14, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно пункту 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работы (адрес) - 

<

...>. Начало выполнения работ - 31.05.2017, окончание выполнения работ - 31.07.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 3 363 610 рублей 77 копеек, в том числе НДС - 513 093 рубля 17 копеек. 

26.05.2017 между ООО «ДЕЛЬТА констракшн» (Подрядчик) и ООО «СК АльпСтрой» (Субподрядчик) подписан договор подряда №15, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно пункту 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работы (адрес) - г. Рыбинск, Сакко и Ванцетти, д. 18. Начало выполнения работ - 31.05.2017, окончание выполнения работ - 31.07.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 1 187 004 рубля 48 копеек, в том числе НДС - 181 068 рублей 48 копеек. 

15.09.2017 между ООО «ДЕЛЬТА констракшн» (Подрядчик) и ООО «СК АльпСтрой» (Субподрядчик) подписан договор подряда №18, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно пункту 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работы (адрес) - 

<

...>. Начало выполнения работ - 20.09.2017, окончание выполнения работ - 20.11.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 2 005 843 рубля 20 копеек, в том числе НДС - 305 976 рублей 08 копеек. 

17.09.2017 между ООО «ДЕЛЬТА констракшн» (Подрядчик) и ООО «СК АльпСтрой» (Субподрядчик) подписан договор подряда №19, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно пункту 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работы (адрес) - 

<

...>. Начало выполнения работ - 20.11.2017, окончание выполнения работ - 15.12.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 841 848 рублей 82 копейки, в том числе НДС - 128 417 рублей 62 копейки. 

17.09.2017 между ООО «ДЕЛЬТА констракшн» (Подрядчик) и ООО «СК АльпСтрой» (Субподрядчик) подписан договор подряда №20, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно пункту 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работы (адрес) - 

<

...>. Начало выполнения работ - 20.11.2017, окончание выполнения работ - 15.12.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 947 552 рубля 27 копеек, в том числе НДС - 144 541 рубль 87 копеек. 

22.06.2017 между ООО «ДЕЛЬТА констракшн» (Подрядчик) и ООО «СК АльпСтрой» (Субподрядчик) подписан договор подряда №2-Ф, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно пункту 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работ (адрес) - 

<

...>. Начало выполнения работ - 26.06.2017, окончание выполнения работ -  25.09.2016. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 25 995 124 рубля 35 копеек, в том числе НДС – 3 965 357 рублей 95 копеек. 

24.10.2017 между ООО «ДЕЛЬТА констракшн» (Подрядчик) и ООО «СК АльпСтрой» (Субподрядчик) подписан договор подряда №3-Ф, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно пункту 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работы (адрес) - 

<

...>. Начало выполнения работ - 24.10.2017, окончание выполнения работ - 30.11.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 280 932 рубля 80 копеек, в том числе НДС - 42 854 рубля 16 копеек. 

01.10.2017 между ООО «ДЕЛЬТА констракшн» (Подрядчик) и ООО «СК АльпСтрой» (Субподрядчик) подписан договор подряда №5-Ф, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно пункту 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работы (адрес) - 

<

...>. Начало выполнения работ - 01.10.2017, окончание выполнения работ - 01.12.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 809 938 рублей 78 копеек, в том числе НДС - 123 549 рублей 98 копеек.  

25.10.2017 между ООО «ДЕЛЬТА констракшн» (Подрядчик) и ООО «СК АльпСтрой» (Субподрядчик) подписан договор подряда №4-Ф, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно пункту 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работы (адрес) - 

<

...>. Начало выполнения работ - 26.10.2017, окончание выполнения работ - 15.12.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 366 780 рублей, в том числе НДС - 55 949 рублей. 

24.10.2017 между ООО «ДЕЛЬТА констракшн» (Подрядчик) и ООО «СК АльпСтрой» (Субподрядчик) подписан договор подряда №6-Ф, регулируемый рамочным соглашением № ЯрС-2/1-17 от 05.05.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно пункту 1 которого Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома на условиях, определяемых настоящим договором. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются условиями Рамочного соглашения и действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области (включая строительные нормы и правила). 

Многоквартирный дом, на котором выполняются работы (адрес) - 

<

...>. Начало выполнения работ - 24.10.2017, окончание выполнения работ - 15.12.2017. Этапы выполнения работ устанавливаются графиком производства работ  (Приложение № 1 к настоящему договору). Стоимость работ составляет 470 961 рубль 60 копеек, в том числе НДС - 71 841 рубль 60 копеек. 

Во исполнение условий договоров субподрядчиком выполнена часть согласованных работ, результат работ сдан истцу, им принят. 

Указывая на просрочку выполнения работ по договорам, на неисполнение части обязательств истец обратился к ответчику с претензиями от 15.12.2017 № Н-802, № Н-282 от 17.05.2018, № Н-424 от 15.06.2018, в которых просил оплатить неустойку, штрафы, предусмотренные пунктами 7.2, 7.4 рамочного соглашения. 

Указывая, что в добровольном порядке ответчиком требования истца исполнены не были, последний обратился в суд с настоящим иском.

Удовлетворение  исковых требований в части послужило основанием для принесения апелляционной жалобы.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционных жалоб и отзыв, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения решения суда, исходя из нижеследующего.

Как установлено статями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.          

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Как предусмотрено статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Судом первой инстанции установлено, что стороны в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и в надлежащей форме согласовали применение неустойки в случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором (пункт 7.1 рамочного соглашения); в срок, установленный договорами № 1,2,3,8,9,4,5,6,19,12,14,7,15,20,6-Ф, 3-Ф, 4-Ф работы ответчиком не выполнены, сданы с просрочкой, что следует из материалов дела. По расчету суда первой инстанции общая сумма пени, подлежащая взысканию с ответчика, составляет 1 686 376 рублей 65 копеек.

Ответчик в апелляционной жалобе указывает на то, что просрочка выполнения работ большей частью была связана с неблагоприятными погодными условиями.

Между тем, как обоснованно отмечено судом первой инстанции, ответчик, ссылаясь на невозможность производства работ в связи с неблагоприятными погодными условиями, не представил в материалы дела доказательств того, что выпадение осадков в определенные даты препятствовало выполнению определенной работы на конкретном объекте. Сведения Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о датах, в которые когда зафиксировано выпадение осадков,  свидетельствуют о наличии осадков в момент фиксации 2 раза в сутки (информация от 25.07.2018) в городе Ярославле в период с сентября 2017 года по декабрь 2017 года, сведениях от 19.09.2017 содержит информацию о наличии осадков в определенные даты, однако не подтверждают объективную невозможность выполнения подрядчиком работ в полном объеме на конкретных объектах. Кроме того, данные сведения не свидетельствую о наличии каких-либо чрезвычайных погодных явлений.

Истец в апелляционной жалобе указывает на то, что установленная договором неустойка подлежит начислению на цены, зафиксированные этим договором; начисление неустойки возможно только на общую сумму договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту.

Суд первой инстанции установил, что по указанным истцом объектам объемы и стоимость фактически выполненных работ отличались от стоимости, указанной в договорах. При этом истец не оспаривает, что по данным договорам все работы выполнены в указанные истцом сроки, то есть фактически условия договоров исполнены. 

Учитывая, что субподрядчик несет ответственность за своевременность выполнения именно того объема работ, который является необходимым для исполнения договора, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что начисление неустойки на сумму договора (включая работы, не требующие выполнения) является необоснованным.

В апелляционной жалобе ответчик указывает на необоснованный отказ суда первой инстанции в снижении размера неустойки за просрочку выполнения работ на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Относительно указанного довода апелляционный суд отмечает следующее.

В соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Аналогичное положение содержится в пункте 69 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Постановление № 7).

Как разъясняется в абзаце 1  пункта 71 Постановления № 7, неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации  только при наличии обоснованного заявления со стороны ответчика, являющегося или коммерческой организацией, или индивидуальным предпринимателем, или некоммерческой организацией при осуществлении ею приносящей доход деятельности. 

Пунктом 72 Постановления № 7 установлено, что заявление ответчика о применении положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации может быть сделано исключительно при рассмотрении дела судом первой инстанции или судом апелляционной инстанции в случае, если он перешел к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции (часть 5 статьи 330, статья 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, часть 6.1 статьи 268, часть 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно материалам дела в суде первой инстанции ответчик просил суд применить статью 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

С учетом правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в определениях № 263-О от 21.12.2000, №154-О от 22.04.2004,  положения пункта 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации содержат обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного, а не возможного размера ущерба.

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Следовательно, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения размера неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств независимо от того, является неустойка законной или договорной.

По смыслу названной нормы закона уменьшение неустойки является правом суда. Наличие оснований для снижения и определение критериев соразмерности определяются судом в каждом конкретном случае самостоятельно, исходя из установленных по делу обстоятельств.

Учитывая, что степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела.         

Судебная коллегия считает, что при определении суммы неустойки с учетом положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, судом должны быть учтены все существенные обстоятельства дела, в том числе, степень выполнения обязательств должником, длительность допущенной ответчиком просрочки нарушения обязательства, последствия нарушения обязательства, размер неустойки, а также компенсационная природа неустойки.

Разрешая спор по существу и суд первой инстанции посчитал, что основания для ее снижения в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствуют.

Проанализировав в совокупности характер возникших между сторонами правоотношений и степень виновности ответчика, принимая во внимание период допущенной ответчиком просрочки, последствия нарушения обязательств, размер причиненного ущерба, исходя из принципа компенсационного характера любых мер ответственности, судебная коллегия полагает определенный судом ко взысканию размер неустойки соразмерным последствиям нарушения обязательств.

Данный размер неустойки, по мнению судебной коллегии, в наибольшей степени обеспечит баланс прав и законных интересов истца, которому будет компенсировано нарушенное право на своевременное исполнение обязательств со стороны ответчика, - с одной стороны и ответчика, на которого должно быть возложено бремя оплаты неустойки за нарушение принятого на себя обязательства по договору.

В нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик, указывая на явную несоразмерность неустойки последствиям нарушенного обязательства, тем не менее, соответствующих доказательств не представил.

При указанных обстоятельствах суд апелляционной инстанции находит законным и обоснованным вывод суда первой инстанции об отсутствии оснований для применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Помимо взыскания пени, истцом также заявлено требование о взыскании 1 848 000 рублей штрафа за отсутствие отчетов, предусмотренных пунктом 7.4 рамочного соглашения по договорам № 1,2,3,4,5,6,7,8.

Судом первой инстанции установлено, что стороны в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и в надлежащей форме согласовали применение штрафа в случае нарушения Субподрядчиком требований пунктов 4.1-4.3 рамочного соглашения (пункт 7.4 рамочного соглашения), при этом в пункте 4.1.4 рамочного соглашения стороны предусмотрели обязанность Субподрядчика ежедекадно представлять Подрядчику отчет о выполнении работ на объектах по форме, установленной в Приложении к настоящему договору, с указанием в разрезе каждого объекта.

Принимая во внимание максимальное количество декад, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что в период производства работ, ответчик должен был предоставить 22 отчета. 

Учитывая, что данная обязанность ответчиком исполнена не была, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что штраф подлежит начислению за каждый случай неисполнения, в связи с чем обоснованная сумма штрафа составляет 154 000 рублей.

При этом, оценив размер начисленного штрафа на предмет соразмерности суммы неустойки последствиям нарушения подрядчиком обязательства, учитывая отсутствие у истца неблагоприятных последствий, вызванных нарушением, отсутствие действий истца по истребованию отчетов, проявления иной заинтересованности в их предоставлении, суд апелляционной инстанции полагает правомерным уменьшение судом первой инстанции размера неустойки до суммы однократного штрафа в размере 7 000 рублей. Доводы апелляционной жалобы истца об обратном признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными.

Истцом также заявлено требование о взыскании 394 071 рубль 38 копеек штрафа за расторжение договора  по вине субподрядчика, предусмотренный пунктом 7.2 рамочного соглашения, по договорам № 19, 20, 6-Ф.

Принимая во внимание, что штраф предусмотрен в отношении факта расторжения каждого договора, требование истца в данной части суд первой инстанции посчитал обоснованными. 

Однако, учитывая значительный размер штрафа, а также отсутствие доказательств причинения убытков истцу, в том числе предъявления на дату судебного заседания истцу Заказчиком строительства требований об уплате аналогичной неустойки, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что сумма неустойки в заявленном размере является несоразмерной последствиям неисполнения обязательства, и посчитал возможным уменьшить размер неустойки до 131 357 рублей 13 копеек (1/3 от предъявленной суммы штрафов).

С указанными выводами суд апелляционной инстанции соглашается. 

Таким образом, доводы заявителей апелляционных жалоб проверены судом апелляционной инстанции, однако они признаются несостоятельными, поскольку не опровергают законности принятого по делу судебного акта и не могут служить основанием для отмены принятого решения.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции считает, что при принятии решения арбитражным судом первой инстанции не допущено нарушений норм материального и процессуального права, надлежащим образом исследованы фактические обстоятельства дела, имеющиеся в деле доказательства, а, следовательно, оснований для переоценки выводов суда первой инстанции и отмены решения не имеется.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по апелляционной жалобе относятся на заявителя жалобы. 

Руководствуясь статьями 258, 268 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд 

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Ярославской области от 20.12.2018 по делу № А82-15877/2018 оставить без изменения, а апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Дельта Констракшн» и общества с ограниченной ответственностью «СК АльпСтрой» – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Ярославской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Арбитражный суд Волго-Вятского округа.

Председательствующий                               

Судьи

Л.Н. Горев

ФИО3

ФИО1