АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Климова ул., 62 д., Курган, 640002, http://kurgan.arbitr.ru,

тел. (3522) 46-64-84, факс (3522) 46-38-07

E-mail: info@kurgan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А34-2261/2019

г. Курган

21 мая 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 14 мая 2019 года.

В полном объеме решение изготовлено 21 мая  2019 года.    

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Тюриной И.Г., при ведении протокола и аудиозаписи помощником судьи Долматовой В.А., рассмотрев в открытом судебном  заседании дело по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗауралЛесХолдинг" (ОГРН 

<

***>)

к ДЕПАРТАМЕНТУ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГРН 

<

***>), 

о внесении изменений в договор

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, доверенность от 01.02.2019, паспорт,

от ответчика: ФИО2, доверенность от 05.04.2019, паспорт,

установил:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗауралЛесХолдинг" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к ДЕПАРТАМЕНТУ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (далее – ответчик) о внесении изменений в договор аренды лесного участка № 50-Др от 06.05.2014. Просит изложить приложение № 3 к договору аренды лесного участка № 50-Др от 06.05.2014 в следующей редакции: 

Объем использования лесов для заготовки древесины на лесном участке

Арендатор - ООО «ЗауралЛесХолдинг»

(куб. м.)

Объем заготовки древесины

Хозяйство

При рубке спелых и

перестойных лесных

насаждений

При рубке

лесных насаждений при уходе за лесами

При рубке поврежденных и погибших

лесных насаждений

При рубке

лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для

строительства, реконструкции и

эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры

Всего

Хвойное

200

800

1000

300

2300

Мягколиственное

19800

700

9600

150

30250

Итого

20000

1500

10600

450

32550

И приложение № 6 к договору аренды лесного участка № 50-Др от 06.05.2014 в следующей редакции: 

Объемы и сроки исполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на арендуемом лесном участке

Арендатор - ООО «ЗауралЛесХолдиш»

ГКУ «Шумихинское лесничество»

Вид использования лесов: заготовка древесины

№ п.п

Вид мероприятий

Ед. изм.

Годовой объем

Срок исполнения

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1. Лесохозяйственные работы, мероприятия

1.1.

Отвод лесосек всего, в т.ч.

Га

1.1.1.

Отвод лесосек под рубки спелых и перестойных лесных насаждений

Га

181

181

1.1.2.

Отвод лесосек под рубки погибших и        поврежденных лесных насаждений

Га

314

200

114

1.1.3.

Отвод лесосек под рубки ухода за лесами

Га

74

74

1.2

Рубки ухода за лесами, всего

Га

74

74

в том числе ликвид

кбм

2090

2090

1.2.1.

В том числе

- Уход за молодняками

Га

16

16

кбм

190

190

1.2.2.

- Прореживание

Га

33

33

кбм

1000

1000

в том числе ликвид

кбм

800

800

1.2.3.

- Проходные рубки

Га

25

25

кбм

900

900

в том числе ликвид

кбм

700

700

1.3.

Санитарно-оздоровительные мероприятия

Га

314

314

кбм

14720

14720

в том числе ликвид

кбм

10600

10600

1.3.1.

Сплошные санитарные рубки

Га

72

72

кбм

8400

8400

в том числе ликвид

кбм

7200

7200

1.3.2.

Выборочные санитарные рубки

Га

242

242

кбм

4820

4820

в том числе ликвид

кбм

3400

3400

1.3.3

Уборка неликвидной древесины

Га

75

75

кбм

1500

1500

в том числе ликвид

кбм

1.4.

Прочие рубки

Га

3,7

3,7

кбм

560

560

в том числе ликвид

кбм

450

450

2. Лесовосстановительные мероприятия

2.1

Посадка леса

Га

50

50

2.2

Дополнение лесных культур

Га

40

20

20

2.3

Уход   за   лесными   культурами (в переводе на однократный) всего

Га

150

30

120

2.4.

Подготовка почвы под лесные культуры будущего года

Га

50

20

30

2.5.

Содействие естественному возобновлению

Га

90

70

20

3. Обеспечение пожарной и санитарной безопасности в лесах

3.1.

Устройство противопожарных минерализованных полос

км

59

32

27

3.2.

Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос

км

21

11

10

3.3.

Прочистка и обновление противопожарных разрывов

км

1,6

1,6

3.4.

Создание и содержание противопожарных заслонов (противопожарные опушки)

км

0,29

0,29

3.5.

Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров

км

236,1

236,1

3.6.

Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров

км

0,5

0,5

3.7.

Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов

Га

101

101

3.8.

Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения

шт

7

в течение п/о сезона

3.9.

Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности

шт

1

1

3.10.

Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах

шт

3

2

1

3.11.

Установка и размещение аншлагов

шт

11

11

3.12.

Эксплуатация пожарных наблюдательных вышек

шт

0

в течение п/о сезона

3.13.

Эксплуатация пожарных наблюдательных высотных пунктов

шт

3

в течение п/о сезона

3.14.

Эксплуатация пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря (ПСПИ)

шт

1

в течение п/о сезона

3.15.

Установка и размещение стендов

шт

1

1

Определением от 09.04.2019 судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принято уточнение исковых требований. 

Суд перешел к рассмотрению требований о внесении изменений в договор аренды лесного участка № 50-Др от 06.05.2014: 

- приложение № 3 к договору аренды лесного участка № 50-Др от 06.05.2014 изложить в следующей редакции: 

Объем использования лесов для заготовки древесины на лесном участке

Арендатор - ООО «ЗауралЛесХолдинг»

(куб. м.)

Объем заготовки древесины

Хозяйство

При рубке спелых и

перестойных лесных

насаждений

При рубке

лесных насаждений при уходе за лесами

При рубке поврежденных и погибших

лесных насаждений

При рубке

лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для

строительства, реконструкции и

эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры

Всего

Хвойное

200

800

1000

300

2300

Мягколиственное

19800

700

9600

150

30250

Итого

20000

1500

10600

450

32550

- приложение № 6 к договору аренды лесного участка № 50-Др от 06.05.2014 изложить в следующей редакции:

Объемы и сроки исполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на арендуемом лесном участке

Арендатор - ООО «ЗауралЛесХолдиш»

ГКУ «Шумихинское лесничество»

Вид использования лесов: заготовка древесины

№ п.п

Вид мероприятий

Ед. изм.

Годовой объем

Срок исполнения

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1. Лесохозяйственные работы, мероприятия

1.1.

Отвод лесосек всего, в т.ч.

Га

1.1.1.

Отвод лесосек под рубки спелых и перестойных лесных насаждений

Га

181

181

1.1.2.

Отвод лесосек под рубки погибших и        поврежденных лесных насаждений

Га

389

389

1.1.3.

Отвод лесосек под рубки ухода за лесами

Га

74

74

1.2

Рубки ухода за лесами, всего

Га

74

0

0

16

58

кбм

2090

0

0

190

1900

в том числе ликвид

кбм

1500

0

0

0

1500

1.2.1.

В том числе

- Уход за молодняками

Га

16

16

кбм

190

190

1.2.2.

- Прореживание

Га

33

33

кбм

1000

1000

в том числе ликвид

кбм

800

800

1.2.3.

- Проходные рубки

Га

25

25

кбм

900

900

в том числе ликвид

кбм

700

700

1.3.

Санитарно-оздоровительные мероприятия

Га

389

75

314

кбм

14720

1500

13220

в том числе ликвид

кбм

10600

10600

1.3.1.

Сплошные санитарные рубки

Га

72

72

кбм

8400

8400

в том числе ликвид

кбм

7200

7200

1.3.2.

Выборочные санитарные рубки

Га

242

242

кбм

4820

4820

в том числе ликвид

кбм

3400

3400

1.3.3

Уборка неликвидной древесины

Га

75

75

кбм

1500

1500

в том числе ликвид

кбм

0

0

1.4.

Прочие рубки

Га

3,7

3,7

кбм

560

560

в том числе ликвид

кбм

450

450

2. Лесовосстановительные мероприятия

2.1

Посадка леса

Га

50

50

2.2

Дополнение лесных культур

Га

40

20

20

2.3

Уход   за   лесными   культурами (в переводе на однократный) всего

Га

150

30

120

2.4.

Подготовка почвы под лесные культуры будущего года

Га

50

20

30

2.5.

Содействие естественному возобновлению

Га

90

70

20

3. Обеспечение пожарной и санитарной безопасности в лесах

3.1.

Устройство противопожарных минерализованных полос

км

59

30

29

3.2.

Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос

км

21

10

11

3.3.

Прочистка и обновление противопожарных разрывов

км

1,6

1,6

3.4.

Создание и содержание противопожарных заслонов (противопожарные опушки)

км

0,29

0,29

3.5.

Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров

км

236,1

100

136,1

3.6.

Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров

км

0,5

0,5

3.7.

Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов

Га

101

101

3.8.

Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения

шт

7

в течение п/о сезона

3.9.

Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности

шт

1

1

3.10.

Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах

шт

3

2

1

3.11.

Установка и размещение аншлагов

шт

11

11

3.12.

Эксплуатация пожарных наблюдательных вышек

шт

0

в течение п/о сезона

3.13.

Эксплуатация пожарных наблюдательных высотных пунктов

шт

3

в течение п/о сезона

3.14.

Эксплуатация пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря (ПСПИ)

шт

1

в течение п/о сезона

3.15.

Установка и размещение стендов

шт

1

1

В судебном заседании представитель истца на удовлетворении иска настаивал, заявил ходатайства о приобщении к материалам дела  письменных пояснений, об отнесении судебных расходов по оплате государственной пошлины на ООО "ЗауралЛесХолдинг", а также об обращении решения к немедленному исполнению в порядке статьи 182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель ответчика против удовлетворения исковых требований не возражал.

На основании статей 66, 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные документы приобщены к материалам дела.

Суд, рассмотрев доводы иска, заслушав объяснения представителей сторон, исследовав имеющиеся в деле письменные доказательства, приходит к следующим выводам.

Установлено, что между Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области и обществом с ограниченной ответственностью "ЗауралЛесХолдинг" по результатам проведенного 22.04.2014 аукциона по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков заключен договор аренды лесного участка № 50-Др от 06.05.2014.

По условиям договора аренды лесного участка № 50-Др от 06.05.2014 арендодатель обязался предоставить, а арендатор обязался принять во временное пользование лесные участки в целях заготовки древесины, находящиеся в государственной собственности и указанные в пункте 2 настоящего договора.   

Арендная плата по договору составляет  797 000 руб. (пункт 6 договора).  

Арендатор вносит  арендную плату в полном объёме ежемесячно равными долями, если иное не установлено приложением № 4 к настоящему договору  (пункт 7 договора). 

В соответствии с пунктом 8 договора арендная плата изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9, 10 настоящего договора.

Минимальный размер арендной платы и часть, превышающая минимальный размер арендной платы, подлежат корректировке в случаях:

а)уточнения разрешенных объемов изъятия лесных ресурсов в соответствии спроектом освоения лесов;

б)изменения ставок платы за единицу объема древесины лесных насаждений.

Согласно пункту 9 договора размер арендной платы не может быть ниже платы, рассчитанной на основе ставок, устанавливаемых федеральными органами государственной власти.

Размер арендной платы подлежит перерасчету в случае изменения ежегодного объема изьятия лесных ресурсов на арендуемом лесном участке, установленного проектом освоения лесов, по отношению к ежегодному объему изъятия лесных ресурсов на арендуемом лесном участке, установленному настоящим Договором. В этом случае размер арендной платы определяется как произведение ежегодного объема изъятия лесных ресурсов на арендуемом лесном участке, установленного проектом освоения лесов, и стоимости за единицу объема лесных ресурсов, определенной по результатам аукциона по формам, видам рубок и хозяйствам (пункт 10 договора).

Схема расположения лесного участка и его характеристики приведены в приложениях №1, №2 к настоящему договору. 

Пунктом  4 договора предусмотрено, что  ежегодный объём  изъятия  лесных ресурсов на арендуемых лесных участках, объемы работ по охране, защите и воспроизводству лесов предварительно определены настоящим договором (приложения №3, № 6), окончательно устанавливаются  проектом освоения лесов, получившим положительное заключение государственной экспертизы.

Срок действия договора установлен 40 лет с момента государственной регистрации (пункт 25 договора). Договор зарегистрирован 18.07.2014

Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области № 452 от 10.08.2018 внесены изменения в проект освоения лесов на лесной участок, переданный в аренду в целях заготовки древесины ООО "ЗауралЛесХолдинг" в связи с изменением структуры и состояния лесов на лесном участке, предоставленном в аренду, а также по результатам лесопотологических обследований.

Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области № 691 от 06.11.2018 утвержден новый «Лесохозяйственный регламент Шумихинского лесничества», в котором определен ежегодный объем заготовки древесины ООО "ЗауралЛесХолдинг" при всех видах рубок на расчетной лесосеки, который составляет 32,55 тыс. куб.м. в том числе при рубке погибших и поврежденных лесных насаждений 10,6 тыс. куб. м. При этом в действующем договоре аренды № 50-ДР от 06.05.2014 в редакции Соглашений о внесении изменений в договор аренды лесного участка от 12.04.2017, объем заготовки ликвидной древесины составляет 32,95 тыс. куб. м.

Кроме того, указанным регламентом были изменены лесохозяйственные, лесовосстановительные мероприятия, а так же нормы обеспечения пожарной и санитарной безопасности в лесах.

В соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422 ГК РФ).

Согласно п. 1, 2, 3 ст. 74.1 Лесного кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации и настоящим Кодексом. Изменение условий договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключенного по результатам торгов, не допускается, за исключением случаев изменения целевого назначения или разрешенного использования лесов, существенного изменения параметров использования лесов (возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов) или существенного изменения обстоятельств, из которых стороны договора аренды лесного участка исходили при его заключении, если такое изменение обстоятельств возникло вследствие природных явлений (лесных пожаров, ветровалов, наводнений и других стихийных бедствий) и стало основанием для внесения изменений в государственный лесной реестр (в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 455-ФЗ). Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключенный по результатам торгов, может быть изменен по решению суда в случае существенного изменения количественных и качественных характеристик такого лесного участка.

Нормами Лесного кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей на момент заключения договора, также предусматривался общий запрет на изменение условий аукциона в отношении договоров аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключенных по результатам аукциона, из которого должны были исходить стороны при заключении договора.

Заявленные истцом требования обусловлены изменением количественных и качественных характеристик лесных участков, в этой связи, возникший спор подлежит урегулированию судом.

В соответствии с п. 28 Приказа Минсельхоза РФ от 08.02.2010 N 32 "Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки", действовавшего на момент составления проекта освоения лесов, проект освоения лесов разрабатывается на период 10 лет для заготовки древесины и до 10 лет - для остальных видов использования лесов, но не превышающий срок действия соответствующего лесохозяйственного регламента лесничества (лесопарка).

Таким образом, с 01.01.2019 проект освоения лесов не применяется в связи с утверждением нового лесохозяйственного регламента Шумихинского лесничества, то есть не действовал на момент обращения истца в суд - 07.03.2019.

В то же время, суд признает возможным удовлетворить заявленные требования, принимая во внимание представленные в материалы дела документы, подтверждающие доводы истца о существенном изменении количественных и качественных характеристик арендованного лесного участка по сравнению с теми характеристиками, из которых исходили стороны на момент заключения договора, что подтверждается представленным в материалы дела лесохозяйственным регламентом и не оспаривается департаментом. В связи с чем, договор аренды подлежит изменению на основании ст. 74.1 Лесного кодекса Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение арбитражного суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами, регулирующими вопросы исполнительного производства. 

В соответствии с частью 4 статьи 182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопрос об обращении решения к немедленному исполнению рассматривается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания.

 Поскольку требование об обращении решения суда к немедленному исполнению заявлено истцом в судебном заседании, суд признал возможным рассмотреть вопрос об обращении решения суда к немедленному исполнению одновременно с принятием решения суда по делу. 

В силу части 3 статьи 182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд по заявлению истца вправе обратить решение к немедленному исполнению, если вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или сделать исполнение невозможным. 

Представитель департамента в судебном заседании не возражал против удовлетворения заявления ООО "ЗауралЛесХолдинг".

Изучив изложенные доводы, а также учитывая, что у ООО "ЗауралЛесХолдинг" имеются основания для внесения изменений в договор аренды, суд полагает возможным обратить решение к немедленному исполнению, поскольку истец обосновал возможность причинения значительного ущерба в случае не принятия мер к немедленному исполнению настоящего судебного акта.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на истца в соответствии с его  ходатайством (запись в протоколе).

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

решил:

иск удовлетворить.

Внести изменения в договор аренды лесного участка № 50-Др от 06.05.2014. Изложить приложение №3 и приложение №6 к договору аренды лесного участка № 50-Др от 06.05.2014в следующей редакции:

Приложение №3:

Объем использования лесов для заготовки древесины на лесном участке

Арендатор - ООО «ЗауралЛесХолдинг»

(куб. м.)

Объем заготовки древесины

Хозяйство

При рубке спелых и

перестойных лесных

насаждений

При рубке

лесных насаждений при уходе за лесами

При рубке поврежденных и погибших

лесных насаждений

При рубке

лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для

строительства, реконструкции и

эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры

Всего

Хвойное

200

800

1000

300

2300

Мягколиственное

19800

700

9600

150

30250

Итого

20000

1500

10600

450

32550

Приложение №6:

Объемы и сроки исполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на арендуемом лесном участке

Арендатор - ООО «ЗауралЛесХолдинг»

ГКУ «Шумихинское лесничество»

Вид использования лесов: заготовка древесины

№ п.п

Вид мероприятий

Ед. изм.

Годовой объем

Срок исполнения

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1. Лесохозяйственные работы, мероприятия

1.1.

Отвод лесосек всего, в т.ч.

Га

644

0

0

644

0

1.1.1.

Отвод лесосек под рубки спелых и перестойных лесных насаждений

Га

181

181

1.1.2.

Отвод лесосек под рубки погибших и        поврежденных лесных насаждений

Га

389

389

1.1.3.

Отвод лесосек под рубки ухода за лесами

Га

74

74

1.2

Рубки ухода за лесами, всего

Га

74

0

0

16

58

кбм

2090

0

0

190

1900

в том числе ликвид

кбм

1500

0

0

0

1500

1.2.1.

В том числе

- Уход за молодняками

Га

16

16

кбм

190

190

1.2.2.

- Прореживание

Га

33

33

кбм

1000

1000

в том числе ликвид

кбм

800

800

1.2.3.

- Проходные рубки

Га

25

25

кбм

900

900

в том числе ликвид

кбм

700

700

1.3.

Санитарно-оздоровительные мероприятия

Га

389

0

0

75

314

кбм

14720

0

0

1500

13220

в том числе ликвид

кбм

10600

0

0

0

10600

1.3.1.

Сплошные санитарные рубки

Га

72

72

кбм

8400

8400

в том числе ликвид

кбм

7200

7200

1.3.2.

Выборочные санитарные рубки

Га

242

242

кбм

4820

4820

в том числе ликвид

кбм

3400

3400

1.3.3

Уборка неликвидной древесины

Га

75

75

кбм

1500

1500

в том числе ликвид

кбм

0

0

1.4.

Прочие рубки

Га

3,7

3,7

кбм

560

560

в том числе ликвид

кбм

450

450

2. Лесовосстановительные мероприятия

2.1

Посадка леса

Га

50

50

2.2

Дополнение лесных культур

Га

40

20

20

2.3

Уход   за   лесными   культурами (в переводе на однократный) всего

Га

150

30

120

2.4.

Подготовка почвы под лесные культуры будущего года

Га

50

20

30

2.5.

Содействие естественному возобновлению

Га

90

70

20

3. Обеспечение пожарной и санитарной безопасности в лесах

3.1.

Устройство противопожарных минерализованных полос

км

59

30

29

3.2.

Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос

км

21

10

11

3.3.

Прочистка и обновление противопожарных разрывов

км

1,6

1,6

3.4.

Создание и содержание противопожарных заслонов (противопожарные опушки)

км

0,29

0,29

3.5.

Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров

км

236,1

100

136,1

3.6.

Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров

км

0,5

0,5

3.7.

Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов

Га

101

101

3.8.

Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения

шт

7

в течение п/о сезона

3.9.

Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности

шт

1

1

3.10.

Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах

шт

3

2

1

3.11.

Установка и размещение аншлагов

шт

11

11

3.12.

Эксплуатация пожарных наблюдательных вышек

шт

0

в течение п/о сезона

3.13.

Эксплуатация пожарных наблюдательных высотных пунктов

шт

3

в течение п/о сезона

3.14.

Эксплуатация пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря (ПСПИ)

шт

1

в течение п/о сезона

3.15.

Установка и размещение стендов

шт

1

1

Примечание: работы (мероприятия, указанные в разделе 1, 2, 3 – могут быть выполнены ранее установленного срока. 

Обратить решение к немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Курганской области.

Судья

И.Г. Тюрина