23/2021-4585(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  Большая Московская улица, дом 73, Великий Новгород, 173020  

http://novgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

Великий Новгород Дело № А44-9279/2019  04 февраля 2021 года  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Формула» в срок не позднее  4 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить недостатки  выполненных работ по строительству многоквартирного дома № 14 корп. 1 по ул. Связи в  Великом Новгороде, а именно:  

- демонтировать существующую штукатурку фасадов многоквартирного дома; 

- произвести штукатурные работы фасадов многоквартирного дома в соответствии  со строительными нормами и правилами;  

- установить вентиляционные элементы на коньках крыши многоквартирного дома  с шагом 1200 мм в соответствии с проектом и в соответствии со строительными нормами  и правилами;  

- выполнить полы на балконах над эркерами в соответствии с проектом и в  соответствии со строительными нормами и правилами;  

- восстановить герметичное соединение стыка цоколя и отмостки по периметру  многоквартирного дома ремонтным составом;  

- демонтировать существующий асфальтобетон проездов на придомовой  территории многоквартирного дома;  

- демонтировать крышки колодцев; 

- осуществить монтаж крышек колодцев в новой горизонтальной плоскости в  соответствии с нормативными требованиями;  

- осуществить монтаж асфальтобетона проезда на придомовой территории  многоквартирного дома в соответствии с проектом и в соответствии со строительными  нормами и правилами;  

- устранить на стыковых соединениях между плитами ОСБ отделки потолков на  лестничных клетках трещины и разрушения отделочного слоя;  

- посадить туи в количестве 65 штук вокруг контейнерной площадки,  предусмотренные в проекте разделом 2 ПЗУ лист 4.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Формула» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Береста» 6 000,00  

руб. в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины и 125 000,00 руб. в  счет возмещения расходов на проведение судебной экспертизы.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Формула» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Береста»  неустойку на случай неисполнения решения суда в размере 3 000,00 руб. за каждый  календарный день неисполнения решения суда, начиная со дня, следующего за днем  истечения срока, установленного судом для устранения недостатков, по день  фактического исполнения решения.  

Исполнительные листы выдать после вступления судебного акта в законную силу  по ходатайству взыскателя.  

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный  суд через Арбитражный суд Новгородской области в месячный срок со дня его принятия.  

Судья С.В. Давыдова