2 4 

12/2023-31648(1) 

м

а

 

р 

 т а 

Арбитражный суд Рязанской области   

ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108; 2 

http://ryazan.arbitr.ru; e-mail: info@ryazan.arbitr.ru 0 

 2 

Именем Российской Федерации 3

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 г 

 о

г. Рязань Дело № А54-7780/2022 д 

24 марта 2023 года а  

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи Сельдемировой В.А., руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

1. Обязать муниципальное предприятие "Ремонтно-строительное управление № 1"  города Рязани (ОГРН: 

<

***>, 390026, 

<

...>) в месячный срок с даты вступления решения суда в законную силу своими силами, средствами  и за свой счет, с использованием материалов, качество которых не ниже качества материалов, указанных в техническом задании к договору, устранить недостатки (дефекты)  выполненных на основании договора № РТС262А200017(Д) от 16.03.2020 работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, зафиксированные в рекламационном акте от 26.05.2022, путем  выполнения следующих видов и объемов работ:  

- в квартирах № 68, 86 произвести смену отливов из листовой оцинкованной стали  толщиной листа 0,60 мм- 1 м2;  

- демонтаж стяжек: бетонной толщиной 20 мм у площадок входной группы подъездов №№ 1, 2, 3 - 30 м2;  

- устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм (материал - смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (м250) у площадок входной группы подъездов №№ 1, 2,  3 - 30 м2;  

- наклейка ограничительной ленты (лента термоуплотнительная самоклеящаяся;  лента малярная (скотч), ширина 50 мм) в зоне стыка (прим.) под балконным окном  квартиры № 76 - 1,5 м.п.;  

- ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками «Вилатерм», монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся под балконным окном квартиры № 76 (материал - герметик двухкомпонентный полиуретановый  холодного отверждении «Оксипласт» (или аналог); прокладки «Вилатерм; пена монтажная) -1,5 м.п.;  

- отбивка штукатурного слоя на лест-ничных площадках всех 6 подъездов над  подоконниками и по периметру окон - 170 м2;  

- покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения (грунтовка: Бето- контакт, КНАУФ): за 1 раз стен (под штукатурку) на лестничных площадках всех 6  подъездов над подоконниками и по периметру окон - 170 м2;  

- штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских, на лестничных площадках всех 6 подъездов над подоконниками и по периметру  окон - 170 м2;  

- окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по  штукатурке стен (материал - краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: белая) на лестничных площадках всех 6 подъездов над подоконниками и по периметру  окон;  

- погрузка строительного мусора - т/факт.; - вывоз строительного мусора - т/факт. 

2. Взыскать с муниципального предприятия "Ремонтно-строительное управление   № 1" города Рязани (ОГРН: 

<

***>, 390026, 

<

...>) в  пользу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области  (ОГРН: 

<

***>, 390046, 

<

...>) расходы по  оплате госпошлины в сумме 6000 руб.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской области.  

На решение, вступившее в законную силу, через Арбитражный суд Рязанской области может быть подана кассационная жалоба в случаях, порядке и сроки, установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.  

Судья В.А. Сельдемирова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 30.01.2023 2:34:00

Кому выдана Сельдемирова Валентина Андреевна