Арбитражный суд Мурманской области

ул. Книповича, д. 20, г. Мурманск, 183038

e-mail: murmansk.info@arbitr.ru

http://murmansk.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

город Мурманск                                                                      Дело  №А42-8504/2023

Резолютивная часть решения оглашена 04 декабря 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено 07 декабря 2023 года

Судья Арбитражного суда Мурманской области Быкова Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Вежа" (адрес: 183032, 

<

...>; ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>, представитель по доверенности ФИО2 имеет адрес: ул. Ушакова, д. 5, корп. 1, кв. 113, 

<

...>)

к Государственному областному казенному учреждению «Управление капитального строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 183038, 

<

...>), 

о взыскании 2 689 783 рублей 31 копейки,

при участии в судебном заседании представителей:

истца – ФИО2. по доверенности;

ответчика – не явился, извещен, 

 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Вежа» (далее – истец, Подрядчик, Общество) обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с иском к Государственному областному казенному учреждению «Управление капитального строительства» (далее – ответчик, Заказчик, Учреждение) о взыскании 2 689 783 рублей 31 копейки.

В судебное заседание  надлежаще извещенный о времени и месте рассмотрения дела ответчик не явился. 

В отзыве Учреждение признает иск.

В судебном заседании Подрядчик на иске настаивает.

В соответствии со статьей 156 АПК РФ, с учетом мнения истца, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика.

Выслушав явившегося представителя, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

14.04.2022 ответчиком (как заказчиком) и истцом (как подрядчиком) заключен Государственный контракт № 35-2022 (далее - Контракт) на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт здания ГАУДПО МО «Институт развития образования», расположенного по адресу: 

<

...>.

Согласно пункту 2.1. цена Контракта составляет 98 349 227 рублей 50 копеек. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в размерах, установленных Контрактом, исходя из фактически выполненных работ, в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, но не позднее 20 декабря 2022 года.

В Дополнительном соглашении № 1 от 02.12.2022 стороны согласовали следующее: «Изложить пункт 3.2. в новой редакции «3.2. Срок исполнения контракта установлен до 20.02.2023 и включает срок выполнения подрядчиком работ (предусмотренных контрактом) в полном объеме, срок приемки (с оформлением документа о приемке) и оплаты заказчиком таких работ»».

В Дополнительном соглашении № 2 от 16.12.2022 сторонами согласовано следующее: «Изложить пункт 2.1. в новой редакции «2.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, оставляет 100 359 799 рублей 80 копеек».

27.01.2023 Письмом (исх. № 04-56) Подрядчик уведомил Заказчика о завершении работ по Контракту и просил назначить комиссию, направить представителя для приемки объекта ремонта 31.01.2023.

03.02.2023 по Акту приемки результатов выполненных работ по государственному контракту № 35-2022 от 14.04.2022 по объекту: «Капитальный ремонт здания ГАУДПО МО «Институт развития образования», расположенного по адресу: 

<

...>, Подрядчик сдал, а Заказчик принял выполненные работы. Работы приняты без замечаний.

В Акте приемки указано, что работ выполнено на 100 359 799 рублей 80 копеек.

Подрядчиком переданы Заказчику для подписания: Сводный акт № 6 о приемке выполненных работ от 31.01.2023; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 6 от 31.01.2023; Акт № 07/2 от 31.01.2023.; Акт № 06/2 от 31.01.2023; Акт № 03/2 от 31.01.2023.; Акт № 02/2 от 31.01.2023; Акт № 02-01-02/7 от 31.01.2023; Счет от 31.01.2023.

Сводный акт № 6 о приемке выполненных работ и Справка о стоимости выполненных работ № 6 от 31.01.2023 (форма КС-3) Заказчиком не подписаны.

Платежными поручениями № 428732 от 25.04.2022 (на сумму 29 504 768 рублей 25 копеек), № 836593 от 02.09.2022 (на сумму 29 504 768 рублей 25 копеек), № 835677 от 02.09.2022 (на сумму 158 218 рублей 03 копеек), № 730647 от 22.12.2022 (на сумму 38 502 261рублей  96 копеек) оплачены работы на общую сумму 97 670 016 рублей 49 копеек.

Согласно Акту сверки взаимных расчетов № 50 от 10.01.2023 задолженность ответчика по Контракту составляет 2 689 783 рубля 31 копейка.

Подрядчиком Заказчику направлена претензия.

29.09.2023 Подрядчик обратился в суд с соответствующим иском.

Суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

         Работы по Контракту сданы истцом и приняты ответчиком.

Иск признается ответчиком.

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 170 АПК РФ, в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может указано только на признание иска и принятие его судом.

Признание иска принимается судом.

 В соответствии со статьями 309, 310, 702, 740, 740, 746 ГК РФ, работы, выполненные Подрядчиком, должны быть оплачены Заказчиком.

Задолженность в сумме 2 689 783 рубля 31 копейка подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 10 935 рублей 00 копеек подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

В соответствии со статьей 333.40 НК РФ (в связи с признанием иска) подлежит возврату Подрядчику из федерального бюджета государственная пошлина в сумме 25 514 рублей 00 копеек.

Руководствуясь статьями 167-170, 110  Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации,  Арбитражный суд Мурманской области 

 

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

      Взыскать с Государственного областного казенного учреждения «Управление капитального строительства»  (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Вежа» (ИНН 

<

***>) задолженность в сумме 2 689 783 рубля 31 копейка  и судебные расходы по оплате государственной пошлине в сумме 10 935 рублей 00 копеек. 

       Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Вежа» (ИНН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 25 514 рублей 00 копеек, перечисленную платежным поручением № 884 от 27.09.2023.

       Выдать справку на возврат госпошлины.

       Решение может быть обжаловано  в суд апелляционной инстанции месячный срок  со дня принятия.

 

       Судья                                                                                        Н.В. Быкова