Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-227111/18-19-1898

24 января 2019г.

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 11 декабря 2018г.

Полный текст решения изготовлен 24 января 2019г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

председательствующего судьи Подгорной С.В.

при ведении протокола судебного заседания 

секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «МегаполисПроектСтрой» 

к ответчику Акционерному обществу «Агентство развития перспективных технологий» 

о взыскании 1 327 586 руб. 53 коп.

с участием:

от истца – ФИО2 (паспорт, по дов. от 05.09.2018 г.)

от ответчика – ФИО3 (паспорт, по дов. от 14.02.2018г)

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «МегаполисПроектСтрой» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Акционерному обществу «Агентство развития перспективных технологий» о взыскании 1 327 586 руб. 53 коп. составляющих сумму задолженности по договору на выполнение работ по изготовлению паспортов объектов дорожного хозяйства №АРПТ-СК6-7-8/ОДХ от 19.07.2017г.

Представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика требования не признал. В обоснование заявленных возражений  представил письменный отзыв.

Стороны не возражали против завершения подготовки к судебному разбирательству и рассмотрения дела по существу в рамках настоящего судебного заседания, в связи с чем, суд, руководствуясь ст. ст. 136, 137, 184, 185 АПК РФ, 04.04.2018г. завершает предварительное судебное заседание и приступил к рассмотрению спора по существу в судебном заседании, о чем вынесено протокольное определение.

Рассмотрев материалы дела, выслушав мнение представителей сторон,  исследовав письменные доказательства, суд установил, что предъявленный иск подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела усматривается, что между Обществом с ограниченной ответственностью «МегаполисПроектСтрой» (Исполнитель-Истец) и Акционерным обществом «Агентство развития перспективных технологий» (Заказчик-Ответчик) 19.07.2017г. заключен договор на выполнение работ по изготовлению паспортов объектов дорожного хозяйства №АРПТ-СК6-7-8/ОДХ от 19.07.2017г.

В соответствии с п. 1.1. договора исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по изготовлению паспортов объектов дорожного хозяйства на объектах благоустройства магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах (комплексное благоустройство улиц и общественных пространств) по адресам:

- г. Москва. ЦАО. Садовое кольцо, от ул.Цветной бульвар до Сухаревской пл. (Сегмент 6):

- г. Москва. ЦАО. Садовое кольцо, от Сухаревской пл. до ст. м. Красные ворота (Сегмент 7);

- г. Москва. ЦАО. Садовое кольцо, от ст. м. Красные ворога до ул. Покровка (Сегмент 8) (общей ориентировочной площадью объектов дорожного хозяйства - 17,8 га (далее -Работы), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору) а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Работа по паспортизации выполняется исполнителем в соответствии с определенными границами работ и передается Заказчику в двух экземплярах в бумажном виде (1 оригинальный экземпляр и 1 копия) и в электронном виде (1 экземпляр).

Согласно п. 2.1. договора, срок выполнения работ исполнителем по настоящему договору составляет - 120 (сто двадцать) календарных дней с даты указанной в уведомлении, предоставленном Заказчиком Исполнителю о завершении строительных работ, сдача работы возможна досрочно с оформлением соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ.

Как указано в п. 3.1. договора, ориентировочная стоимость работ по изготовлению паспортов объектов дорожного хозяйства, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, в соответствии со Сметой (Приложение №1 к Договору) из расчета общей ориентировочной площади объектов дорожного хозяйства - 17.8 га составляет 2.340.680,30 руб. 

В соответствии с пунктом 4.1 Договора платежным поручением от 08.09.2017 г. № 3906 ответчиком истцу перечислен аванс в размере 30% (тридцати) от стоимости работ, указанной в п. 3.1. Договора в сумме 702.204,09 руб. 09 коп. 

В силу статьи 762 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором, уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ. 

В соответствии с пунктом 4.2 Договора окончательная оплата за выполненные Работы производится Заказчиком на основании счета Исполнителя, с учетом ранее выплаченного аванса в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний.

В установленный срок, Истец принятые на себя обязательства выполнил в полном объеме. Результат выполненных работ представлен заказчику АО «АРПТ» 17 августа 2018 г. Факт передачи подтвержден Исходящим письмом от 17.08.2018 г. № 2018-139МПС. Одновременно с результатом работ направлен комплект закрывающих документов, а именно: Дополнительное соглашение № 1 на 6 листах в 2 экз.; Акт сдачи-приемки работ от 17.08.2018 г. на 1 л. в 2-х экз.; Исполнительная смета на 5 л. в 2-х экз.; Счет-фактура №20 от 17.08.2018 г. на 1 л. в 1 экз.; Счет на оплату №20 от 17.08.2018 г. на 1 л. в 1 экз.; Накладная на сдачу результата работ по Договору № АРПТ-СК6- 7-8/ОДХ от 17.08.2017 г. на 1 л.

Стоимость выполненных работ согласно Акту сдачи-приемки работ от 17.08.2018 г. составила 2.029.790,62 руб., и с учетом ранее перечисленного аванса задолженность по оплате стоимости выполненных работ составляет 1.327.586,53 руб.

В соответствии с п. 5.3. Договора Заказчик обязуется рассмотреть результат работы, подписать и передать Исполнителю полученный Акт сдачи-приемки выполненных работ и исполнительную смету в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения паспортов объектов дорожного хозяйства или направить мотивированный отказ в принятии Работ. По истечении указанного срока, при отсутствии мотивированного отказа, Работы считаются принятыми Заказчиком.

На день рассмотрения спора, документы, направленный в адрес ответчика истцу не возращены, мотивированного отказа от подписания актов не направлено, следовательно, результат работ по Договору № АРПТ-СК6-7-8/ОДХ от 19.07.2017 г. считается принятым, а выполненные работы подлежат оплате. Срок для оплаты выполненных работ - 03 сентября 2018 г.

Согласно ч. 1 ст. 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. 

В соответствии с пунктом 7.4 Договора до передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, ее получения. 

04 сентября 2018 года Истцом в адрес Ответчика направлена претензия от 04.09.2018 г. Исх. № 2018-144МПС.  Срок ответа на претензию истек 19 сентября 2018 года, по состоянию на 26 сентября 2018 года ответ на претензию в адрес Истца не поступал.

В нарушение условий договора ответчиком оплата стоимости выполненных работ не произведена, в связи с чем, на день рассмотрения спора задолженность ответчика перед истцом составляет 1.327.586 руб. 53 коп.

Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Возражения ответчика, изложенные в отзыве на иск, судом отклонены, поскольку документально не подтверждены. 

В судебном заседании установлен факт ненадлежащего исполнения ответчиком принятых на себя обязательств по договору от 19.07.2017г. № АРПТ-СК6-7-8/ОДХ.

Доказательств возмещения истцу компенсации понесенных затрат на день рассмотрения спора ответчиком не представлено, в связи с чем суд считает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению в заявленной сумме.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины распределяются в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании статей 309-310, 702, 710, 711, 740, 746, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации руководствуясь ст. ст. 9, 65, 70, 71, 110, 123, 137, 167, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с Акционерного общества «Агентство развития перспективных технологий» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «МегаполисПроектСтрой» 1.327.586 руб. 53 коп. задолженности, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 26.276 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятом арбитражном апелляционном суде.

СудьяС.В. Подгорная