АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102

http://kirov.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А28-8394/2024

г. Киров

15 октября 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 02 октября 2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 15 октября 2024 года

 

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Погудина С.А.

при ведении протокола судебного заседания c использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания Слобожаниновой И.С.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Администрации муниципального образования Арбажский муниципальный округ Кировской области (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 612180, 

<

...>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «СТИМУЛ» (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>, адрес: 386107, Республика Ингушетия, город Назрань, тер центральный округ, ул. Тангиева А-Г.Д., д. 45, офис 4)

о взыскании 1 728 236 рублей 70 копеек неустойки по муниципальному контракту,

 

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен надлежащим образом;

от ответчика: ФИО1, представителя по доверенности от 09.08.2024,  

 

установил:

Администрация муниципального образования Арбажский муниципальный округ Кировской области (далее – истец, Администрация) обратилась в Арбитражный суд Кировской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Стимул» (далее – ответчик, Общество) о взыскании 1 728 236 рублей 70 копеек неустойки по муниципальному контракту № 03402000033220139030001 на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома в пгт Арбаж в рамках муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры Арбажского муниципального округа» от 30.11.2022.

Исковые требования основаны на нормах статей 330, 708, 763 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы нарушением ответчиком сроков выполнения работ по контракту.

Ответчик в отзыве на исковое заявление требования истца не признал, указав, что муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон 04.04.2024, согласно пункту 4 которого обязательства в неисполненной части муниципального контракта стороны прекратили. Выполненные на дату расторжения муниципального контракта работы заказчиком приняты в полном объеме, что подтверждается документами по приемке выполненных работ. Размер неустойки, предъявленный к взысканию в рамках настоящего дела, составляет 1 728 236 рублей 70 копеек, что не превышает 5% от цены контракта, в связи с чем она подлежит списанию Заказчиком на основании пункта 2 и подп. «а» п. 3 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 №783. Кроме того, согласно материалам дела в муниципальный контракт вносились многочисленные изменения, в том числе в 2024 году, в части изменения кадастрового номера земельного участка, предназначенного для строительства объекта, увеличения количества этапов работ, корректировке стоимости и сроков работ, а также вносились изменения в проектную документацию для строительства объекта.

Истец при надлежащем извещении не обеспечил явку своего представителя в судебное заседание.

В судебном заседании ответчик просил в удовлетворении иска отказать по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Заслушав представителя ответчика, исследовав в полном объеме материалы дела, арбитражный суд установил следующие фактические обстоятельства.

Администрация (заказчик) и Общество (подрядчик) подписали муниципальный контракт № 03402000033220139030001 от 30.11.2022 на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома в пгт Арбаж в рамках муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры Арбажского муниципального округа» (далее – контракт), по условиям которого подрядчик обязался в рамках муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры Арбажского муниципального округа» выполнить работы по строительству многоквартирного жилого дома в пгт Арбаж, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 43:01:310111:106 в пгт Арбаж Арбажского района Кировской области (далее – работы, объект), в соответствии с проектной документацией (приложение № 1 к контракту), графиком выполнения строительно-монтажных работ (далее – график выполнения работ) (приложение № 2 к контракту), и передать объект заказчику, а заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями контракта (пункты 1.1, 1.2.2, 1.2.3).

В соответствии с пунктом 2.1 контракта в редакции дополнительного соглашения №7 от 20.03.2024 №7 к контракту цена Контракта  является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает  в  себя  расходы  на выполнение работ по предмету контракта, включая цену товаров и материалов, компенсацию всех издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, расходы на перевозку, страхование, таможенные расходы, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате за выполнение данных работ и составляет: 44 493 685 рублей 52 копейки, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (%) процентов.

Стоимость работ по этапам составляет:

- Этап 1. Перенос участка ВЛ-10 кВ фидер №5 ПС ПО кВ Арбаж в пгт. Арбаж Кировской области, снос зеленых насаждений, геодезические разбивочные работы согласно сметы Контракта.

Стоимость выполнения работ по Контракту: 40 585 (Сорок тысяч пятьсо" восемьдесят пять) рублей 35 копеек.

Срок выполнения по Контракту: с даты заключения Контракта по 31 января 2023 года.

- Этап 2. Фундамент, техподполье согласно сметы Контракта

Стоимость выполнения работ по Контракту: 4 050 344 (Четыре миллиона пятьдесят тысяч триста сорок четыре) рубля 40 копеек.

Срок выполнения по Контракту: с 01 февраля 2023 по 07 мая 2023 года.

- Этап 3. Стены, перекрытия, перегородки, лестничные клетки согласие/ сметы Контракта

Стоимость выполнения работ по Контракту: 7 126 295 (Семь миллионов сто двадцать шесть тысяч двести девяносто пять) рублей 04 копейки.

Срок выполнения по Контракту: с 08 мая 2023 по 31 июля 2023 года.

- Этап 4. Кровля согласно сметы Контракта

Стоимость выполнения работ по Контракту: 1 324 177 (Один миллион триста двадцать четыре тысячи сто семьдесят семь) рублей 07 копеек.

Срок выполнения по Контракту: с 01 августа 2023 по 22 ноября 2023 года.

- Этап 5. Крыльцо, световой приямок, фасад согласно сметы Контракта. Стоимость выполнения работ по Контракту: 3 889 310 (Три миллионе.

восемьсот восемьдесят девять тысяч триста десять) рублей 22 копейки.

Срок выполнения по Контракту: с 01 июля 2023 по 08 декабря 2023 года.

- Этап 6. Окна согласно сметы Контракта.

Стоимость выполнения работ по Контракту: 2 037 256 (Два миллиона тридцать семь тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 62 копейки.

Срок выполнения по Контракту: с 01 июля 2023 по 23 ноября 2023 года.

- Этап 7. Двери согласно сметы Контракта.

Стоимость выполнения работ по Контракту: 1 816 923 (Один миллион восемьсот шестнадцать тысяч девятьсот двадцать три) рубля 42 копейки.

Срок выполнения по Контракту: с 01 июля 2023 по 11 декабря 2023 года.

- Этап 8. Стяжка и чистовое покрытие полов (утепление чердака) согласно сметы Контракта.

Стоимость выполнения работ по Контракту: 688 467 (Шестьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 83 копейки.

Срок выполнения по Контракту: с 01 июля 2023 по 02 декабря 2023 года.

- Этап 9. Подготовка и чистовая отделка стен, потолки согласно сметы Контракта.

Стоимость выполнения работ по Контракту: 3 293 586 (Три миллиона двести девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят шесть) рублей 58 копеек.

Срок выполнения по Контракту: с 01 июля 2023 по 13 декабря 2023 года.

- Этап 10. Отмостка согласно сметы Контракта.

Стоимость выполнения работ по Контракту: 258 071 (Двести пятьдесят восемь тысяч семьдесят один) рубль 52 копейки.

Срок выполнения по Контракту: с 01 июля 2023 по 30 ноября 2023 года.

- Этап 11. Отопление (магистрали, приборы отопления) согласно сметы Контракта

Стоимость выполнения работ по Контракту: 2 677 293 (Два миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч двести девяносто три) рубля 15 копеек.

Срок выполнения по Контракту: с 01 сентября 2023 по 03 декабря 2023 года.

- Этап 12. Водоснабжение, водоотведение согласно сметы Контракта. Стоимость выполнения работ по Контракту: 1 324 292 (Один миллион

триста двадцать четыре тысячи двести девяносто два) рубля 36 копеек.

Срок выполнения по Контракту: с 01 сентября 2023 но 09 декабря 2023 года.

- Этап 13. Электроснабжение согласно сметы (силовые линии, ВРУ, электрощиты) Контракта.

Стоимость выполнения работ по Контракту: 3 117 779 (Три миллиона сто семнадцать тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 13 копеек.

Срок выполнения по Контракту: с 01 сентября 2023 по 04 декабря 2023 года.

- Этап 14. Вентиляция согласно сметы Контракта.

Стоимость выполнения работ по Контракту: 232 768 (Двести тридцать две тысячи семьсот шестьдесят восемь) рублей 46 копеек.

Срок выполнения по Контракту: с 01 сентября 2023 по 14 декабря 2023 года.

- Этап 15. ОПС, сети связи согласно сметы Контракта.

Стоимость выполнения работ по Контракту: 726 756 (Семьсот двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 65 копеек.

Срок выполнения по Контракту: с 01 сентября 2023 по 15 декабря 2023 года.

- Этап 16. Наружные сети электроснабжения, наружный водопровод В1, наружние сети хоз.- бытовой канализации К1, наружные тепловые сети Т1 (75°), Т2 (60°).

Стоимость выполнения работ по Контракту: 1 170 178 (Один миллион сто семьдесят тысяч сто семьдесят восемь) рублей 28 копеек.

Срок выполнения по Контракту: с 01 сентября 2023 по 29 ноября 2023 года.

- Этап 17. Вертикальная планировка, благоустройство, озеленение, сети наружного освещения (часть проезда вдоль оси 6, оси А) согласно сметы Контракта.

Стоимость выполнения работ по Контракту: 792 494 (Семьсот девяносто две тысячи четыреста девяносто четыре) рубля 07 копеек.

Срок выполнения по Контракту: с 01 октября 2023 по 28 ноября 2023 года.

- Этап 18. Технологическое присоединение объекта к электрическим сетям согласно сметы Контракта.

Стоимость выполнения работ по Контракту: 1 118 204 (Один миллион сто восемнадцать тысяч двести четыре) рубля 00 копеек.

Срок выполнения по Контракту: с 01 сентября 2023 по 01 декабря 2023 года.

- Этап 19. Стяжка и чистовое покрытие полов (стяжка и покрытие полов; согласно сметы Контракта.

Стоимость выполнения работ по Контракту: 2 120 929 (Два миллиона сто двадцать тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 91 копейка.

Срок выполнения по Контракту: с 01 июля 2023 по 12 декабря 2023.

- Этап 20. Отопление (автоматика, узел учета) согласно сметы Контракта. Стоимость выполнения работ по Контракту: 878 218 (Восемьсот семьдесят восемь тысяч двести восемнадцать) рублей 60 копеек.

Срок выполнения по Контракту: с 01 сентября по 07 декабря 2023 года.

- Этап 21. Электроснабжение (электроплиты, электрооборудование) согласью сметы Контракта.

Стоимость выполнения работ по Контракту: 2 402 095 (Два миллиона четыреста две тысячи девяносто пять) рублей 48 копеек.

Срок выполнения по Контракту: с 01 сентября по 10 декабря 2023 года.

- Этап 22. Наружные сети связи согласно сметы Контракта.

Стоимость выполнения работ по Контракту: 11 436 (Одиннадцать тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 90 копеек.

Срок выполнения по Контракту: с 01 сентября по 05 декабря 2023 года.

- Этап 23. Вертикальная планировка, благоустройство, озеленение, сети наружного освещения (проезды, тротуары, МАФ, сети наружного освещения; согласно сметы Контракта.

Стоимость выполнения работ по Контракту: 3 396 220 (Три миллиона триста девяносто шесть тысяч двести двадцать) рублей 48 копеек.

Срок выполнения по Контракту: с 01 октября по 06 декабря 2023 года.

В соответствии с пунктами 3.1, 3.2 контракта объем и содержание работ определены проектной документацией объекта (приложение № 1 к Контракту) и контрактом. Срок начала строительства объекта, срок окончания строительства объекта (конечный срок), промежуточные сроки выполнения отдельных видов и этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных контрактом работ определены графиком выполнения работ (приложение № 2 к контракту).

Разделом 6 контракта предусмотрена поэтапная приемка работ с оформлением актов формы КС-2.

Согласно пункту 9.7 контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Стороны подписали дополнительные соглашения к контракту: без номера от 07.12.2022, №2 от 11.04.2023, №3 от 21.07.2023, №4 от 23.11.2023, №5 от 21.12.2023, №6 от 05.03.2024, №7 от 20.03.2024.

Также сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ формы КС-2: №1 от 07.02.2023 (1 этап), №2 от 19.07.2023 (2 этап), №3 от 25.09.2023 (3 этап), №4 от 20.10.2023 (4 этап), №5 от 20.12.2023 (6 этап), №6 от 28.03.2024 (этап 5), №7 от 28.03.2024 (этап 8), №8 от 28.03.2024 (этап 11), №9 от 28.03.2024 (этап 13), №10 от 28.03.2024 (этап 16), №11 от 28.03.2024 (этап 17), №12 от 28.03.2024 (этап 18).

Дополнительным соглашением №8 от 04.04.2024 стороны расторгли контракт.

Согласно пункту 2 дополнительного соглашения №8 от 04.04.2024 на момент расторжения муниципального контракта сумма исполненных подрядчиком обязательств составляет 28 032 385 рублей 16 копеек. Обязательства в оставшейся части стороны прекращают.

Администрация направила обществу претензию от 30.05.2024 с требованием об уплате неустойки за просрочку выполнения работ.

Неисполнение данного требования в добровольном порядке послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив установленные по делу обстоятельства, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 763 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. 

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В соответствии с пунктом 1 стать 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Из материалов дела следует, что между истцом и ответчиком заключен муниципальный контракт на выполнение строительных работ согласно графику выполнения работ. 

Согласно материалам дела ответчиком выполнена часть предусмотренных контрактом работ, о чем составлены акты о приемке выполненных работ формы КС-2 №1 от 07.02.2023 (1 этап), №2 от 19.07.2023 (2 этап), №3 от 25.09.2023 (3 этап), №4 от 20.10.2023 (4 этап), №5 от 20.12.2023 (6 этап), №6 от 28.03.2024 (этап 5), №7 от 28.03.2024 (этап 8), №8 от 28.03.2024 (этап 11), №9 от 28.03.2024 (этап 13), №10 от 28.03.2024 (этап 16), №11 от 28.03.2024 (этап 17), №12 от 28.03.2024 (этап 18), а также протоколы приемочной комиссии. Указанные документы подтверждают завершение работ по указанным этапам с нарушением предусмотренных контрактом сроков.

Обязательства подрядчика выполнить работы по остальным этапам прекращены соглашением сторон.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

Согласно статье 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

В данном случае подрядчик нарушил срок выполнения работ, что является основанием для начисления ему пени.

Судом отклоняются доводы ответчика о том, что просрочка была допущена не по вине подрядчика.

В соответствии со статьей 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. 

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. 

Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Согласно пункту 1 статьи 406 ГК РФ кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

Судом отклоняются ссылки ответчика на письма от 06.10.2023 №22, от 01.11.2023 №23 о внесении изменений в проектную документацию, поскольку само по себе внесение данных изменений не свидетельствует о возникновении препятствий к исполнению контракта со стороны подрядчика. 

Материалами дела также не подтверждено, что изменение кадастрового номера земельного участка привело к изменению места выполнения работ по спорному контракту либо возникновению иных зависящих от заказчика обстоятельств, которые повлекли объективное увеличение продолжительности работ на объекте.

Представленные в дело доказательства не подтверждают наличие обстоятельств, которые могут служить основаниями для освобождения от ответственности в форме уплаты неустойки применительно к приведенным выше положениям пункта 1 статьи 401 ГК РФ, а также свидетельствующих о просрочке кредитора (статья 406 ГК РФ).

Суд признает также несостоятельной ссылку ответчика на наличие оснований для списания начисленной ему неустойки.

Согласно пункту 9.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Российской Федерации вправе установить случаи и порядок списания начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 N 783 утверждены Правила списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом (далее – Правила №783), согласно пункту 2 которых списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, по которым:

а) в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по соглашению сторон условия о сроке исполнения контракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы товара, работы, услуги, и (или) количестве товаров, объеме работ, услуг, предусмотренных контрактами;

б) в 2020 году обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с возникновением не зависящих от поставщика (подрядчика, исполнителя) обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;

в) в 2021 и 2022 годах обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

г) обязательства не были исполнены в полном объеме по причине возникновения при исполнении контракта не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения без изменения условий, в связи с мобилизацией в Российской Федерации, введением политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц (далее - санкции), и (или) с введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера (далее - меры ограничительного характера).

Из материалов дела следует, что обязательства по контракту были исполнены подрядчиком не в полном объеме. При этом материалами дела не подтверждается, что у заказчика отпала необходимость в производстве отдельных этапов работ либо их производство стало объективно невозможно, что послужило основанием для расторжения контракта в соответствующей части по соглашению сторон. Также в деле нет доказательств того, что в данном случае имели место обстоятельства, предусмотренные вышеуказанными положениями Правил №783.

При таких обстоятельствах оснований для списания начисленной ответчику неустойки применительно к Правилам №783 не имеется.

Требования истца основаны на расчете пени, который содержит верные исходные данные для начисления пени, за исключением следующего.

В расчете пени по пятому (на сумму 323 321 рублей 46 копеек), восьмому (на сумму 43 327 рублей 57 копеек), одиннадцатому (на сумму 167 063 рубля 09 копеек), тринадцатому (на сумму 192 886 рублей 60 копеек), шестнадцатому (на сумму 75 515 рублей 50 копеек), семнадцатому (на сумму 51 564 рубля 95 копеек) этапам истец производит начисление пени по 29.03.2024. Между тем, акты о приемке выполненных работ №№6, 7, 8, 9, 10 и 11 подписаны 28.03.2024, следовательно, из периода начисления неустойки по данным этапам подлежит исключению 1 день.

Суд произвел расчет неустойки с учетом данной корректировки на общую сумму 1 721 657 рублей 77 копеек, признает исковые требования обоснованными в данной части.

Принимая во внимание, что исковые требования удовлетворены частично, истец освобожден от уплаты государственной пошлины, на основании части 3 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина в размере 30 167 рублей 00 копеек подлежит взысканию с ответчика в федеральный бюджет.

            Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТИМУЛ» (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>, адрес: 386107, Республика Ингушетия, город Назрань, тер центральный округ, ул. Тангиева А-Г.Д., д. 45, офис 4) в пользу Администрации муниципального образования Арбажский муниципальный округ Кировской области (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 612180, 

<

...>) 1 721 657 (один миллион семьсот двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят семь) рублей 77 копеек пени.

В удовлетворении иска в остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТИМУЛ» (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>, адрес: 386107, Республика Ингушетия, город Назрань, тер центральный округ, ул. Тангиева А-Г.Д., д. 45, офис 4) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 30 167 (тридцать тысяч сто шестьдесят семь) рублей 00 копеек.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области.

Пересмотр в порядке кассационного производства решения арбитражного суда в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации производится в порядке и сроки, предусмотренные статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Кассационная жалоба в этом случае подается непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.

 

Судья                                                                                               С.А. Погудин